남한산성 성곽(제3남옹성~동문)보수․정비공사

실시설계 용역 과업지시서

2007. 06.

경 기 문 화 재 단

(남한산성추진기획단)

남한산성 성곽보수․정비공사 실시설계 용역 과업지시서

1. 사 업 명 : 남한산성 성곽(제3남옹성~동문)보수정비공사 설계용역

2. 목    적

호국성지의 역사적 의미를 지닌 남한산성의 훼손된 성곽(성벽 및 여담

등)을 보수․정비하기 위한 설계도서를 작성하고자 함.

3. 사업개요

3. 1. 지 정 별 : 국가사적 제57호

3. 2. 위    치 : 경기도 광주시 중부면 산성리 일원

3. 3. 공사비 추정금액 : 금 460백만원

3. 4. 사업구간 및 내용

3.4.1. 사업구간 : 제3남옹성~동문

3.4.2. 사업내용 : 성곽 및 여담보수

4. 과업수행기간

이 용역의 과업기간은 착수일로부터 3개월(90일간)으로 한다.

5. 설계변경조건

수급인은 다음의 경우 이 과업을 감독원과 합의하여 변경할 수 있다.

5.1. 과업 업무량의 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

5.2. 계약내용에 따른 이행 수량에 의한 정산 변경시

5.3. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

5.4. 천재지변, 전쟁등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때    5.5. 관계기관의 협의, 발주청의 계획이 변경되는 등 기타 필요하다고

인정되는 때

6. 주요업무의 사전승인

6.1. 착수보고서 제출

수급인은 과업착수 7일전에 예정공정표, 사업기술자 선임신고서가

첨부된 착수보고서를 제출하여야 한다.

6.2. 과업수행계획서

수급인은 착수보고서 제출후 즉시 현장여건등을 검토하고 아래

사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여야 한다.

6.2.1. 세부공정계획서(중간보고서 제출일정등 포함)

6.2.2. 사업의 단계별 성과품 제출계획서

6.2.3. 과업수행조직 및 인력(장비)투입 계획서

6.2.4. 기술경력 사항 확인서

6.2.5. 참여기술자 인적사항, 참여 과업내용 및 참여 예상기간

6.2.6. 참여기술자의 보안각서

6.3. 현지확인 및 과업수행방향 검토보고

현지확인을 통한 과업수행방향을 설정하고 이에 대한 검토보고서

(지정규격)를 과업착수 1개월(30일)내 감독원이 요구하는 부수로

제출하여야 한다.

6.4. 진도보고

6.4.1. 과업추진내용 및 공정현황

6.4.2. 각종도서 수발현황(승인사항 포함)

6.4.3. 과업수행상 중요 문제점 및 대책

6.4.4. 참여기술자 현황

7. 수급인의 책임

7.1. 수급인의 책임범위

수급인은 경기문화재단의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것이 아니며, 수급인은 용역준공후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완 요구가 있을 때에는 수급인의 부담으로 시정 조치하여야 한다.

7.2. 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항

발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로

작성 비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에

따라야 한다.

7.3. 안전관리의 의무

수급인은 관계법규에 의한 안전수칙의 준수등 안전관리에 최선을         다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고        및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

7.4. 법률준수의 의무

수급인이 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로          인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

8. 관계기관과의 협의 및 인․허가 사항

수급인은 관계 자문가의 자문을 2회 이상(현황조사후, 설계완료후)       받아 문화재보호법 제20조 규정에 의한 문화재청의 허가 및 기타

관계법령에 의한 사항을 이행하여야 하며 과업기간중 또는 과업완료후

라도 관계기관에 인․허가 및 각종 협의시 관련자료, 도서, 현황사진

등의 자료제출 요구에 대하여 성실하게 수행하여야 한다.

9. 관계법령 및 과업수행상 일반사항

9.1. 설계도서 작성의 기본적용 원칙은 『문화재 수리규범』을 근거로

하며 설계도서 작성할 때에는 반드시 『문화재수리공사 설계도서

작성기준』에 따라야 한다.

9.2. 주변 현황과 수리대상에 대한 철저한 현황조사(실측, 고증등)에

근거한 설계도서를 작성한다.

9.3. 수량산출은 건교부 제정 표준품셈 및 문화재 수리공사 표준품셈을

적용한다.

9.4. 복합단가로 구성된 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 1식으로

적용되는 단가에도 충분히 납득할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

9.5. 자재단가는 조달청 가격정보지를 적용하고 가격정보지에 없는 것은        물가자료를 사용하며, 물가자료에도 명시되지 않은 자재에 대하여

는 2개 이상의 생산업체의 견적서를 첨부하여야 한다.

9.6. 노임단가는 2007년 노임단가를 적용한다.

9.7. 설계자는 주요 결정사항에 대하여 경기문화재단의 요구가 있을시

자문회의를 개최하여야 하며, 현장조사시 또는 현장조사 전․후에

1회, 실시설계후 1회에 걸쳐 자문회의를 하여 필히 확인을

받아야 한다.

9.8. 복원설계도 및 조사자료의 소유권은 경기문화재단이 갖는다.

9.9. 설계자는 복원공사 도중 설계도면이 현장여건과 상이하고 추가

상세도가 필요하다고 시공자 및 담당원의 요구가 있을 시 협조

하여야 한다.

9.10. 실시설계후 추정 공사비와 설계공사비의 차이가 발생할 경우에는

비율에 따라 계약금액을 조정할 수 있다.

9.11. 복원설계과정을 공정표로 적성 제출하고 경기문화재단의 요청 및         설계자의 필요시 경과보고 하여야 한다.

10. 과업수행상 특기사항

완벽한 원형복원을 위하여 필요한 경우 정밀조사 등을 실시하고          사전에 기존 실시한 발굴조사 결과 및 관련 자료를 성실히 수집하여

설계도서를 작성한다.

10.1. 본 공사는 해체공사가 꼭 필요한 부분을 제외하고는 현상태에서의         보수․보강을 원칙으로 한다.

10.2. 기본설계도(배치도, 평면도, 종단면도, 횡단면도, 정면도, 측면도

배면도등)을 구간별로 작성한다.

10.3. 공사용으로 설치하는 가설물의 설치위치 및 작업로의 합리적

동선(자재 운반로 포함)등을 배치도 또는 시방서에 표시한다.

10.4. 각종 구조물의 연결․이음․맞춤등 모든 세부적인 사항에 대하여

상세도면 및 시방서를 작성한다.

10. 5. 각종 구조물의 기초 방식은 특수한 경우 이외는 재래의 기법을

사용한다.

10. 6. 배치도는 전체 성곽의 범위와 등고선․방위표시를 하고 현황 및

보수계획 평면도를 상세하게 작성한다.

10. 7. 입면도는 현황도와 계획도를 구분하여 작성하고, 해체 및 유실

축성범위를 보수대상 전 구간에 걸쳐 정확히 명시하여 작성한다.

(현황도와 계획도에는 그 범위를 명확히 명시하여 보기 쉽게

하고 이에 대한 범례를 첨부한다.)

10. 8. 성곽(여담)의 축성기법은 잘 남아있는 부분의 고증조사 및

발굴조사와 기존 축성기법에 따라 하되 구조적인 결함으로

상습적인 붕괴지역 또는 붕괴 우려지역은 보강방법(강회다짐,

철망보강, 구조부 보강등)을 강구할 수 있다.

10. 9. 성곽 단면도에는 현황, 해체범위 및 방법, 보충석재의 규격과

재질 및 쌓기 방법, 면석과 뒷채움석의 연결 시공방법, 기존

성곽 연결부분의 시공방법, 성곽 하단 마무리 방법등 모든

공정에 대하여 구체적이고 사실적으로 작성한다.

10.10. 단가산출시에는 단가 산출근거를 명확히 제시하거나 관계자료를

반드시 첨부하여 한다.(근거 자료의 복사본을 첨부하거나 자세한

근거를 명시)

10.11. 성곽(여담) 쌓기, 바닥강회다짐 공정등 주요 구조물에 대하여

사진 촬영을 하도록 시방서에 명시한다.

10.12. 발굴유구 및 현존하는 자료와 자료문헌을 참고하여 설계도를             작성한다.

10.13. 전석의 크기 및 형태에 대하여는 기존 여담부분의 전석을 자료로

하여 재래식 방법으로 전석을 생산하는 업체 또는 생산 가능한

업체를 조사하고 견적서를 특기 시방서(재료분석, 강도등 표기)

및 단가산출서 상에 첨부 및 명기하여야 한다.

10.14. 보수공사후 발생되는 잔토, 파쇄석등 반출재는 처리방안을 선택

하여 설계도서에 명시하고 내역에 반영하여야 한다.

10.15. 여장은 현재 남아있는 규모, 양식부분을 기준으로 하여 설계

하도록 하고 가급적 불규칙적인 여장의 형태가 되지 않게 타의

높이를 조정하도록 한다.

10.16. 타의 근총안은 설치목적과 지형의 특성등 현지여건에 맞게

근총안 바닥의 기울기를 조정하여 시공할 수 있도록 시방서에

명기한다.

10.17. 보수공사 시공시 등산객들의 왕래가 잦은 곳은 지형여건을

고려한 출입 통제시설 및 등산객의 편의를 위한 우회도로 개설

등의 설치계획을 첨부한다.

10.18. 보수방법, 재료의 선택, 기법, 양식을 시방서에 명시한다.

10.19. 낙석, 낙하물등 등산객, 작업인부에게 위험예상 구간은 낙하물

방지시설 등 안전사고 방지를 위한 시설물을 설치하고 그 비용을

내역에 적용한다.

10.20. 공사구간내 지장목에 대한 현황을 상세하게 조사하여 성곽보존과

관리에 지장이 있는 지장목에 대하여는 이식 또는 제거하도록

하며 제거범위와 뿌리제거 방법을 시방서에 작성한다.

10.21. 측점별로 표시판을 설치하여 성벽기울기, 해체보수 및 유실구간,

현황지반고 및 계획지반고 등을 명시한다.

10.22. 성벽(여장)으로 우수가 흐르지 않도록 자연배수로를 설치토록

한다.

10.23. 전체를 해체하지 않고 유실부분은 최대한 기존 부재를 채취하여

재사용하고 부족분은 기존 유구와 맞는 유사한 자재와 기법에

의해 보충하여 보강하는 방법을 강구하여 설계에 적용한다.

10.24. 3D 촬영전 제초작업 및 잡목제거를 한다.

10.25. 각종 자재등의 운반․채집장소는 현장조사후 공사구간과 최대한

근접하게 지정하고 현황도면에 구체적으로 명시한다.

10.26. 보수 및 성곽(여담)의 보수순서, 주의사항을 명시한다.

10.27. 보수대상의 전체 현황사진은 물론 근경․근접사진과 함께 교체

수리되는 각 부위별로 사진을 촬영하여 사진첩을 작성한다.

10.28. 사진첩의 각 사진은 고유번호를 부여하고 첫쪽에 내용과 사진

번호순으로 작성설명을 기입하고 보수범위를 사진상에 표시

하도록 한다.

10.29. 기본(현장)조사시 보수구간 성벽 및 여담에서 현재 자라고 있는

잡목으로 인하여 조사불가능 할시 잡목을 제거한 후 조사함으로

써 조사의 정밀도를 높여야 한다.

10.30. 성곽 설계시 옛문헌, 조사보고서 등을 참조하여 원형에 맞는

보수가 되도록 하여야 한다.

10.31. 수리공사 완료후 문화재 수리보고서 작성 제출(문화재보호법

시행규칙 제7조의 3 별표 2의 4)토록 명시한다.

11. 설계도서의 작성

11. 1. 현황사진에 의한 현황도면과 보수단면을 작성한다.

11. 2. 도면에 표시되는 모든 단위는 C.G.S 단위로 표시한다.

11. 3. 도면 축척은 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/50, 1/100, 1/200,

1/300, 1/600, 1/1,200으로 하여야 하며, 감독관의 별도 지시가

있을 때에는 이외의 축척으로 한다.

11. 4. 숫자는 아라비아 숫자로 표기하고 문자는 한글 사용을 원칙으로

하되 필요시 영문으로 표기할 수 있다.

11. 5. 제출되는 설계원도는 장기보관에 지장이 없는 우량품을 사용

하여야 한다.

11. 6. 설계도서는 배치도, 평면도, 입면도, 종단면도, 횡단면도,

상세도 순으로 작성한다.

11. 7. 설계도서는 현황과 보수계획도면으로 작성한다.

11. 8. 배치도는 보수범위만 도면화하지 말고 주변 현황과의 관계를

종합적으로 판단하여 측량에 의해 정확히 작성한다.

11. 9. 보수 및 교체가 필요한 개소, 범위를 도면에 구분 표시한다.

11.10. 부재 각 부분의 치수를 명확히 하여 수량 산출시 정확을

기하도록 한다.

11.11. 각종 부재의 노출된 부분, 결구 상세 설계도를 작성한다.

11.12. 각 부분의 맞춤 및 이음 상세도를 기존 가공수법대로 작성한다.

11.13. 토목공사시 고저 및 평판측량을 정확히 하여 작성한다.

11.14. 설계도서는 철저한 현황 실측조사를 근거로 하여 작성한다.

11.15. 설계도서를 작성함에 있어 상세도면을 충분히 작성하여 시공

및 적산이 용이하도록 하여야 한다.

12. 용역기간의 연기조건

12. 1. 천재지변등 불가피한 사유로 용역기간 연기의 필요성이 인정될 때

12. 2. 기타 경기문화재단에서 연기의 타당성이 인정될 때

13. 납품 성과품의 제출내역

13. 1. 설계내역서 5부(A4 규격)

13. 2. 설계도 각 5부(A1, A3 규격)

13. 3. 설계서, 도면 합본 4부(A4 규격)

13. 4. 설계시방서 5부(A4 규격)

13. 5. 공사비 산출서(공사원가 계산서, 일위대가 및 단가 산출서,

물량산출서, 견적서등) 5부(A4 규격)

13. 6. 설계원도 1부(도면 보관용 BOX에 넣어 납품)

13. 7. 설계서, 설계도서등 설계에 관한 자료 CD 3장

13. 8. 사진첩 1부(칼라사진, CD포함)

14. 기타사항

14. 1. 본 과업지시서의 내용에 해석차이가 있을 경우 경기문화재단의

해석에 따른다.

14. 2. 본 과업지시에 명기되지 않은 사항에 대하여는 경기문화재단의

방침과 지시에 따라야 한다.

14. 3. 모든 사진은 3″×  5″, 촬영대상은 전․후․좌․우로 정밀 촬영하여

인화한다.