.

남한행궁 하궐 및 주변시설 복원공사 실시설계용역

과 업 지 시 서

2007. 10

남한산성추진기획단

과  업  지  시  서

1. 과 업 명 : 남한행궁 하궐 및 주변시설 복원공사 실시설계 용역

2. 과업의 목적

남한행궁은 왕이 전란대비 및 행행(行幸)시 임시로 머물수 있는 별궁(別宮)으로 상궐(2002) 및 좌전(2004) 복원에 이어 하궐 및 주변시설을 복원·정비하여 호국역사의 산 교육장으로 활용하고자 함.

3. 과업 현황

가. 지 정 별 : 사적 480호

나. 위    치 : 경기도 광주시 중부면 산성리 935-3번지 일원

다. 사업계획 : 남한행궁 하궐 및 주변시설 복원·정비

라. 사업규모

- 하궐(정면7칸, 측면4칸), 일장각(정면4칸, 측면3칸), 내삼문(정면3칸, 측면1칸),

응청문·사주문·좌숙문(각 정면1칸, 측면1칸), 일장각 사주문(정면1칸, 측면1칸),

남행각1(정면4칸, 측면2칸), 남행각2(정면4칸, 측면1칸), 북행각(정면5칸, 측면1칸),

중문(정면3칸, 측면1칸), 외삼문(정면3칸, 측면2칸), 한남루(정면3칸, 측면2칸),

외삼문 남행각(정면10칸, 측면2칸), 외삼문 북행각(정면9칸, 측면1칸), 연지, 어구,

담장 등 기타 부대시설

마. 추정공사비 : 5,100,000,000원

4. 과업 기간

이 용역의 과업기간은 착수일로부터 3개월(90일)로 한다.

5. 설계변경조건

수급인은 다음의 경우 이 과업을 감독원과 협의하여 변경할 수 있다.

가. 과업의 업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급의 변경이 있을 때

나. 계약 내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경 시

다 민원 발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때

라. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무 수행이 불가능 할 때.

마. 관계기관과의 협의, 발주처의 계획이 변경되는 등 기타 필요하다고 인정되는 때.

6. 과업 내용

가. 문헌 및 자료조사

- 행궁 관련 문헌조사 및 유사 사례조사를 통한 자료수집

- 하궐 마당 통일신라건물지 관련 문헌조사 및 유사 사례조사를 통한 자료수집

나. 현황측량도 작성

- 행궁 및 주변측량 현황도 작성(행궁, 행궁권역과 주변 일곽의 유적 포함)

- 발굴유구의 현황배치도, 석축입면도, 단면도

다. 실시 설계도 작성

- 하궐(외행전), 내삼문, 한남루, 행각, 부속시설, 사주문, 협문, 연지, 담장 등을 포함한 하궐 및 주변시설

- 행궁전체의 배수계획도 및 어구를 포함한 배수시설

- 화재방지를 위한 소화설비 및 전기설비와 야간 무단침입자에 대비한 무인경비설비

- 기본설계도를 바탕으로 발굴조사에 의한 자료와 고증자료를 근거로 한 실시설계도를 작성.

라. 3차원 그래픽 모델링

- 설계도를 근거로 하여 복원된 행궁의 모습을 3차원그래픽으로 모델링하여 제작.

마. 하궐 마당에서 발굴된 통일신라건물지의 향후 보존 및 정비 계획안

7. 설계 지침

가. 수급인은 현장을 수시로 확인하고, 발굴조사 내용과 문헌 등을 참조하여 행궁(하궐) 복원공사와 연계하여 설계도서에 누락됨이 없이 건축물을 배치도에 표시한다.

나. 상궐을 기준으로 인근 배치관계를 각종 고증내용과 현황사진, 실측자료 등을 참조하여 배치도를 작성하고, 지표높이를 표기한다. (종·횡단면도 포함)

다. 복원대상 건물과 시설물은 발굴조사 내용과 현황사진 등 참고가 되는 자료를 최대한 활용하여 설계하고 각각의 자료에 대한 비교표를 작성하여야 한다.

라. 발굴 유구 및 현존 초석과 자료 문헌을 참고하여 영조척(營造尺)을 찾고 재사용할 수 있는 유구를 선별하여 관계전문가의 자문회의를 거쳐 실시설계에 반영 하여야 한다.

마. 하궐8차발굴 지도위원회의 결과를 바탕으로 하궐마당에서 발굴된 통일신라건물지의 보존방안을 강구한다.

바. 배수설비는 남한행궁의 강우량을 고려하여, 연지 및 어구와 연계되도록 설계하고,무인경비설비는 기존 상궐에 설치된 시스템과 연계되어 설계하여야 한다.

사. 한남루 주변 담장과 이위정은 기본설계에 누락되어 있으나, 발굴완료후 유구 등을 토대로 도면을 재작성하여 다시 자문을 받을 수 있도록 한다.

아. 수급인은 주요 결정사항이 있을시 자문계획을 수립 제출하여 자문을 받아 설계에 반영하여야 하며, 자문위원회는 경기문화재단에서 정하는 전문가와 관계자등으로 한다.

자. 설계자는 추후 복원공사 도중 설계서가 현장여건과 상이하고 추가 도면이 필요하여 담당원의 요구가 있을 시는 협조 하여야 한다.

차. 3차원그래픽은 전체영역내의 건물을 3차원 모델링하여 완공후 전체 행궁영역의 모습뿐 아니라 각각의 가구의 모습을 사전에 조립하여 향후 복원 공사시 참고할 수 있도록 한다.

카. 실시설계후 추정공사비와 설계공사비의 차이가 발생할 경우에는 비율에 따라 계약금액을 조정한다.

타. 도면 축척

도면은 가급적 아래 제시된 축척으로 작성하되, 불가피한 경우의 변경 및 아래 기재가 없는 사항에 대하여는 담당원과 협의하여 정할 수 있다. 단, (  )안의 축척은 A3 용지로 출력할 경우의 축척임.

- 행궁 전체 배치 관련 도면 : 1/400~500(800~1,000)

- 행궁 전체 대지 종·횡단면, 입면 관련 도면 : 1/400~500(800~1,000)

- 하궐 배치 관련 도면 : 1/200(400)

- 하궐 대지 종·횡 단면, 입면 관련 도면 : 1/400~500(800~1,000)

- 개별 건축물 평면, 종·횡 단면, 입면 관련 도면 : 1/20~50(40~100)

- 익공, 화반, 주두, 소로 등 포 관련 상세도면 : 1/5~10(10~20)

- 기단, 계단, 석축, 지붕, 잡상 관련 상세도면 : 1/5~10(10~20)

- 담장 등 부대시설 관련 도면 : 1/20~50(40~100)

- 담장 등 부대시설 관련 평·입·단면 상세도면 : 1/5~10(10~20)

- 가설공사 관련 도면은 임의축척

파. 기타 사항은 문화재청『문화재수리공사 설계도서 작성기준』에 의거 작성한다.

8. 납품도서

가. 설계설명서(A4) 10부

발굴조사 및 하궐복원공사 기본설계서를 검토하고, 다음의 내용을 포함한 관계설계설명서.

- 설계개요 및 법령등 제기준의 검토사항

- 기본설계서 및 현장 조사결과의 검토사항

- 주변지역에 대한 추가 설계반영 필요성 검토사항

- 건축형식의 비교 검토사항

- 통일신라유적지 관련 보존방안 및 계획안

- 하궐 및 주변시설 복원공사를 위한 공사기간 및 공사내역서 산출

- 측량 및 지반, 지질, 구조물 등 조사

- 공사에 필요한 각종 설비도면

- 실시설계도서 및 공사 시방서

- 관계법령(문화재보호법, 자연공원법 등) 등의 규정에 따라 검토하여야 할 사항(인허가 관련서류 포함)

- 기타 과업내용에 포함된 사항의 추진 경과 및 내용물 등을 기록하고, 설계설명서 내용만으로 건설업자가 시공이 가능하도록 상세한 공사범위와 내용 기술.

나. 실시설계도면(A3) 10부

기본설계를 바탕으로 건설업자가 시공에 필요한 설계도서

- 행궁 전체 배치 관련 도면

- 행궁 전체 대지 종·횡단면, 입면 관련 도면

- 하궐 배치 관련 도면

- 하궐 대지 종·횡 단면, 입면 관련 도면

- 석축, 토공, 배수로 등 정비공사관련 도서

- 배수로 전개도 및 설치구간 종,횡단면도, 쌓기 등의 상세도

- 하궐 공사구간내 수목식재 계획도

- 개별 건축물 평면, 종·횡 단면, 입면 앙시, 지붕관련 도면

- 개별 건축물 앙곡 및 안허리 곡선도

- 개별 건축물 익공, 화반, 주두, 소로 등 포 관련 상세도

- 개별 건축물 추녀, 사래, 선자연, 평연, 목기연 등 기타 목부재 상세도

- 개별 건축물 기초, 기단, 계단, 석축 등의 내밀기 및 쌓기 상세도

- 개별 건축물 지붕, 취두, 용두, 잡상, 기와, 막새 등 상세도

- 개별 건축물 고막이 및 창호 상세도

- 하궐 및 한남루 등 주련이 있는 건물의 경우 주련 상세도

- 구들이 있는 건물의 경우 구들 및 연도, 굴뚝 상세도

- 어도 부분의 각종 상세도, 집수정 상세도

- 기둥의 흘림 등 세부상세도 및 기타 담당원이 지정하는 세부상세도

- 담장 등 부대시설 관련 도면

- 기타 과업 내용에 포함된 모든 설계도면을 납품함.

다. 전산 데이터(CD) 5장

- 설계 설명서, 도면, 실측도, 3차원그래픽 등 용역 전체에 대한 데이터를 CD에 담아 납품.

라. 3차원 그래픽을 이용한 조감도 (A1) 2조

- 그래픽의 뷰는 담당원과 협의하여 정하되, 1조는 행궁 복원후 전경모습을 나타내고 나머지 1조는 행궁건물 전체가구의 모습을 나타내도록 한다.

- 조감도 크기 A1 size는 순수 그림의 크기이고 액자 포함하여 납품함.

9. 주요 업무의 사전승인

가. 착수보고서 제출

- 수급인은 과업 착수시 예정공정표, 사업기술자선임신고서가 포함된 착수보고서를 제출하여야 한다.

나. 과업수행계획서

수급인은 착수보고서 제출 후 현장여건 등을 검토한 후 아래사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여야 한다.

- 세부공정계획서

- 사업의 단계별 성과품 제출계획서

- 과업수행 조직 및 인력(장비)투입계획서

- 기술경력확인서

- 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여 예상기간

다. 진도보고(착수 후 2개월 내 중간보고서 제출)

과업수행 기간 중 중간보고서에는 다음 사항을 포함 제출하여야 한다.

- 과업추진 내용 및 공정현황

- 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황

- 추후 과업수행계획

라. 제 성과품 납품 전에 우리 재단의 심사를 받아야하며 지적사항은 완전히 수정하여 납품하여야 한다.

10. 행정 사항

가. 수급인은 설계도를 작성하여 관계규정에 의한(문화재보호법, 자연공원법, 건축법 등)허가, 승인, 협의를 받아야 한다.

나. 복원설계 작성시 조사된 모든 자료 및 고증조사자료 일체와 양식, 규격, 비교 분석표 등 담당원이 요구하는 관련자료 일체를 함께 납품하고 이에 대한 지적소유권은 경기문화재단에 있다.

다. 본 과업지시서의 내용에 해석차이가 있을 경우 경기문화재단의 해석에 따른다.

라. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 경기문화재단의 방침과 지시에 따라야 한다.

11. 설계서상 하자의 책임한계

가. 계약자가 체출한 설계도서상 하자 발생시 그에 대한 책임을 진다.

나. 기타 기술상 중대한 결함으로 인하여 경제적 손실 및 실시설계 진행에 지장을 초래 하였을 경우 그에 대한 책임을 진다.

12. 과업수행 보완 관리 대책

용역업체는 용역물의 보완 관리에 철저를 기하여야 하며, 용역 성과품의 인쇄는 본 과업지시서에 명시된 부수 이상의 인쇄를 금할 것(다만, 발주청의 추가 인쇄 요청이 있을 경우에는 제외한다.)

13. 해약의 조건

본 계약의 해약 조건은 다음과 같으며, 용역업체는 이에 대한 손실을 보상하여야 한다.

가. 본 계약을 수행함에 있어 계약 내용이나 과업지침을 위반할 때

나. 성실한 과업 이행을 하지 않아 목적 달성이 어려울 때

다. 기타 본 과업을 계속 수행할 수 없는 상황이 발생할 때

14. 기타

문화재 보수 정비사업 지침에 의거 성실히 설계도를 작성한다.