과업지시서

1. 과업의 명칭 : 경기도박물관 리모델링 공사 설계 용역

2. 과업의 목적

가. 경기도박물관 리모델링 공사 설계용역은 중앙홀 큐브를 철거하여 기획전시 공간을 확보하고 전시동 출입구 전면을 개보수하여 쾌적한 관람분위기 조성

나. 관람객 맞춤 서비스를 제공을 위한 편의시설(카페테리아등) 공간 확충과 학습하는 박물관으로서의 역할을 수행할 수 있는 교육공간 확보등

3. 과업(설계)용역 현황

가. 과업의 개요

1) 현장위치 : 경기도 용인시 기흥구 상갈동 85번지

2) 시설규모

가) 대지면적(㎡) : 40,641㎡

나) 건축연면적(㎡) : 10,415.45㎡

다) 지하1층 ~ 지상3층

라) 주용도 : 문화 및 집회시설

마) 지역구분 : 자연녹지지역

사) 건폐율 : 11.6644%

아) 용적률 : 19.2007%

자) 구  조 : 철근콘크리트

3) 총 공사비 : 838,967,000(부가세 포함)

4. 과업의 규모

가. 제시된 공사비는 경기도박물관 내 「중앙홀 큐브 철거 및 편의시설 설치, 회의실 리모델링」관련 철거비, 건축, 구조, 기계, 전기, 토목, 통신, 방재, 인테리어 등에 대한 모든 공사비이며, 공종간 배분하여 예산액 내에서 설계가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

나. 폐기물처리비, 철거비, 이전비, 각종 분담금(상하수도, 전기, 가스 등 인입공사비 분담금)포함됨.

다. 공사기간 : 실시설계시 과업수행자가 산출한 공기로 한다.

라. 과업기간 : 착수일로부터 90일(휴일포함)

1) 건축 및 인테리어설계 : 계획 및 중간설계 60일, 실시설계 30일

2) 설계용역 착수일은 계약 후 7일 이내로 한다.

5. 과업 지침

가. 일반지침

1) 설계는 계획설계, 중간설계, 실시설계, 필요시 대안설계로 구분한다.

2) 용역자는 설계용역에 있어 과업지시서에 의하여 작성하되 과업지시

서에 명기되지 아니한 사항 및 의문사항은 발주처와 협의한다.

3) 유지관리가 경제적이어야 하고 관리상 하자 발생하지 않는 방향으로

설계하여야 하며, 계획설계, 중간설계, 실시설계, 대안설계시 단계 별로

발주처가 정한 설계감리자 및 감독관의 승인을 득한후(서면으로 승인

요청) 단계별로 진행하여야 한다.

4) 설계도면은 CAD작성을 원칙으로 하며, 각종 계산서 및 내역은 전산

처리가 가능하도록 하여야 함.

5) 건축과 관련된 각종 제반 법령에 적합하도록 설계되어야 함

6) 본 과업 수행중 책임 관리인이나 기술진, 기타 고용인은 성실히 발주

처의 지시에 따라야 하며, 본 과업의 수행에 필요하다면 전문가의 자

문 및 국내의 기술고용과 정부자료의 최신 기술을 이용한다

7) 제출된 설계도서는 용역자의 책임하에 관계법규에 따라 허가 (승인, 협

의, 준공 등)를 득할 때까지 협조한다.

8) 제출된 설계도서에 대한 하자 즉 공사 시공 및 준공 후 설계구조의 불

안전으로 발생시는 하자와 설계 후 공사 물량의 착오로 인하여 손해가

있을 때에는 설계자로서 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로써

발생되는 형․민사상의 책임을 진다

나. 감독 및 보고

1) 본 용역은 설계 감리자 및 발주처 감독관의 지시하에 수행하여야 한다.

2) 계약체결 후 착수계 및 다음 사항이 포함된 과업 수행계획서를 제출

하고 과업을 착수하여야 한다.

•  과업 수행 방향과 추진방법

•  세부 실시공정 계획표

•  각 분야별 과업수행 인원 편성표

5. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계단계에 기초설계가 되는 마스터플랜을 수립(

개요 및 공간구성, 전시환경계획, ZONE별 연출기획, 디자인 기획등)

포함하여야 한다.

나. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계, 필요시대안설계로 구성되며,

실시 설계는 해당기관과 건축협의(인∙허가)와 시공이 가능하고 세부

적인 공사비를 산정할 수 있어야한다.

다. 계획설계시 리모델링 사업의 기초가되는 마스터플랜 수립후 프레젠테

이션(presentation)을 실시하여 발주처의 승낙을 득한후 설계에 착수

한다.

라. 본 과업은 발주기관과 수급인이 체결한 설계용역계약서에 의한 일체

의 설계도서 작성, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료의 작

성 등, 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

한다.

1) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등 각 부문별 계획설계(안)

도서작성 일체

2) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등 각 부문별 기본(중간)설계

도서작성 일체

3) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등 각 부문별 실시설계 도서

작성 일체

4) 각종 관계법령 규정에 의한 인․허가 등에 필요한 서류 작성

5) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

※ 대안설계 실시시 제5조 라항 1)~3)항목에 준하여 작성한다.

마.  본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항    은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

6. 과업의 내용

가. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 수급인의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로     인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 관     계법령에 따라 수급인이 부담(배상)한다.

2) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료한다. 단, 설     계용역 완료(납품) 후라도 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협     의 불가, 구조적인 모순, 특정업체 제품 명기 등)로 인하여 발생되는 설계     변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 수급인은 설계상의 하자내     용이 보완될 때까지 무상으로 별도 수행하고 관계법령에 따라 수급인이     일체의 책임 배상하여야 한다.

3) 다음 경우에는 과업기간을 정지하거나 발주기관이 지정하는 감독자의 승     인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시      정지)

라) 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제33조(계약상대자의 기      술용역의 정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경 등으로 과업내용이 변경되었을 경우

나. 용역 완료계 제출시 지방자치단체 공사계약일반조건에서 정하

는 손해보험증서와 하자보수보증금을 제출하여야 한다.

다. 법규준수의 책임

본 설계용역의 최종도면은 도시공원법, 건축법, 소방법, 국토의계획및이용에관한법률, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률(보건복지부 제작 장애인편의시설 상세표준도 포함),지적법 등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고 관계기관과의 건축협의가 완료된 것이어야 한다.

라. 설계변경

1) 본 과업수행중 발주청과 수급인간의 의견이 일치하지 않을 때에는 발      주처의 결정에 따라야하며 아래와 같은 사유가 발생하면 변경 할 수      있다.

가) 발주청의 정책변동이나 기타 사정으로 과업수행의 변경이 불가피 할        때

나) 당 초 과업 예측 과정에서 예기치 못한 상황이 발생한 경우

다) 민원발생, 천재지변 등의 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불        가피 할 때

마. 주요업무의 사전승인

수급인은 다음사항에 대하여 사전에 발주청과 협의하여 과업을 수행하    여야 한다.

1) 과업 수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 주요 설계내용 및 방침의 결정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 설계기준의 설정 또는 변경

5) 기타 감독원의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

6) 설계단계(계획설계, 중간설계, 실시설계, 대안설계)별로 프레젠테이션       (presentation)을 실시하여 발주처가 정한 설계감리자 및 감독관의 승      인을 득한후(서면으로 승인요청) 단계별로 진행하여야 한다.

※ 각 설계단계는 발주처의 의견을 반영하여야 한다.

바. 업무보고 및 회의 : 설계자는 설계진행시 매주 한차례 정기적으로

설계진행사항을 보고할 의무 및 회의에 참석하여야 하고 감독관의

요청시 또는 설계용역 진행 중 문제점 발생시에는 수시로 문제점을       그 사유와 대책을 명시하여 제출하여야 한다.

1) 월간 공정보고 : 매월 1회(별도지정)

매월 말일자를 기준으로 업무수행사항 및 공정현황, 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항, 업무관련회의 및 발주청 지시사항 처리결과(승인사항 포함), 과업수행상 중요 문제점 및 대책, 참여기술자 현황, 다음달 과업수행 계획 등을 작성하여 붙임의 양식에 의거 제출한다.

2) 작업일지 작성

과업착수와 동시에 붙임 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 한다.

3) 실시설계 완료보고회

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아   니한 사항에 대하여는 수급인이 임의로 해석할 수 없으며,   발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 주관기관은 수급인에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설   계도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며 수   급인은 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

마) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와    참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의   에 참석토록 하여야 한다.

4) 업무 착수회의

가) 업무 착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로    부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 발주기관과 협의

하여 개최한다.

나) 업무 착수회의시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로

설계 진행계획을 설명하여야 한다.

다) 수시 회의

설계진행 중 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

7. 공사비 등 산정

가. 수급인은 총 사업비 내에서 설계를 추진하되, 부득이한 증액 사유 발생시 그 사유와 대안 등의 자료를 제출하여 발주기관의 사전 승인을 받아야 한다.

나. 공사비는 경기도박물관 리모델링 사업에 필요한 모든 비용으로 정부공인자료 등 객관적인 근거에 의하여 산정하여야 한다.

(1) 정부 제정 노임단가(2009년 기준)

(2) 각종 가격정보지에 의한 최저 단가(2009년 기준)

(3) 공인 원가 산정 전문기관의 산출금액(2009년 기준)

(4) 감정평가법인의 감정가격 또는 정부 공표가격(2009년 기준)

(5) 기타 물가지에도 없는 것은 견적서 또는 원가계산에 의한 실거    래 가격

다. 사업비에는 품질시험비 등 사업수행에 필요한 일체의 비용이 포함되어야 하며, 전기 인입비, 폐기물 처리비, 인테리어공사비, 용역 원가계산 검토용역비 등은 별도 산출하여 사업비에 포함되어  있어야 한다.

라. 수급인는 용역완료 후에라도 수급인의 귀책사유로 인해 정부 또는 지방자치단체 감사기관의 지적에 따른 변상요구에 대하여는 발주기관이 정한 기한 내에 변상하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8. 설계의 하자

가. 수급인은 설계상 하자로 인하여 용역 설계시, 공사 시공시, 공사 완료 후 건설산업기본법 제28조의 규정에 의한 하자담보 기간 내에 인명피해, 예산손실 등을 초래하였을 때는 원인규명을 하여 수급인의 책임일 경우 변제 및 민․형사상 책임을 진다.

나. 수급인은 용역설계 납품 후 일지라도 용역설계에 대한 공사시공에 있어 자문을 요할 시에는 이에 적극 응해야 한다.

9. 계약의 취소

가. 본 과업지시서(계약 후 제시하는 제반자료 포함)의 지시사항 및 발주자의 정당한 지시를 이행치 않을 경우

나. 수급인의 귀책사유로 인하여 설계작업이 진행되지 않아 납품예정일내에 납품치 못할 것이 예상되어 발주기관 계획에 중대한 차질이 유발될 것으로 판단될 경우

다. 수급인의 고의 또는 부주의로 설계도서 내용이 공개되거나 제반    보안 준규를 준수 하지 않을 경우

10. 공사 예정표 작성

수급인는 공사 현장여건, 공종별 소요일정, 공종간의 연계작업관계, 장비 및 인력투입 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하고, 이에 부합되는 공사예정공정표를 발주기관과 별도 협의 후 작성․제출하여야 한다.

11. 관련기관 인․허가 협조

가) 수급인은 설계도서 납품 전 관련법규에 의한 각종 인․허가 및 건축협의 등을 이행하여야 하고 인․허가시 조건 또는 부과사항은 보완 및 반영한 후 납품하고, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

나) 수급인은 설계기간 또는 완료 후에도 공사착공에 필요한 제반 행정 절차(심의, 인․허가 등)가 조속 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며, 이를 수행함에 있어 발주기관이 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 완벽하게 보완하여야 한다.

다) 수급인은 상기 행정절차에 대하여 다음과 같이 발주기관의 지시에 따라야 한다.

(1) 본 과업의 완료 후에도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

(2) 발주기관의 승인협의를 거친 사항이라도 경미한 부분의 추후 계획변경, 설계상의 잘못이 발견될 시는 추가 용역비의 청구 없이 수급인의 책임하에 수정․ 보완하여야 한다.

라) 건축협의에 따른 제반수속(증축관련) 및 서류제출은 발주기관의 지시에 따라 수급인이 책임지고 처리하여야 하며, 준공시 건축물대장 작성 및 협의시 건축사 날인 등 적극적으로 협조하여야 한다.

12. 설계검토 및 회의 자료의 제출

가. 본 과업 수행 기간중 발주기관은 설계회의를 구성하며 수급인은 다음과 같은 경우를 포함하여 주요 결정사항에 대하여 발주처의 요구가 있을시 자문회의를 개최하여야 하며, 현장조사시 또는 현장조사 전.후 및 각 단계의 설계시 자문회의를 하여 설계사항에 대한 자문회의를 받아야 하고, 이에 필요한 관련 자료준비는 수급인의 부담으로 제출하여야 한다.

(1) 착수단계

(2) 중간단계

(3) 마무리단계

(4) 설계내용 중 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을 위하여 자문을 받을 경우 등 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

나. 중간검토 또는 설계자문회의 검토사항에 대해서는 설계반영여부를 발주기관과 협의한 부분에 대하여는 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

다. 본 과업기간 중 발주기관은 상기사항과는 별도로, 필요시 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 필요한 자료는 수급인이 준비한다.

라. 건설심의(설계자문)용 성과품의 표지에는 당해 성과품의 용도구분과 과업책임기술자 및 분야별 책임기술자, 그리고 발주기관 감독자의 확인서명을 받아서 제출한다.

13. 사용자재

가. 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 최대한 국산자재를 사용하고 KS제품과 고효율 인증제품, 조달청 우수제품이 있는 경우에 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단 외국산 자재를 사용시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

나. 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 안 된다.

14. 착수계

수급인은 발주기관과 계약 후 7일 이내에 착수계, 보안각서, 과업수행계획표, 참여기술자 명단 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여 발주청의 승인을 받은 후 과업을 시행하여야 한다.

15. 설계용역 예정공정표

가. 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 설계용역 예정공정표(PERT/CPM)를 작성하여 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 수급인은 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정관리기법을 제안할 수 있다.

나. 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 수급인은 발주기관이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

다. 수급인은 기술용역 예정공정표를 용역착수 시뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토하여 적절히 수정∙보완한다.

라. 실시설계는 설계용역 완료 예정일 30일 전에 예비준공검사를 받아야 하며 각 분야별 과업수행자와 합동 검토할 수 있도록 조치하여 보완내용을 반영하여 최종 납품하여야 한다

16. 감독관 선임, 업무감독 및 협의 등

가. 주관기관은 설계자의 과업수행을 감독하기 위하여 설계감리․감독관을 선임하여 업무지시,자문 등의 기능을 수행하게 할 수 있으며, 설계자는 과업수행과 관련된 세부사항은 수시로 설계감리 및 감독관과 협의하여야 한다.

나. 수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독관의 지시 및 감독을 받는다.

17. 계약자의 수수료 등 제반 경비 부담

가. 수급자는 본 과업을 수행하는데 있어 제반 설계에 필요한 자료조사․수집 등의 경비 일체를 부담한다.

나. 주관기관이 필요에 의해 과업발표회(또는 세미나) 등을 요구할 경우, 수급자는 이에 대해 관련자료 등을 준비하여야 한다.

18. 과업 범위의 변경 및 설계비 정산 등

가. 주관기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 주관기관의 방침에 따라야 한다. 이때 과업범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위내에서 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

나. 추정사업비(계약서상 제시된 공사비 예산액)와 실시설계상 사업비간의 차이(실시설계상 사업비가 추정사업비 보다 적을시)가 있을 시에는 정산 처리한다.

다. 수급자가 부득이한 사유로 기한 내에 과업을 완료하지 못할 경우에는 사전에 주관기관과 협의하여 승인을 얻어야만 기간 연장이 가능하며, 이로 인하여 발생되는 제경비는 수급자가 부담하여야 한다.

19. 저작권, 소유권 및 특허권 등

가. 용역 계약에 의해 수행된 결과물에 대한 저작권은 설계용역 특수조건이 정하는바에 따른다.

나. 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은경기문화재단의(이하: 주관기관) 소유로 하고 주관기관의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

다. 본 용역 수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 주관기관의 동의 없이 사용할 때는 수급자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

라. 본 용역 수행에 관련되어 설계자가 제공하는 제3자의 특허권이나, 저작권 주장으로 인한 주관기관 또는 그 지정인에게 소송 또는 배상청구가 제기되는 경우 설계자는 주관기관의 권리, 소유권 이익을 보호해야 하며 여하한 손실이나 손해 등을 받지 않도록 조치해야 한다. 만일, 그러한 소송, 소송절차에 의해 용역의 전체

혹은 일부가 특허권 등의 침해 사실이 있는 것으로 판결되면 수급인은 즉시 수급인 비용으로 동 용역에 사용될 수 있도록 특허권 등을 구매 또는 대체하여야 한다.

20. 용역기간의 연기조건

가. 천재지변 등 불가피한 사유로 용약기간 연기의 필요성이 인정될 때

나. 기타 경기문화재단에서 연기의 타당성이 인정될 때

21. 기타

지방자치단체 기술용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)에 의거 설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

22. 수급인 유의사항

가. 본 과업지시서에 지시된 사항은 수급인 임의로 해석할 수 없으며, 본 과업지시서 에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 주관기관과 협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항은 협조하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 수급인이 부담한다.

나. 다음 각 항에 해당하는 사례가 발생하였을 때는 주관기관의 판단에 의하여 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 수급인은 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로 보상을 청구할 수 없다.

1) 본 지침에 부합되지 않게 설계하거나 주관기관의 합리적인 지시      에 따르지 않을 때

2) 설계업무가 부진하여 계획기간 내에 성과품을 납품할 수 없다고      판단되었을 때

3) 수급인의 능력으로는 도저히 소기의 목적을 달성할 수 없다고      판단되었을 때

다. 설계도서 납품 후에도 설계하자, 관련법규에 대한 미 검토 등의 사항이 있을 경우 변경 조치하여야 하며 용역수행중 또는 수행완료 후에 설계용역비가 과다 산정되었거나 지불되었음이 판명되어 주관기관으로부터 반납 또는 추가보완이 필요할 경우 즉시 이에 수락 동의하여야 한다.

라. 수급인은 최신의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약의무를 완수해야 하며 의무수행에 있어서 모든 합당한 기술과 주의 및 근면한 태도로 최선을 다하여야 한다.

마. 수급인은 주관기관이 요청하는 용역관련 자료를 신속히 제출하여야 하며, 과업지시서에 명시된 성과품들을 지정된 납기 내에 작성 제출해야 한다.

사. 수급인은 각 분야별로 자체 회의 심의에 대비한 제반 성과물 등을 준비하여야 하며, 또한 회의에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하고 회의결과 지적사항이 있을 경우 이를 검토 수정 보완하여야 한다.

아. 수급인은 원칙적으로 제시된 총 추정사업비(설계비 산출시 제시된 금액)를 초과해서 설계할 수 없으며, 다만 다음 사항이 발생시 그 사유와 대안을 기재한 서류를 제출하여 정당성을 설명하여 주관기관의 승인을 받아야 한다.

1) 계획 및 중간설계상의 사업비가 설계용역 계약시 제시한 총사업       비와 다를 경우

2) 실시설계상의 사업비가 계획 및 중간설계시 승인된 총사업비와       다를 경우

자. 수급인은 본 공사에 사용되는 재료로 국산품을 최대한 사용하되 설계의 성능이 보장될 수 있는 제품이어야 한다. 재료를 선정함에 있어서는 사전에 주관기관의 승인을 득하여야 하며, 설계와 관련 실험 또는 시험이 필요한 경우 이를 실시하여야하며 이에 소용되는 비용은 수급인이 부담한다.

차. 수급인은 공사현장의 각종 시설자료를 조사하고, 건축, 전기, 소방, 인테리어부분에서 관공서 등 관련부서와 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

카. 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 관련법규의 기준 및 본 과업지시서에 의거 합리적으로 과업을 수행하여야 하며, 과업지시서의 의문사항이 있을 시에는 감독관과 사전 협의 조정한 후 과업을 수행하여야 한다.

타. 본 과업지시서의 내용과 다른 기준 도서의 내용이 상이한 경우에는 본 과업지시서의 내용이 우선하며, 과업수행에는 필요하나 관련법규 및 과업 지시서에 누락된 사항은 발주기관과 사전 협의하여 결정하여야 한다. 단, 누락된 경미한 사항은 수급인 부담으로 시행하여야 한다.

1) 수급인은 본 과업수행시 수집한 자료와 관계기관에 제시할 기초자료에 대하여는 발주기관과 충분히 협의하여 설계에 착오가 없도록 하며, 본 과업에 적용되는 모든 참고자료의 목록은 설계성과 보고서에 첨부해야 한다.

2) 수급인의 직원이 본 용역을 수행함에 있어 수행능력이 부족하다고 감독관이 판정하여 교체를 요구할 때에는 수급인은 지체없이 당해 직원을 교체하여야 하며, 이로 인하여 계약의무 수행이 지연되게 해서는 안된다.

3) 수급인은 본 용역을 수행함에 있어 발주기관이 별도 시행하는 관련 다른 용역의성과품과 부합되도록 설계하여야 한다.

4) 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 박물관 기능의 충족, 확장성, 관람객에 대한안전 및 편의보장, 에너지 절약, 유지관리의 경제성 등이 확보되어야 한다.

5) 수급인은 공사시설에 장애자, 노약자 등을 위한 시설을 고려하여 설계하여야 한다.

6) 신기술 및 특허사항, 실용신안 등 제품은 설계시 설계 및 시방서 등에 일반자재로 명기하여 특정업체 제품이 설계도서에 명기되어서는 안된다.

7) 본 과업 지시내용에 의문이 있거나 과업지시내용에 명시되지 않은 사항에 대하여는 주관기관과 협의하여 결정한다.

8) 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성 비치하여야 하며,발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

23. 과업의 수행기준(법령 등의 적용 기준 및 시방서 작성 기준)

가. 법령 등의 적용기준

1) 수급자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시공원법, 항공법, 소방법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 지방자치단체 기술용역입찰유의서 제5조(법령 등의 숙지)에 의거 박물관 관련법규, 예산회계 관련 법규, 건축법(용인시 건축조례 포함),건축사법, 건설업법,  국가기술자격법, 엔지니어링기술진흥법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법, 국토의계획 및 이용에 관한 법

률(용인시 조례 포함), 오수분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 상수도법, 환경교통재해 등에 관한 영향평가법, 도로법, 측량법,  하수도법, 주차장법, 지적법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 시설물의 안전관리에 관한 특별법규, 소방 관련 법규, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신기본법,전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음진동규제법, 기상업무 관련법규, 보안관련 법규, 승강기설치 및 관리에 관한 법규, 근로기준 및 산업안전

보건 관련 법규, 전자용품 안전관리법, 산업표준화 법규, 공산품질 관리 법규, KS규정, 내선규정 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는관계법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 하여야 한다.

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술관리법 제23조의2(설계도서의 작성 등)건설기술관리법시행규칙, 제14조의2(설계도서의 작성), 제14조의3(설계도서의 검토), 건설교통부고시 : 설계도서 작성기준, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차,

KSF1509 : 건축부품의 치수정하기 등 관련 규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

4) 계획(안) 제출시 현장조사보고서와 관련법규 검토서를 제출하여 사전에 제약되는요인이 쉽게 분석되어 문제발생에 대처하여야 한다.

나. 시방서 작성기준

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특기시방서를 작성하여야 한다.

2) 표준시방서는 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특기시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법,         제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설       치기준, 설치방법, 시험 방법,시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

Ⅱ. 일반지침

1. 공통사항

가. 설계의 목표와 추진 절차

1) 수급인은 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 해당공사에 대한 전문적 기술능력

과 경험을 가진 인력의 배치와 과업의 목적, 범위, 공정, 자금 등 사업계획을

세워 최상의 설계가 되도록 해야한다.

2) 수급인은 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주기관이

요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여 완성할 수 있도록 품질관리계획을

작성하여 발주기관의 승인을 받아야한다.

3) 수급인은 발주기관의 승인 없이 과업의 범위∙내용 등을 변경할 수 없다.

4) 수급인은 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 설계용역의 각 단계별 성과품을

검토하고 그에 대한 책임을 진다.

5) 설계용역은 관련법규와 계약조건, 발주기관과 협의사항 등을 만족하여야 한다.

만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 수급인은 발주기관에

그 내용과 해결방안을 문서로 보고한다.

6) 수급인은 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건 또는

제공된 자료의 문제점이나 계약문서 간의 상이점에 대해 발견 즉시 발주기관에

문서로 알려야한다.

7) 수급인은 설계도서에 실제조건(대지의 현 상황 등)을 반영한다.

8) 수급인은 설계도서를 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등 공종별로

분리하여 작성한다.

9) 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 인테리어 등 각

공종별로 서로 협조하여, 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 한다.

나. 적용요령

1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 수급인이 발주기관과

협의하여 구체화시킨다.

2) 수급인은 설계내용에 대하여 발주기관과 협의 또는 상의하고자할 때에는 당해

공종 책임기술자로 하여금 발주기관과 협의한다.

3) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는

수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 정한다.

4) 본 과업지시서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를

제출하여 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

5) 발주기관은 수급인에게 설계 중 완성된 부분의 설계도서를 제출∙요구하여 수정∙

보완을 지시할 수 있으며 수급인은 정당한 이유없이 이를 거절할 수 없다.

6) 각종 계산기준은 국내기준을 원칙으로 한다. 다만 부득이 외국의 기준을 적용할

경우 발주기관과 협의한다.

7) 설계도면 및 시방서에 특정제품․공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 신기술 적용

등 부득이한 경우에는 발주기관이 수요기관과의 협의 또는 기술심의를 거쳐

승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

다. 설계시 고려사항

1) 관람객 및 관리자의 요구와 수요를 감안한 쾌적한 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 외관은 조형성이 가미된 독창성 있는

설계로 쾌적한 사무환경 조성

나) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

다) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

라) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의

크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인

설계

2) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 인테리어 등의 설계시 창호, 내외벽, 스라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한,

단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

- 건축법 제59조(건축물의 에너지이용과 폐자재 활용)

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제21조(건축물의 열 손실방지) 및 제22조

(에너지절약계획서의 제출), 건축물의 에너지절약설계기준에 적합한 설계

나) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

다) 관람객 및 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

3) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을

고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,

방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

4) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에

따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 등의 영향을

고려한 구조안정성이 확보된 설계

나) 향후 시설의 수직 또는 수평방향으로의 증축계획이 있는 경우에는 이를 설계 시

반영하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중,

Expansion Joint 등)을 반영할 필요가 있음.

2. 조사 및 자료수집

가. 조사항목

1) 현지조사

2) 각종 서류조사

나. 조사내용

1) 현지조사

가) 현장조사

수급인은 큐브의 형태, 기둥 및 보의 설치상태와 편의시설 인테리어 부분 구조

등의 경기도박물관 리모델링에 필요한 사항을 조사하고 2면 이상에서 사진

촬영한다.

2) 각종 서류조사

가) 토지대장, 지적도, 등기부등본, 도시계획확인원, 지방자치단체조례 등을

조사한다.

나) 기후조사

3) 조사내용의 보고

수급인은 조사 및 자료의 수집이 완료되면 A4용지(필요시 규격변경)에 5부 이상

작성하여 업무협의 시 제출하고 종합보고서에 수록한다.

3. 착수시 제출서류

가. 제출서류

1) 수급인은 용역착수시에 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.)를 각 2부

(1부는 원본, 1부는 사본)제출한다.

가) 착수계 1부. 《Ⅰ.총칙 3.과업의 내용 다.과업의 내용 3)업무보고 및 회의, 13)

착수계 참조》

나) 설계용역 예정공정표(계획, 기본, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부.

《Ⅰ.총칙 3.과업의 내용 다.과업의 내용 14) 설계용역 예정공정표 참조 》

다) 인력 및 장비투입계획서 1부.

라) 계약금액에 대한 산출내역서 1부.

마) 설계용역 수행 조직표 1부.

바) 책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부) [붙임 2] 1부.

사) 책임기술자 및 분야별 참여기술자 보안각서 [붙임 1] 1부.

아) 각 공종별(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등)의 분야별 책임기술자

명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격 증명, 건설기술인협회 등 공인

기관에서 발행하는 경력증명서 원본첨부, 이력서 등 각 1부.

자) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 서류

4. 계획설계

가. 정의

“계획설계” 라 함은 발주기관에서 제공한 자료와 조사 및 자료수집내용을 근거로

마스터플랜 (개요 및 공간구성, 전시환경계획, ZONE별 연출기획, 디자인 기획등)     및 건축, 인테리어의 규모 및 내용, 예산액, 기능성, 구조적 안전성, 미관적 측면에서 설계목표 및  정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 설계로서, 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을 발주기관에  제안하여 승인받는 설계이다.

나. 계획설계 내용 및 작성

1) 계획설계서는  <Ⅲ.기술지침> 및 [붙임 8. 계획설계 내용]에 의거 작성한다.

2) 수급인은 조사 및 자료수집에서 얻은 정보를 기초로 합리적인 계획설계가 되도록

한다.

3) 수급인이 제출한 계획(안)이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보 시 수급인은

조속한 시일 안에 새로운 대안을 재 작성하여 제출하여야 한다.

4) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완․제출하여

발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

5) 계획설계(안) 작성시 포함사항

가) 설계설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요,

인테리어 계획 개요, 장애자 이동 동선계획, 우․오수 처리계획), 배치도 등〕

나) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Masterplan)

다) 대지 내 동선계획, 전시동과 편의시설간의 동선계획(진입동선, 관람동선,

관리동선)

라) 계획설계(안) 조감도

마) 설계개요

바) 전시동 전면 확충부분의 건물 입면형태 및 주변과의 조화

사) 현장조사 결과보고서

아) 각 공종별 공사비 산정 및 설계방향설정

자) 기존 유사 건물 조사분석 자료 등

차) 제반 법규검토 및 과업내용검토서

카) 공사에 필요한 공법

6) 건축, 기계설비, 전기, 통신, 인테리어 등 공종간의 업무분장. 공종별 업무영역

을 분명히 하기 위하여 공종간 업무분장은 [붙임 8]에 따라  공종 책임자간의

업무협의를 하여 그 결과를 발주기관에 통보하고 설계에 반영한다.

7) 현장 조사방법

가) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

(1) 문헌 및 서류조사

(가) 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수

있는 모든 사항에 대하여 기상통계에 의한 과거 기상기록 통계자료 조사

(나) 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원,

등기부등본, 지방자치단체 조례(용인시) 등 특이한 사항을 모두 조사

하여야 한다.

(2) 현장조사

(가) 수급인은 큐브의 형태, 기둥 및 보의 설치상태와 편의시설 인테리어 부분

구조 등의 경기도박물관 리모델링에 필요한 사항을 조하하고 전체를 확인할

수 있는 전경을 2면 이상에서 사진촬영․보관하여야 한다.

(나) 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야

한다.

(다) 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원

요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

(라) 가스, 상․하수도, 오폐수처리방법, 전기, 통신, 등의 박물관 기반시설에

관한 일체의 사항을 조사한다.

(마) 현장의 대지내 주위 경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고

기록하여야 한다.

나) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․

제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

8) 계획설계서 제출방법

계획설계가 완료되면 수급인은 계획설계 검사원을 작성∙제출하여야 하며, 계획설계

단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 수급인은 새로운 계획설계(안)을 준비하여

발주기관이 선택할 수 있도록 한다.

가) 설계검사원 1부.

나) 수 량 : 납품도서 목록 참조(필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

다) 축 척 : 실시설계 기준으로 작성

5. 중간설계

가. 정의

“중간설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계로서, 각종 사업의 인허가 업무대행을 위한 설계를 포함하며, 연관 분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 중간설계서 작성

1) 중간설계서는 [표2. 공종별 중간설계서 납품도서]과 <Ⅲ.기술지침> 및 [붙임 10.

중간설계내용]에 따라 중간설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항

2) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라

작성한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등

구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility 시설부분은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 중간설계서 구성

1) 건축(편의시설 인테리어 포함)

가) 설계설명서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,

층고, 인테리어 면적, 각부분의 주용도 등

(3) 현지조사사항 : 국내․외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패

사례를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)

(4) 계획설계내용

(5) 사전조사사항 : 경기도박물관 리모델링 공사에 필요한 제반사항

(6) 시공방법

(7) 개략공사비 산정

※일위대가표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost

Planning)가 가능함

(8) 주요자재계획

(9) 기타 필요한 사항

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

다) 도면종류

(1) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(2) 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로

경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설,

건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

(3) 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

(4) 대지 구적도

(5) 건축면적 산출표

(6) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

(7) 평면도 : 각부분의 크기, 용도, 벽 위치, 재료 등 실시설계 기준이 되는 사항

(8) 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

(9) 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면

이상 절단하여 단면도를 표시

(10) 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(11) 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(12) 주요 구조부 단면상세도

(13) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 기계설비

가) 설계 설명서

설비 대략공사비, 수급인의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주자의 지침을

받아 작성)

다) 설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

(1) 범례 및 도면목록

(2) 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

(3) 배치도 : 시설물의 배치상태 등

(4) 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

(5) 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 평면도, 특수층의 설비평면도 냉․난방배관,

공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

(6) 단면도 : 1층 및 지하1층 등의 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

(7) 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

3) 전기(소방포함)

가) 설계 설명서

(1) 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

(2) 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 저압반 연결 결선도

등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

(3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

(4) 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

(5) 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

(1) 전시홀 및 편의시설 부분의 각 실별 조도계산서

(2) 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산

다) 시방서

(1) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로

표시할 수 있다.

라) 도면종류

(1) 현장 안내도

(2) 범례 : 사용될 기호

(3) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도,

분전반의 부착위치, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자

또는 구내설비와의 연결방법 표시

(5) 수변전 설비도 : 각종 기기의 배치계획도

(6) 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

(7) 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비 기타 설비 배치도

(8) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4) 정보통신

가) 설계 설명서

(1) 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, CCTV 기타 설비)에 대한 설명

(2) 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 연결,

결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

(3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

(4) 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

(5) 전화 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

(1) 회선 용량계산서, 전계강도 계산서, 교환기 용량계산서

(2) DVR 용량계산서

다) 시방서

(1) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해

설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로

표시할 수 있다.

라) 도면종류

(1) 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

(2) 범례 : 사용될 기호

(3) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및

경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법

표시

(5) 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

(6) 각종 설비의 계통도 : 전화, CCTV, 통신 및 기타통신설비의 계통도

(7) 각종 설비의 배치도 : 통신설비 및  기타 필요설비의 배치도

(8) 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

라. 중간설계서 제출 방법

1) 중간설계가 완료되면 수급인은 [붙임4. 중간설계검사원]및[표2. 중간설계서 납품

도서]를 작성하여 발주기관에 중간설계서와 함께 제출하고, 중간설계 단계에서

결정되지 못한 사항에 대하여 수급인은 14일 이내에 보완된 중간설계(안)을

준비하여 발주기관에 제출하여 승인을 받는다.

2) 설계검사원 1부.

3) 수 량 : 납품도서 목록 참조(필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

4) 축 척 : 실시설계 기준으로 작성

5) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(구체적인 사항은 납품도서에 명시)

6. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획 설계 및 중간설계를 바탕으로 시설물의 규모, 배치, 형태,

공사방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교․검토를

통하여 최적안을 선정하여 시공 및 유지관리에 필요한 설계도서, 도면, 시방서,

내역서, 구조 및 수리계산서, 공사의 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를

작성하는 단계로 공사의 범위, 기능, 구조, 미적 구성요소와 수요기관의 요구

조건을 충분히 반영하며, 인테리어 시공부분을 실현할 수 있는 설계도서를 말한다.

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․ 보완지시서에 따라

작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게

산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등

계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

나. 실시설계서 작성

실시설계서는[표2. 공종별 실시설계서 납품도서]과 <Ⅲ.기술지침> 및 [붙임 11.

실시설계내용]에 의거 작성한다.

다. 실시설계서 구성

1) 건축(인테리어설계포함)

가) 설계 설명서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

(2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,

최고높이, 층고, 층별 면적, 지하층 편의시설 용도별 면적산출

부분 및 인테리어의 설계방향 및 지침

(3) 사전조사사항 : 전시동 전면부 돌출 형태, 지하층 편의시설과 전시동간의

장애인 통로형태, 큐브철거 부위 시공방법, 편의시설부분

바닥시공방법 등의 제반사항 반영

(4) 세부 시공방법

(5) 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

(6) 건물의 색채사용계획

(7) 공정계획(공정표 포함)

(8) 기타 필요한 사항

나) 시방서

(1) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(2) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

다) 도면종류

(1) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(2) 투시도 : 천연색채 사용

(3) 도면 목록표

(4) 배치도

(5) 구적도

(6) 건축면적 산출표

(7) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

(8) 각 부분별 평면도, 단위 평면도

(9) 층별 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(10) 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(11) 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

(12) 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

(13) 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(14) 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

(15) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(16) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(17) 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

(18) 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(19) 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

(20) 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 기계설비

가) 설계 설명서

냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와

유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, (위생, 오․배수, 가스배관), 공조

장비 선정서, 필요시 견적서 등

라) 도면종류

(1) 건축 주요부분 평면도, 단면도

(2) 범례

(3) 도면목록표, 계통도

(4) 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

(5) 계통도 : 공조, 위생, 소화, 자동제어, 기타 설비 세부계통도

(6) 평면도 : 각종 설비평면도

(7) 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(8) 기타 필요한 도면(제작품 카다로그, 조작반 사양 및  기타 참고 자료 등

발주기관 요구사항)

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료등

3) 전기

가) 설계 설명서

(1) 전기설비개요 : 각 설비(전력, 통신, 소방, 약전설비)에 대한 설명

(2) 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도

등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

(3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

(4) 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

(1) 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

(2) 조도계산서, 부하계산서, 분전반용량 계산서

(3) 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함)

다) 시방서

(1) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해

설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

(2) 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,

주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과

특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

(1) 도면목록표, 현장 안내도

(2) 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

(3) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

(5) 옥외간선도 : 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반

간선의 정격설치방범, 설치상세도 등

(6) 수변전 설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도

및 발전기, 기타 상세도

(7) 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

(8) 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

(9) 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

(10) 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(11) 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(12) 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함),

가격조사자료 등

7) 정보통신

가) 설계 설명서

(1) 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, CCTV, 기타 설비)에 대한 설명

(2) 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명

(3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

(4) 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

(5) 전화 및 방송 CCTV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

(1) 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

(2) DVR 용량계산서

다) 시방서

(1) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

한다. 단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호

등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

(1) 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

(2) 범례 : 사용될 기호

(3) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

(5) 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

(6) 각종 설비의 계통도 : 통신, 방송, CCTV, LAN통신 및 기타설비의  계통도

(7) 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

(8) 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

(9) 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

(10) 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(11) 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(12) 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(13) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함),

가격조사자료 등

라. 실시설계서 제출방법

1) 실시설계가 완료되면 수급인은 종결보고서 [붙임 4. 실시설계 검사원],  [표3. 공종별 실시설계서 납품도서], 하자보증서 원본(1부)을 발주기관에 실시설계서와 함께 제출한다.

2) 설계검사원 1부.

3) 수 량 : 납품도서 목록 참조(필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

4) 축 척 : 실시설계 기준으로 작성

5) 기타 주관기관이 필요하다고 판단하는 사항(구체적인 사항은 납품도서에 명시)

Ⅲ. 기술지침

1. 공통 설계지침

가. 기본 개념

1) 본 설계용역의 최종 성과물이 실현되었을 때 전시동큐브 철거부분, 전시동출입구

확장부분, 편의시설 개선공사 부분이 수요기관의 기능을 원활하게 수행하고,

유지관리상의 경제성과 구조적으로 안전성, 내구성을 가지며 주변환경에 조화되어

미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 한다.

2) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을

준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 수급인 임의로 판단해서는 아니

되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

3) 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 인테리어 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

나. 공간의 배치 및 크기

총칙에서 제시한 공간의 크기, 위치, 소요수량, 성능 등은 최소치를 제시한 것으로 공간의 배치에 있어 충분히 수용할 수 있도록 계획하고, 수급인은 필요시 이에 대한 대안을 제시하여 발주기관과 협의 후 채택할 수 있다.

다. 설계지침

1) 설계도서의 작성

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의

가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계

지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 신․증축 공사규모,

예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야

하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에

문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2) 기능성, 경제성의 고려

가) 수요기관의 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻어야한다.

나) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용, 방법 등을 고려한 경제적인 건축물이 되어야 한다.

다) 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

3) 구조적인 안전성 및 내구성

가) 고정하중, 적재하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(문서저장고 등)에 따라 하중, 진동, 충격 등에 의한 외력 등을 고려한다.

나) 지질조사 보고서의 결과를 기초에 적절하게 반영한다.

4) 미관 및 친환경적 설계

가) 주변환경에 적합하고 독창성 있는 미적감각을 지닌 건축물로 설계한다.

나) 기존부지의 수목, 주변자연환경을 보존하도록 계획하고 공사이행시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 한다.

다) 인체에 유해한 자재(석면 등)와 에너지 다소비형자재의 사용을 억제하고, 에너지 저소비형 자재를 사용한다.

5) 단열∙보온∙결로에 대한 계획

건축법 제59조(건축물의 에너지이용 및 폐자재 활용) 및 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제21조(건축물의 열손실방지), 제22조(에너지절약계획서의 제출)와 건축물의 에너지절약설계기준(건설교통부 고시 제2004-459호,2004.12.31)에 적법하게 설계한다.

6) 채광∙조명∙환기계획

최대한의 자연채광과 적정한 조도, 환기로 재실자의 보건과 위생에 지장이 없어야한다.

7) 방재 및 보안계획

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안이 용이한 구조로 설계한다.

8) 쾌적성 및 편리성

냉∙난방환기가 원활하여 근무자의 보건과 위생에 지장이 없고, 장애인, 노약자, 임산부가 이용하기에 편리한 구조와 시설로 설계한다.

9) 품질 및 안전관리계획

품질 및 안전관리비 등을 건설기술관리법 제24조(건설공사의 품질관리) 및 동법

시행규칙 제19조(품질관리비의 산출 및 사용기준)와 제21조의 4(안전관리비)에

규정대로 작성 후 건축, 전기, 통신으로 분류하여 작성하고 해당 규정에 적합하게

시방서에 명기하고 필요한 비용을 내역에 반영한다.

10) 설계도면 공통사항

가) 설계도면 표지내용

(1) 공   사   명 :

(2) 공        종 : 건축, 기계, 전기, 통신, 폐기물 등

(3) 제 출  일 자 : 0000. 00. 00

(4) 수요  기관명 : 경기도박물관

(5) 설계사무소명 : 00 사무소

(6) 용        도 : (계획∙기본∙실시설계)

나) 도면 목록표

다) 건 축 개 요 :

(1) 공   사   명 :

(2) 주        소 : 00도 00시(군) 00구 00(읍․면)동 00번지

(3) 대        지 : 지역, 지구, 접근 도로 현황 등

(4) 건          물 : 공사종별(신∙증축),용도, 구조, 층수, 최고높이, 연면적, 지상

층면적, 건축면적, 건페율, 용적율

(5) 주 차  대 수 : 법규정, 주차계획대수

(6) 조 경  면 적 : 법규정, 계획면적

(7) 설 비  사 항 : 저수조, 정화조 등

(8) 기        타 : 층별 바닥 면적, 주용도 등

12) 기타

가) 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

나) 유지관리에서 점검방법이 용이해야한다.

다) 정보화 등에 대비한 미래의 이용계획 등을 고려한다.

라) 기타 발주기관 측의 요구사항 반영

라. 관계 전문기술자의 협력

건축법시행령 제91조의3(관계 전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 제3조(관계 전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 전문기술자의 협력을 받아야한다.

2. 분야별 설계지침

가. 건축분야(인테리어, 폐기물포함)

1) 기본지침

수급인은 설계도면을 이해하기 쉽게 작성하고 설계도면에서 표현하기 곤란한 사항은 시방서에 그 내용을 충분히 설명하여 설계의도가 충분히 실현될 수 있도록 해야 하며, 총칙에서 제시한 설계조건으로 계획설계, 중간설계, 실시설계를 진행하여 발주기관의 요구조건을 충족할 수 있는 설계서를 작성한다.

2) 일반 사항

가) 친환경, 에너지 절약을 고려한 지속가능한 건물 설계가 되어야 한다.

나) 장애자 및 노약자를 배려하는 계획(Barrier free design)이어야 한다.

다) 신기술, 신공법 등을 적극적으로 반영하되 제품은 설계시 설계 및 시방서 등에

일반자재로 명기하여 특정업체 제품이 설계도서에 명기되어서는 안되며, 이를

통하여 경제적 효율을 높이고 건물의 유지관리의 편리함을 추구하며 첨단 전시

시설의 이미지를 높인다.

라) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

마) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

바) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

사) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

3) 부대시설 계획

가) 편의시설은 전체적인 공간의 중요한 역할을 하며, 공간의 구성요소로써 공간의 특성을 강조하며, 전체적인 분위기를 연출하여 경관미를 증대 시킨다. 또한 자연소재로 시설물을 설치하는 것을 원칙으로 한다.

나) 기념품 판매점, 휴게실, 편의시설

(1) 건축이미지와 맞는 형태의 구조물로 조성

(2) 주변에 야외 탁자나 벤치, 휴지통 등의 배치로 쾌적한 이용 및 청결성의 유지

다) 공중전화 / 비상전화

(1) 휴식공간 등 이용객의 집약적 이용이 이루어지는 장소에 배치

4) 구조 계획

가) 기능이 적절한 구조

나) 안전한 구조

다) 경제적인 구조

※ 건축물 하중기준과 극한강도설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준 등 기준에

적합하여야 한다.

5) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 K.S표시품 사용이 원칙이며 K.S표시품이 없을 경우 국내 최상품

자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입자재 등을 사용시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

6) 계획설계 내용

계획설계서는 [붙임 9. 계획설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 4.계획설계>에 의거 작성한다.

7) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 10. 중간설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 5.중간설계>에 의거 작성한다.

8) 실시설계 내용

실시설계서는 [붙임 11. 실시설계 내용], <Ⅱ.일반지침 6.실시설계> 및 다음에 의거 작성한다.

9) 건축구조 실시설계 내용(전시동 전면 확장부분)

가) 구조 기준 일반

(1) 한국의 최신 제정 건축구조 관련 법규 및 구조 규준에서 정하는 최소요구 조건

을 만족함은 물론 기존 조건을 충족하기 위한 추가 적용 조건을 제시하되,

그 근거와 당위성이 뒷받침되어야 한다.

(2) 주요 구조부재는 보수, 보강 없이 장기간 사용이 가능하고, 보수, 보강하면

그 사용기간을 연장하는데 지장이 없어야 한다.

(3) 건축물 하중기준과 극한강도설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준 등 기준에

적합하여야 한다.

나) 기초설계

(1) 기초 및 지하실 내수 부재 등 보수, 보강이 어려운 구조 부위는 특별히 안전성

과 내구성이 보장되는 구조 방식이어야 한다.

(2) 차수, 방습, 방수 및 기밀성 유지는 보수하지 않고도 30년 이상 사용이

가능하되, 보수방법이 용이하여야 한다.

(3) 신축 부지의 지질 상태에 적합하게 경제적인 기초 방식을 채택한다.

다) 내진 및 내화구조

(1) 지진, 폭풍, 폭우, 부분적인 폭격 등 천재지변에도 치명적인 피해를 입지 않는

구조방식 및 재료를 사용한다.

(2) 구조 부재 자체가 내화성이 없을 경우, 내화 피복의 시공성과 내구성에 특별히

유의하고 소방 작업시 내화 피복이 탈락되지 않는 공법을 선정한다.

(3) 부분적인 시공 하자나 부식이 구체 안전에 큰 영향을 줄 수 있는 구조방식은

지양한다.

라) 구조설계시 중점 검토하여야 할 사항

(1) 구조계산의 입출력 근거, 구조방식 결정의 타당성

(2) 내진설계 반영, Expansion joint, 강구조물의 부식

(3) 전시물 및 전시 장비의 이동(장비 사용 포함) 및 전시장의 이동 하중

(4) 주요 시설의 적재하중 및 진동하중

10) 공사시방서

표준시방서에 일반적인 사항을 공종별 작성하고 필요한 경우(관급설치, 특수공종과

공법∙재료 등) 전문시방서를 작성한다.

11) 공사비 산출서

가) 물량산출근거, 내역서, 일위대가, 가격자료, 견적서 등으로 구성.

나) ‘물품 목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률’에 의거 시설자재를 목록화 함에 따라 시설자재 식별코드 11자리로 작성한다.

다) 철근의 이음 ‧ 정착 길이 산정시 콘크리트구조설계기준에 부합하는 정미수량을 산출한다.

나. 기계분야

1) 기본지침

가) 일반사항

(1) 설비의 구분 : 본 기계설비 설계에 포함할 주요 내용은 다음과 같다.

기존 열원설비, 냉난방 및 공기조화설비, 급, 배수 위생설비, 환기설비,

자동제어설비, 소방설비, 가스설비와의 호환 관계 및 연결관계

(2) 산업자원부 고시 제2004-6호 “고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한

규정”등에 의해 고효율 에너지 기자재 등의 적용을 권장한다.

(3) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기,

인테리어부분 등을 고려한 기타 조건에 적합하게 설계한다.

(4) 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형

시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계전 반드시 발주자의 지침을 받아

설계를 진행하여야 한다.

(5) 부지의 외적 환경조건을 분석하여 전시, 공연, 교육, 연구 등 기능별로 최적의

내부환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

(6) 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며

에너지 절약 기자재를 고려한다.

(7) 현행 제반 법령과 규정, 조례에 적합하도록 하며 국내 규정상 명백하게 규정

되지 않은 사항 등은 선진외국의 규정과 설비발전 동향에 맞추어 미래

지향적인 설계를 감안하며 근거 자료를 제시한다.

(8) 건물 준공 후 설계의도대로 효과적인 시스템 운영이 될 수 있도록 하기

위하여 설계 시스템에 대한 상세한 설명과 시스템 운전방법, 설비의 내구

년한 및 교체 보수 요령을 기술한 설계제안서를 제출하여야 한다.

(9) 장비 및 주요 자재에 대하여는 장, 단점과 경제성, 시공성, 유지보수 용이성

등을 비교 검토하여 사전에 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(10) 외국산 자재 사용시는 제반사항을 검토하여 비교 분석한 외국산 자재 사용

계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 받는다.

(11) 건물 수명에 비하여 배관 등의 시설 수명이 짧은 점을 감안하여 필요한

배관은  내식성자재 사용을 고려한다.

(12) 외벽과 접하거나 동파가 예상되는 지역의 장비나 배관등에 대하여는 동파

방지 대책을 수립하여 반영한다.

(13) 건축 및 구조계획과 상호 연관이 되어 있는 부분 등에 대하여는 실시설계에

준하는 정확성을 기하여 설계시 건축 또는 타 분야와 상호 변경되지 않도록

하여야 한다.

나) 설계유의사항

(1) 건축물의 특성을 충분히 반영하여 쾌적하고 효율적인 근무환경을 제공한다.

(2) 건축물의 각 실별 기능 및 사용시간대, 부하 특성 별로 존(ZONE)을 구분하여

에너지를 절약할 수 있는 시스템을 적용한다.

(3) 기계설비는 유지관리가 편리하고 에너지절약형시스템을 채택하여야 하며,

주요장비는 설계 전에 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행한다.

(4) 입상 피트내의 배관과 덕트에 대한 점검 및 유지보수가 가능하도록 피트의

한쪽 벽면은 Open타입(일명 캐비넷 방식)으로 한다.

(5) 열원기기, 송풍장치 및 배수배관 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지할 수

있는 방법으로 채택한다.

(6) 각종 기계설비는 유지관리가 편리하도록 배치한다.

(7) 실내 기류분포 등을 해석하여 급기 및 환기 방식, 위치 결정

(8) 기타 특수설비에 대한 계획

(9) 편의시설의 인테리어 설계시 전기, 설비, 소방, 건축, 폐기물 등의 시공 및

처리부분을 충분히 반영하여야 한다.

2) 계획설계 내용

계획설계서는 [붙임 9. 계획설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 4.계획설계>에 의거 작성한다.

3) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 10. 중간설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 5.중간설계>에 의거 작성한다.

4) 실시설계 내용

실시설계서는 [붙임 11. 실시설계 내용], <Ⅱ.일반지침 6.실시설계> 및 다음에 의거 작성한다.

가) 공기조화 및 냉난방 설비공사(인테리어부분포함)

(1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

(2) 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야

한다.

(3) 공기조화기는 풍량, 풍속, 열교환, 가습, 제습, 필터링 등의 기능이 효율적

으로 발휘될 수 있도록 정밀하게 설계한다.

(4) 필터는 유지보수비용이 적게 들도록 선정하되, 성능이 안정되어 있는 고효율

필터를 사용한다.

(12) 외부와 접한 출입문에는 열원의 낭비를 막을 수 있는 설비를 고려한다.

(13) 박물관 운영에 적합한 냉난방 시스템 설비로 검토한다.

나) 환기설비공사(인테리어부분포함)

(1) 환기 목적에 적합한 환기방식을 채택(실내공기조건을 만족시키는 설비로

적용)한다

(2) 실내환경과 운전 시간대를 고려한 환기 계통을 검토한다.

다) 급․배수 및 위생설비공사(인테리어부분포함)

(1) 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

(2) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

(3) 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용한다.

(4) 장애자 및 어린이를 고려한 시설을 갖춘다.

(5) 급수 및 급탕설비는 각 위생기구에서 적정수압이 유지되도록 계획한다.

라) 소화설비공사(인테리어부분포함)

(1) 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합

하도록 설계한다.

(2) 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화대상물에 적합하게 조합하여 설계

하도록 한다.

(3) 각 설비는 중앙방재센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

(4) 소화설비는 소방관계법규에 의거 소화기구설치, 스프링클러설비 등을

계획한다.

(5) 어린이를 비롯한 다수인이 출입하는 곳이므로 오동작이나 오조작이 없도록

안정적인 설비로 한다.

마) 자동제어설비공사(인테리어부분포함)

(1) 자동제어설비는 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온.

습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시,

경보, 상태표시, 인터폰 및 기록이 가능한 방식으로 한다.

(2) 자동제어 시스템은 최첨단 시스템을 채택하되 기존 시설된 건물을 조사하여

안정성, 경제성, 유지관리의 용이성 등을 비교 검토한 종합검토서를 제출하여

승인을 받아 설계에 반영한다.

(3) 열원기기로부터 편의시설로 공급되는 부분은 항상 일정 유량(설계유량)으로

공급될 수 있도록 한다.(단, EHP시스템일 경우 예외)

(4) 자동화 통합관리 시스템과 연계될 수 있도록 시설한다.

(5) 유지보수가 쉽고 타 시스템과 Net Work구성이 용이하여야 한다.

(6) 중앙감시실에 감시반과 연계를 고려한다.

바) 방음, 방진 및 내진설비

(1) 각 설비의 방음․방진 및 내진에 대한 대책을 검토하여 설계한다.

사) 옥외설비 및 기타 설비 공사

(1) 배관피트 등은 점검, 보수, 유지가 쉽게 이루어질 수 있도록 충분한 공간을

확보한다.

(2) 방화벽의 배관이나 닥트에 의한 관통부 상세도를 작성한다.

(3) 전시동 및 편의시설의 사무공간 등에 대해서는 OA기기의 확대 사용에 따른

콘센트 수량을 설치 위치를 감안하여 설계한다.

다. 전기분야

1) 기본지침

가) 설비의 구분 : 인입설비 및 수변전설비와의 연계, 간선 및 동력설비, 접지설비,

조명 및 전열설비, 방재설비, 반송설비 및 기타

나) 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 효율성 있는 고품질 전력을 공급하기

위한 대책을 고려하여 계통을 계획한다.

다) 건축, 기계, 인테리어 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의

각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 검토하여 설계한다.

라) 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”참조(산업자원부 고시 제204-6호)

마) 건축, 기계, 통신, 소방, 인테리어 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

바) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

사) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

아) 설계기준은 전기설비 기술기준령, 내선규정, 전기․통신 관계법규 및 건축,

소방법규 등 제반법규를 충족하여야 한다.

자) 본 건물은 관람객 등의 많은 사람이 출입이 빈번한 장소인 바, 각종 설비는

최첨단 기능의 장비 및 기기로서 안전 및 계통보호를 충족시키고 박물관의

특수한 기능을 완벽하게 발휘할 수 있어야 한다.

차) 각 설비별 계통을 일목요연하게 파악할 수 있는 계통도 및 Block Diagram을

작성 하여야 한다.

카) 방재설비는 소화설비와의 계통적인 조정을 거쳐 설계한다. 공사비의 견적시에

중복이나 누락되는 부분이 없도록 계획 단계부터 명백히 한다.

2) 계획설계 내용

계획설계서는 [붙임 9. 계획설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 4.계획설계>에 의거

작성한다.

3) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 10. 중간설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 5.중간설계>에 의거

작성한다.

4) 실시설계 내용

실시설계서는 [붙임 11. 실시설계 내용], <Ⅱ.일반지침 6.실시설계> 및 다음에

의거 작성한다.

가) 동력설비

(1) 차단기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

(2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

(3) 장래의 증축이나 개수에 대비하고, 공급신뢰도, 전체 전력시스템과 연관해서

경제성을 평가하되 안전성을 겸비해야 한다.

(4) 금속 닥트나 케이블트레이 등을 이용할 경우에는 발열에 의한 축열현상으로

허용전류가 저감되는 요인을 검토하여 반영하고 수용전선이나 케이블 상호

간의 영향을 최소화하도록 설계한다.

(5) 금속닥트나 케이블트레이의 경우에 벽과의 관통부가 있거나, 수직 또는

경사지게 설계해야 할 때에는 내부 전선을 보호하고 하중을 고려한 상세도를

작성한다.

나) 조명설비

(1) 에너지이용합리화법 제 13조 규정에 의한 고효율 에너지기자재 (형광등,

형광등안정기, 고조도 반사갓 등)를 반영한다.

(2) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

(3) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

(4) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

(5) 방범설비 및 건물의 보안과 관련하여 야간에 항시 점등 해야 할 조명에 대한

계획을 에너지 절약 측면에서 검토하여 설계한다.

(6) 인테리어 시공부분의 조명은 별도 협의 후 선정한다.

(7) 순간 정전시에도 조명이 필요한 곳은 비상유도등(DC) 설치한다.

다) 전열설비

(1) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

(2) 용도에 알맞는 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

라) 소방설비

(1) 소방관련 법규의 규정을 준수하여 설계한다.

(수신기, 발신기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

(2) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

마) 접지설비

(1) 접지설비는 관계법령의 접지종류, 접지방법 및 규정치 이하가 되도록

시설하고 유지관리가 용이하도록 접지단자를 설치한다.

라. 통신분야

1) 기본지침

가) 경제성, 기능성, 및 안정성이 있고, 상호 융통성이 있는 계통으로 계획한다.

나) 건축, 기계, 전기 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원할 한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

다) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

라) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

마) 종합적인 정보통신이 가능하도록 시스템을 구축한다.

바) 건물의 관리에 필요한 자동제어설비 및 에너지절약 시스템, 방범설비 등과 연계하여 관리가 가능하여야 한다.

사) 방재실에 설치되는 방범설비를 포함한 각종 방재설비는 평상시에 감지기의 동작상태, 전원의 공급상태 등을 일목요연하게 파악할 수 있어야 한다.  또한 경보가 발생할 경우에는 관리자가 사고 상황을 간편이 알아볼 수 있도록 하고, 시각 및 청각 경보를 발생하여야 한다.

아) 폐쇄회로용 카메라의 설치를 고려하며 녹화가 가능해야 한다. 카메라는 감지기의

동작과 연동되어야 한다.

자) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

(1) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

(2) 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

2) 계획설계 내용

계획설계서는 [붙임 9. 계획설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 4.계획설계>에 의거 작성한다.

3) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 10. 중간설계 내용] 및 <Ⅱ.일반지침 5.중간설계>에 의거 작성한다.

4) 실시설계 내용

실시설계서는 [붙임 11. 실시설계 내용], <Ⅱ.일반지침 6.실시설계>다음에 의거 작성한다.

가) 통합배선 : 전화, LAN

(1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

(2) 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

(3) 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

(4) 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

나) 방송설비

(1) 방송은 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하도록 설계한다

(2) 비상방송설비는 소방법규를  준수하여 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신

기와 연동하여 비상시 일반방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성하여 설계에

반영한다.

다) CCTV 감시 설비

(1) 감시카메라의 설치장소 감시 범위를 고려하며, 설치위치는 발주기관과 협의

하여 설계에 반영한다.

(2) 감시반 및 모니터는 인원이 상시 근무하는 장소에 설치를 검토한다.

Ⅳ.  성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

가. 수급인은 설계용역 성과품을 기술용역공정예정표의 제출일 이전에 발주기관의

승인을 득한 후 인쇄하여야 한다.

나. 설계도서는 관련법규와 제반규정 및 본 과업지시서의 설계지침에서 제시한 기준

이상으로 한다.

특히, 건축법 시행규칙 <별표 3>과 경기도지방건설기술심의위원회조례 제8조의

설계도서 내용 및 작성기준을 적용하며, 용인시 건축조례를 참조하여 작성하되

구체적으로 명시되지 아니한 부분은 감독관과 협의하여 작성한다.

다. 성과품 작성에 사용하는 용어는 다음과 같다

1) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

2) KS등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

3) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

4) 정부제정 제기준 용어

5) 기타 국어사전애서 정의, 사용한 용어

라. 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

1) 한글 맞춤법(교육인적자원부)

2) 외래어 맞춤법(교육인적자원부)

3) 기본외래어 용어집

마. 도면은 자격 있는 기술자가 작성하여야 하고 각종 허가 및 협의 시에는 건축법규에

의한 건축사의 서명날인이 있어야 한다.

바. 설계도면 작성시 각종 시공상세도는 현장기능공이 쉽게 이해 할 수 있는 수준으로

충분하게 작성되어야 하며, 인테리어 설계부분이 충분이 반영되어야 한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계설명서

설계용역의 계약내용, 추진과정, 참여기술자현황, 하도급현황, 설계 설명서, 설계도서의 수정보완현황, 건물유지관리계획서, 납품 설계도서목록 등 전체적인 설계과정을 기술하는 보고서로서  [붙임 11. 실시설계 내용]의 내용 및 <Ⅱ.일반지침 5.실시설계>의 내용을 포함한다.

1) 시설별, 공종별로 구분하여 계통구성 및 주요 구성요소 등의 중요내용을 객관적으로 서술하여 작성한다.

2) 관련 법규에서 규정한 내용에 대한 충족 여부를 명확하게 제시하여야 한다.

3) 설계서에 기초가 되는 공사개요, 공사연혁, 현장설명 등 공사에 필요한 모든 내용을 상세히 기록 및 표시한다.

나. 설계도면

1) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

2) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

3) 도면은 Cad 프로그램을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 저장하여 제출한다.

4) 설계도면에는 작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인한다.

5) 설계도면의 규격은 A0, A1, A2, A3, A4 등으로 하고 표기 방법은 다음 규정을

따른다.

(가) KSA 0005 제도통칙

(나) KSF 1501 건축제도통칙

(다) KSE 0001 기계제도

(라) KSC 0102 전기용 기초

(마) KSC 0301 옥내 배선용 심볼

(바) KSC 0103 시퀀스 제어 기호

(사) 행정자치부 소방업무 처리규정

다. 유지관리지침

유지관리지침은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

1) 개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

2) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

3) 구조특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

4) 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

5) 점검 : 주요 점검항목, 점검방법

6) 보수방법 : 건축 인테리어마감, 기계설비, 전기설비 등 기타 필요한 사항

라. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 수급인의 설계의도가 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와  특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

3) 공사표준시방서, 특기시방서(자재시방서 포함)를 건축(구조, 부대시설 포함),

전기, 통신, 소방, 인테리어, 폐기물처리 부분 등으로 구분하여 작성한다.

4) 표준시방서는 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 전기설비공사표준시방서, 기계설비공사표준시방서, 통신설비공사표준시방서, 소방설비공사표준시방서 기준으로 작성한다.

5) 특별시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명하며, 편의시설 인테리어 부분의 포함되어야 한다.

6) 특기시방서는 표준시방서에 포함되지 않는 구조, 규격, 특성 시험내용 및 방법과 타 공사와의 시공 한계를 명확하게 구분하여 기술한다.

7) 자재시방서는 사용재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 재료 실험방법 및 재료 선정 시험 등의 내용을 기록한다.

8) 건설교통부 표준시방서, 공기조화냉동협회 시방서, 산업자원부 제정표준시방서, 행정자치부 소방관계법 등 제반 여건에 충족되어야 한다.

9) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선 순위, 설계도서 검토의무 등에

관한 상세 사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건에 관한 사항

라) 관련법규에 따른 요구사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

사) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

10) 공사시방서 작성시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약에 필요한 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

마) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

아) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자 등이

직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

11) 공사시방서 작성에 사용한 참고자료의 명칭, 저자, 출판사 등을 기록한다.

마. 공사비내역서(명세서)

1) 공사비명세서는 설계내역서, 단가산출서, 물량산출서, 일위대가로 구별하고 별책으로 작성한다. (관급 내역서 별도 제출)

2) 공사비명세서는 회계예규원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 작성한다.

3) 공사비명세서는 제경비 산출근거가 포함된다.

4) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 의한다.

5) 노임기준은 당해연도 최근 공사노임단가(대한건설협회 발표)를 기준한다.

6) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

7) 수량산출은 건설교통부가 제정한 적산요령을 기준하여 설계도면 및 시방서에 의해 정확하게 산출하되 시방서에 명기된 순서의 공종별로 구분하여 작성하고, 규격화 또는 표준화 되어 있지 않는 품목은 상세도 등에 의거 일위대가표를 작성한다.

8) 내역서는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리, 인테리어 등으로 구분하여

작성한다.

9) 품셈은 정부표준 품셈을 적용하는 것을 원칙으로 하고, 이에 의거 산출할 수 없는 것은 적산 참고자료 등 근거를 제시하도록 한다.

10) 자재단가는 지방자치단체를 당사자로 하는 법률(단위당 가격의 기준)을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 노임은 대한건설협회에서 조사한 2009년도 시중노임단가를

적용한다.

11) 관급자재는 가능한 많이 하여 예산을 절감시키고, 지정품목 및 규격, 수량 등은 감독관과 협의한다.

바. 설계도서의 분리작성

건축, 기계설비, 전기, 통신, 폐기물처리, 인테리어 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

사. 설계도서 표기

1) 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 기술용역계약일반조건 제6조(사용언어)에 의한다.

2) 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

① 건축도면(인테리어포함) : A

② 건축구조도면 : S

③ 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

④ 전기도면 : E (전기소방 : EF)

⑤ 통신도면 : EC

⑥ 공통사항 : G

⑦ 인테리어 : 별도표기

3) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

① 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

② 각종 부착시설물의 표시

③ 건축, 기계설비, 전기, 통신, 인테리어 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여

명확한 구분 표시

④ 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)

를 작성

⑤ 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

아. 설계도서 용지 및 규격

1) 작도용지 및 규격

작도용 트레이싱지(원도)는 영구 보관에 지장이 없는 양질의 것을 사용하며, 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 납품도서 목록을 기준으로 한다(단, 관련법규 준수)

2) 기입치수 및 단위

설계도서에 사용되는 단위는 MKSA규준에 따르되 길이의 단위는 mm를 사용함을 원칙으로 한다.

3) 표기자는 한글사용을 원칙으로 하되 영문으로 병기할 수 있으며, 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

4) 건축, 기계설비, 전기, 통신, 인테리어 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축적으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

5) 각 공사마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시 및 보기를 넣어 해당부분을 쉽게 찾아볼 수 있도록 표시한다.

6) 축척은 동일 종류인 경우 가능한 한 통일시키며 건축법 시행규칙 규정을 준용한다.

7) 각 공종마다 서로 배치된 시설물들이 중복 또는 미관에 저해되지 않게 하기 위한 도면(천정복도 등)을 작성한다.

8) 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

※ 건설기술관리법시행규칙 제14조의5(용역참여기술자의 업무내용 명기 등) : 설계 등 용역업자는 최종용역보고서 및 설계도면에 참여건설기술자의 성명․담당업무․참여기간 등을 구체적으로 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인한 후 날인하도록 하여야 한다.

자. 기타

1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 윈칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3) 설계도 및 조사자료의 소유권은 경기문화재단이 갖는다.

3. 성과품의 납품

성과품의 납품도서라 함은 경기도박물관 리모델링공사 관련 용인시건축 인허가 협의

및 대관 협의 결과에 대한 조치결과가 반영된 최종납품도서를 말하며, 계획설계 ․

중간설계 ․ 실시설계 등 3회를 기본으로 한다. 다만 중간검사용 및 검토용 도서는

이와는 별도로 설계도서의 부수 등을 발주기관과 협의하여 제출하여야 하며 이에

소용되는 비용은 수급인이 부담한다.

가. 납품도서 목록

1) 계획설계 납품도서[표1]

구 분	규 격	제출부수	비 고
1) 각종 도면
계획설계(안) 설계도	A1(594× 841)	5부(청사진)	각종 설계도면
계획설계(안) 축소도면	A3(296× 418)	5부(청사진)	“
계획설계(안) 조감도	A1(594× 841)	3부	표구, 필름 포함
계획설계(안) 디자인	A1(594× 841)	3부	프레젠테이션 자료
2) 각종 서류
계획설계(안) 설명서 (시방서,내역서,계산서포함)	A3(296× 418)	10부	일반․특기․관급시방서 각종 공사비분석자료 중요시설(구조물)

주) 세부사항은 붙임9를 참조한다.

2) 중간설계 납품도서[표2]

구 분	규 격	제출부수	비 고
1) 각종 도면
중간설계도면	A1(594× 841)	5부(청사진)	각종 설계도면
축소도면	A3(296× 418)	5부(청사진)	“
조감도(건축, 전시)	60㎝× 90㎝	2매	표구, 필름 포함
2) 각종 서류
중간설계 설계보고서	A3(296× 418)	10부
개략 시방서	A4(209× 296)	10부	일반, 특기, 관급
개략 내역서	A4(209× 296)	10부	각종 공사비, 분석자료
관급내역서	A4(209× 296)	10부
개략 계산서	A4(209× 296)	10부	중요시설(구조물)

주) 1. 발주기관과 수급인의 협의에 따라 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. 중간설계보고서 포함사항(사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 향후 실시설계 방향 등)

3. 제출공종 : 건축, 기계, 전기, 통신, 폐기물, 인테리어 등 전분야

4. 세부사항은 붙임10을 참조한다.

3) 실시설계 납품도서[표3]

구 분	규 격	제출부수	비 고
1) 각종 도면
실시설계도	A1(594× 841)	20부(원도1,청사진19)	각종 설계도면
축소도면	A3(296× 418)	20부(원도1,청사진19)	“
투시도(건축,인테리어)	60㎝× 90㎝이상	5부	표구, 필름 포함
조감도(건축,인테리어)	120㎝× 180㎝이상	각 3부	표구, 필름 포함
실시설계(안) 디자인	A1(594× 841)	3부	프레젠테이션자료
2) 각종서류
설계설명서	A3(296× 418)	20부(원본1,부본19)
표준시방서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
특기시방서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
관급시방서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
각종 내역서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
관급 내역서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
각종 계산서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
일위대가표	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
자재단가산출서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)	견적서 포함
수량산출조서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
설계종합보고서	A4(209× 296)	20부(원본1,부본19)
CD-ROM		5SET
종합공정표	A0(841× 1189)	2부	공종별 분리
모형		1기	일반지침 (실시설계참조)
기타 발주기관요구사항

주) 1. 투시도와 조감도는 사진 촬영하여 사진(A4 규격 내외, 5매)과 필름을 별도 제출하며, 크기는 주관기관의 조정에 따라 변경될 수 있고 이미지 파일은 CD로 제출한다.

2. 단, 수급인은 설계도서 작성의 필요에 따라 규격, 종류 등은 주관기관과 사전 협의하여야 한다.

3. 위 설계도서 납품에서 빠지거나 제외된 사항은 건설기술관리법 및 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정을 준용한다.

4. CD-ROM : 10Set(중간설계 납품도서의 내용 일체 및 각종 Data file)

5. 종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

6. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

7. 기타 세부사항은 붙임 11을 참조한다.

나. 인․허가 도서 작성

인․허가에 필요한 계획서 및 조서와 그에 포함되는 제반 자료로서 용역준공 전․후 발주기관의 요청에 의거 필요시기에 필요 부수를 작성 제출하여야 한다.

다. 기타 보고서 작성

본 용역수행에 있어 조사, 비교, 협의, 방침결정을 위하여 발주기관의 요청시에는 필요한 보고서를 작성 제출하여야 한다.

라. 제출시 유의사항

1) 원도 및 CD : 함에 넣어 영구 보관할 수 있도록 제출

2) 청사진 : 별첨

3) 기타도서 : 보관 및 사용이 용이하게 제출함

Ⅴ. 붙  임

1.  [붙임 1] 보안 각서

2.  [붙임 2] 책임기술자 선임계

3.  [붙임 3] (계획, 중간, 실시)설계 검사원

4.  [붙임 4] 각서

5.  [붙임 5] 월간공정보고

6.  [붙임 6] 주간공정보고

7.  [붙임 7] 공종간 업무분장

8.  [붙임 8] 계획설계 내용

9.  [붙임 9] 중간설계 내용

10. [붙임 10] 실시설계 내용

11. [붙임 11] 명령부

12. [붙임 12] 지시부

13. [붙임 13] 작업일지

【  붙임 1 】

보 안 각 서

○ 용  역  명         :

○ 용역계약일         :

○ 용역착수일         :

○ 용역준공(예정일)일 :

아래의 본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 설계용역계약일반조건 제35조(비밀엄수의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등)제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되더라도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이루라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 설계용역계약특수조건 제21조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 절대 누설하지 않는다.

6. 서류상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민∙형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

-- 다         음 --

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					“
					“
					“
					“
					“
					“

200 년    월     일

계 약 자
상 호 :
주 소 :
대표이사 :	(인)
계 약 자
상 호 :
주 소 :
대표이사 :	(인)

경기문화재단 대표이사 귀하

【 붙임 2 】

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명         :

2. 용역계약금액       :

3. 용역계약일         :

4. 용역착수일         :

5. 용역준공(예정일)일 :

=   아               래   =

가. 소        속 :

나. 성        명 :

다. 주        소 :

라. 주민등록번호 :

마. 기술자격(면허)종별 :

바. 면 허  번 호 :

상기인을  경기도박물관 리모델링공사 설계용역의 건축을 포함한 각부분에 대한 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며 건축을 포함한 각부분의 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임 : 경력증명서 원본 1부.

200 년    월    일

계 약 자
상 호 :
주 소 :
대표이사 :	(인)

경기문화재단 대표이사 귀하

【 붙임 3 】

(계획,중간,실시,대안)설계 검사원

1. 용  역  명         :

2. 용역계약금액       :

3. 용역계약일         :

4. 용역착수일         :

5. 용역준공(예정일)일 :

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

위와 같이 (계획, 중간, 실시,대안)설계용역이 완료되어 설계검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

200 년   월   일

계 약 자
상 호 :
주 소 :
대표이사 :	(인)

경기문화재단 대표이사 귀하

【 붙임 4 】

각           서

업 체 명		소 재 지
대 표 자		업 종(등 록)

상기 본인(법인)은 귀 박물관과 계약을 체결함에 있어서 붙임 결격사유중 어느 사유에도 해당되지 않으며 차후에 이러한 사실시 발견된 경우 계약의 해지(해제) 및 부정당업자의 제재처분을 받아도 하등의 이유을 제기하지 않겠습니다.

계 약 자
상 호 :
주 소 :
대표이사 :	(인)

200  년    월    일

경기문화재단 대표이사 귀하

< 뒷면 >

ⓐ 계약 요청서류 접수일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 사실

ⓑ 건설산업기본법에 의한 일반공사의 경우 수의계약 요청서류 접수일 현재 기술자 보유 현황이 당해공사 시공에 필요한 업종등록 기준에 미달하는 사실

ⓒ 부정당업자 제재가 진행중인 사실

ⓓ 계약 요청서류접수 요청일 기준 최근 1년 이내에 지방계약법 시행령 제92조 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제92조의 규정에 의하여 부실시공, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위제출, 입·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자

ⓔ 계약 요청서류접수 요청일 기준 최근 1년 이내에 당해 자치단체의 입찰 및 계약, 계약이행 과정에서 계약이행 지연, 시공과정에 정당한 이행명령 거부, 하자보증기간내 5회 이상 하자보수, 기타 당해 자치단체와의 계약이행 과정에서 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약체결이 곤란하다고 판단되는자

ⓕ 계약 요청서류접수 요청일 기준 최근 1년 이내에 당해 자치단체 계약체결과 관련하여 포기서를 제출한 사실이 있거나 계약이행도중 포기서를 제출한 사실이 있는 자

ⓖ 수의계약체결일 현재 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률제33조에 해당되는 자

【 붙임 5 】

월간공정보고

□ 용역명 :

□ 용역개요

○ 현장위치 :

○ 용역기간 : 200  년  월  일 ～ 200  년  월  일

○ 계약금액 :            원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용(200 . . . ～ 200 . . .)	비고
첫째주		실시/예종공정(%)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	-공정 지연시 : 지연의 구체적인 원인 표기

※ 공정보고내용 : 1. 전체 공정의 진행상황(예정/실시)

2. 전월 작업내용/금월 예정 작업내용

3. 인원투입현황 및 외주작업현황(단위는 시간으로 표기)

4. 공정진행상의 문제점 및 해결책

상 호 :
주 소 :
대표 이사 :	(인)
책임기술자 :	(인)

경기문화재단 대표이사 귀하

【 붙임 6 】

주간업무보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 200 년  월  일 ～ 200 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(200 . . .)	금주 예정사항(200 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

상기와 같이 전주의 업무수행내용과 금주의 업무수행계획을 보고 드립니다.

200 년   월   일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

경기문화재단 대표이사 귀하

【 붙임 7 】

공종간의 업무분장

공 사 내 용	건축	인테리어	소방	기계	통신	전기	폐기물	비 고
“ 공 사 내 용 은 상 황 에 따 라 별 도 표 기 ”

【 붙임 8 】

계획설계(schematic design)(설계설명서) 도서내용

종류		내 용	비고
건축	공사비 계산서	재료 ․ 장비선정에 따른 개략 공사비
	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악
		설계구상안
	건축계획서	설계개요
		배치계획, 평면계획, 입면계획, 단면계획
		외장재료 비교 분석
	모형	Sketch 또는 Study Model(필요에 따라 협의가능)
	건축 도면	배치도, 대지 종 ․ 횡단면도
		각층 평면도, 입면도(2면 이상)
		단면도(종 ․ 횡단면도)
	심의 도서	심의대상인 경우
구조	구조계획서	구조계획개요
		기본 구조적용 시스템 및 대안, 경제적 타당성 검토
	심의 도서	구조심의 대상인 경우
기계	기계설비 계획서	발주기관 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정
		기계설비 계획개요
		각종 개통도 및 zoning 계획
		적용 시스템 비교 검토
		개략 공사비 추정
	심의 도서	심의 대상인 경우
전기	전기설비 계획서	해당 법규 검토
		설계방향 설정, 전기설비계획개요
		추정 부하 산정
		개략 예산 검토
	심의 도서	심의 대상인 경우
인테리어	인테리어설계 계획서	편의시설 계획도
		내부 설비계획도
		공간별 편의시설 배치 계획도
	심의 도서	심의 대상인 경우
방재	심의 도서	법규체크리스트 및 소방개략계획서

【 붙임 9 】

중간설계(Design Development) 내용

1) 건축(인테리어부분포함)

종 류		내 용	비고
일반사항	개략 시방서	주요공사 및 자재에 대한 공사시방서 초안 작성
	공사비 개산서	계획설계 적용기준에 따라 개략공사비를 계산하여 예산과 비교
	건축계획서	공사개요(위치, 대지면적 등)
		건축물규모(건축면적, 연면적, 전시실 확충 높이 등)
		편의서설 용도별 면적 및 전시설 확충 면적
		배치계획
		전시동과 편의시설간의 동선계획
		평‧입‧단면 계획
	법규 검토서	관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성
	안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구적도	대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표	바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배치도	편의시설 면적별 배치도 및 기타 구조물의 배치
	평면도	각 부분별 평면도
		방화 구획 및 소방시설의 구획
	입면도(4면 이상)	주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료 (인테리어 포함)
	주단면도 (종․횡단면도)	건축물 최고높이, 층의 높이, 반자높이
		천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현
	투시도, 조감도	투시도 및 조감도

2) 기계

종 류		내 용	비고
일반 사항	개략 시방서	기계일반시방 및 전문시방서(초안) 작성 ․실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항
	개략 공사비 계산서	각 공종별 단위면적당 공사비개념으로 개략 산정
	설계 설명서	계획 설계시의 내용을 발전 확정 ․ 공사 개요 위치 ․규모 ․공사기간 ․공사 금액 등 ․ 주요 기계 설비 공기조화, 냉 ․난방, 위생, 소화, 가스, 자동제어, 기타설비 ․ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ․ 주요 시공 계획 ․ 개략 공정 계획
	개략부하 계산서	설계기준에 따라 단위면적당 부하를 기준 ․ 주요 설비 개략 용량 계산서 ․ 간이 부하 계산서
	소방시설 계획서	건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
	에너지 심의서류	에너지 절약계획서 및 기타 서류
도면	일반 사항	․ 범 례 ․ 도면 목록 ․ 기계 ․기구 일람표(수량, 용량, 사양 등)
	배치도	․ 상하수도의 연결 관계, 오수 및 배수 계획 등
	계통도	․ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기 조화, 냉 ․난방, 위생, 소화, 가스 기타 설비의 계통도
	평면도	각 설비에 대한 평면도
	가스인입확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사, 확인(가스사용시)
	기구 상세도	기구의 선정
	기 타	발주기관에서 필요한 도면

3) 전기, 통신,소방

종 류		내 용	비고
일반 사항	개략 시방서	표준 시방 및 전문시방서(초안) 작성
	개략공사비계산서	계획설계시의 내용을 발전 확장 공종별 단위 면적당 개략공사비
	설계설명서	계획설계시의 내용을 발전 확장
	부하계산서	용도별 조도 기준 작성
	소방시설 계획표	각종 설치시설에 대한 계획표
도면	도면 목록표
	배치도	옥외조명 설비, 통신, 소방 평면도
	계통도	전력계통도(수변전설비 단선결선도 포함)
		통신계통도
		조명계통도
		소방계통도
	상세도	조명기구, 통신기구, 소방기구
	배치도	조명기구, cctv, 소화설비, 통신기구
		통신기구
	평면도	조명, 소방, 통신 평면도

【 붙임 10 】

실시설계 내용

1) 건축(인테리어부분포함)

종 류			축 적	비고
일반 사항	공사시방서
	설계 개요 (기계, 전기, 통신도면에 수록)
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반 도면	표지
	도면 목록표
	안내도
	구적도
	지적도
	면적 산출표
	배치도		1/100이상
	평면도		1/100이상
	입면도(2면 이상)		1/100이상
	단면도(종․횡단면도 등)(기계, 전기, 통신도면에 수록)		1/100이상
	실내벽 및 반자의 마감도(기계, 전기, 통신도면에 수록)		1/100이상
상세 도면	상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50
		계단 평 ․ 단면상세도	1/5～1/50

종 류			축 적	비고
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50
		주출입구부분 평, 입, 단면상세도	1/5～1/50
		출입구 셔터 상세도	1/5～1/50
		전시실 확장 부분 상세도	1/5～1/50
		출입구 상세도	1/5～1/50
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100
		지하층 단면 상세도	1/5～1/100
		주요부분 내벽 상세도	1/5～1/100
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50
		창호 평면도	1/5～1/50
		창호 상세도	1/5～1/50
		창호 입면도	1/5～1/50
		창호 잡철물 목록	1/5～1/50
	천정도	각층 천정 평면도(기계, 전기, 통신도면에 수록)	1/5～1/50
		천정 상세도	1/5～1/50
		부분 상세도	1/5～1/50
		천장 관련 설치 상세도	1/5～1/50
	내부	로비바닥패턴도	1/5～1/50
		로비 전개도	1/5～1/50
		주요실 전개도	1/5～1/50
	상세도	화장실 전개 상세도	1/5～1/50
		칸막이 전개도 및 상세도	1/5～1/100
	실내 부위	실내마감 상세도	1/5～1/50
	부품도	각 부품도	1/2～1/50
특수 분야 및 기타 도면		건축용 평 ․ 단면도	1/5～1/100
		각종 설비도
		계산서
		소음․방진, 인테리어부분 등

2) 기계

종 류		내 용	축 적	비고
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 표준 및 전문특기사항을 상세히 기술 ․ 공종별 일반사항 ․ 당해 공사에 필요한 특기 사항 ․ 표준 시방서, 전문 시방서, 관급 자재 시방서
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성 ․ 내역서, 일위 대가표, 물량산출근거, 단가산출근거,각종 계산 근거등
	부하 계산서	설계 기준에 따라 세부 부하 계산 ․ 주요 기계 설비의 용량 계산서 및 선정서 ․ 부하 계산서
	설계 설명서 (종합 보고서 에 수록)	설계 과정에서 확정된 내용 정리 ․ 공사 개요 위치 ․ 규모 ․공사기간 ․공사 금액 등 ․ 주요 기계 설비 공기 조화, 위생, 냉․난방, 소화, 가스, 자동제어, 기타 설비 ․ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ․ 세부 시공 계획 ․ 세부 공정 계획
도면	도면 목록표	․ 도면목차, 범례, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	․ 주요 장비의 사항을 알아보기 쉽도록 표기 (전기도면에 표기)
	배치도	․ 중간 설계시 표기된 사항을 구체화한 내용 ․ 옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리티 등의 인입, 인출과 관경 및 위치 등을 표시	1/100 이상
	각 설비 계통도	․ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기조화, 냉 ․난방, 위생, 소화, 가스, 기타 설비 등의 세부 계통도 ․ 기계실, 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 설비 단면도	-
	각 설비 평면도	․ 공조, 냉난방, 환기, 위생, 소화설비, 가스, 화장실 등에 대한 내용 등을 표시	1/100 이상

5) 전기, 통신,소방

종 류		내 용	축 적	비고
일반 사항	공사시방서	당해공사에 요구되는 표준, 일반 및 특기시방서 작성
	공사비 내역서	내역서, 물량산출서, 일위대가, 단가비교표, 공량산출서등
	각종 부하계산서	아래 기타사항 참조
	설계 설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리(종합보고서)
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도, 통신 배치도, 소방배치도	1/100이상
	계통도	전력간선계통도, 통신계통도, 소방계통도	1/100이상
	평면도	전기실 저압반과의 연결 평면도	1/100이상
		기계실 장비와의 연결 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명, 전열 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		통신 통합배선설비(전화, LAN), TV 설비, 방송설비 등) 평면도	1/100이상
		방범설비 평면도	1/100이상
		기타 필요한 평면도 첨부	1/100이상
도면	상세도	조명기구 상세도
		소방시설 상세도
		cctv 상세도
		접지 설비 상세도
		방송 및 통합배선상세도
		수변전설비, MCC PANEL과의 결선 상세도
		분전반 결선도
		기타 필요한 상세도 첨부

【 붙임 11 】

명   령   부

수 명 연 월 일
지 시 자
수명사항
조치결과

【 붙임 12 】

지   시   부

지 시 연 월 일
수 명 자
지시내용
조치결과

【 붙임 13 】

작  업  일  지

일 자					착 공 일
작 성 자					준 공 일
인력투입현황	기술자명		전일까지	금 일		누 계		특 기 사 항
과업수행내용	※ 각 분야별로 진행과정 및 상황을 파악할수 있도록 작성 다만, 지면 부족시는 별도 첨부