‘남한산성 역사전시관’건립을 위한

기본계획용역 과업지시서(안)

2009. 4

남한산성문화관광사업단

목   차

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업배경 및 필요성

2. 과업의 명칭

3. 과업의 목적

4. 과업의 범위

Ⅱ. 과업의 주요내용

1. 역사전시관 건립 필요성 및 타당성 검토

2. 최적의 역사전시관 부지결정

3. 역사전시관 건립방향 및 규모설정

4. 전시내용 범위 및 전시방법

5. 전시유물 확보방안

6. 기타사항

Ⅲ. 과업수행에 따른 준수사항

Ⅳ. 성과품 납품

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업배경 및 필요성

○ 수도권 호국역사의 산지이자 경기도의 대표적 도립공원인 남한산성내에 낙후된 기존의 역사관을 대체하고, 10년에 걸친 발굴 유물을 전시할 수 있는 역사전시관 건립 필요

○ 남한산성이 가지고 있는 역사문화에 대하여 체계적인 정리와 효과적인 정보전달이 필요

○ 연간 약 170만명이 찾는 역사유적임에도 불구하고 지역의 문화유산 및 역사자료를 수집, 관리, 보존, 연구, 전시하는 시설이 전무

2. 과업의 명칭 :『남한산성 역사전시관』기본계획용역

3. 과업의 목적

○ 남한산성 내에 일어난 역사의 변천과정을 망라하여 알리고, 10여년의 발굴유물을 전시하여 교육자료로 활용하며, 남한산성관리를 총체적으로 전담할 수 있는 기능을 수행하기 위한 전용공간을 건립하기위한 시설의 기본계획수립

4. 과업의 범위

가. 지역적 범위 : 남한산성 내․외 (산성내 문화재와 연계되는 동선)

나. 시간적 범위 : 용역 계약일로부터 150일

다. 과업수행 보고회 개최(3회)

ㆍ1차 보고회 : 착수일로부터 50일 이내

ㆍ2차 보고회 : 착수일로부터 90일 이내

ㆍ3차 보고회 : 착수일로부터 130일 이내

※ 보고회는 문화재위원 및 전문위원 3인, 관련부분 전문가 3인이상 입회하여 개최하며, 보고후 지도의견서를 최종결과물에 수록.(필요시 보고회 중 1회는 주민설명회로 대체할 수 있으며, 최종보고회는 전문토론회나 세미나형식으로 개최)

Ⅱ. 과업의 주요내용

1. 역사전시관 건립 필요성 및 타당성 검토

○ 기존의 역사관이 있음에도 새로운 역사관 설립의 필요성 및 타당성 검토

2. 최적의 역사전시관 부지결정

○ 남한산성 내 중요문화재와 연계되는 동선을 고려하여 다음과 같은 평가기준으로 부지 결정

가. 후보지의 인문․자연 환경 고려(주변 문화재와의 경관 고려)

나. 후보지의 내방객선호도 및 지역적 특성

다. 지역발전 기여도

라. 역사전시관에 대한 인식도 및 발전 가능성

마. 이용수요와 교통환경이 좋고, 도민 및 타지역에서의 접근이 양호한 지역

바. 대상부지 및 문화재 권역 유인항공촬영

3. 역사전시관 건립방향 및 규모설정

○ 역사전시관의 명칭 및 건립방향 수립

가. 남한산성의 지역적 특색과 도민정서, 관련유물과 시설물의 성격 등과 같은 여러 항목을 검토하여 가장 적합한 건립방향 제시

나. 역사, 전시, 행정 기능을 통합하는 명칭 강구

○ 역사전시관의 규모설정 및 관련 법령검토

가. 세계문화유산 및 타지역 문화재보호구역 내 건립되어 있는 유사 성격의 역사전시관 사례분석

나. 전시유물의 범위 설정 후 남한산성 관리기능을 포함하는 적정 공간 규모설정

다. 문화재보호법, 자연공원법, 건축법 등 해당 부지에 관계되는 법령검토

4. 전시내용 범위 및 전시방법

○ 전시내용의 범위결정

가. 남한산성의 역사(삼국시대~현대)를 아우르며, 발굴 결과 시기별로 새로 해석되는 역사적 사실을 발굴유물과 유기적으로 연계하여 전시

- 통일신라 초대형기와 유물전시

- 조선시대 행궁 및 산성 발굴유물 전시

- 산성내 고문헌 및 민속품 조사 및 전시

나. 남한산성 관련 전시테마발굴 및 전시방법 제시

- 군영체제와 산성의 축조실

- 도총섭 벽암대사와 승병기념실

- 항일의병 및 천주교 박해실 등

○ 전시방법 : 역사전시관의 가장 중요한 기능으로 다음과 같은 전시프로그램에 대한 검토 및 각종 방안 제시

- 상설전시 (전시개념, 전시체계, 영역별 전시계획)

- 기획전시 (국내외 전시관 기획전시 사례제시 및 검토)

- 특별전시 (국내외 전시관 기획전시 사례제시 및 검토)

- 대관전시 (국내외 전시관 기획전시 사례제시 및 검토)

- 야외전시 (국내외 미니어쳐 구성 및 사례제시 및 검토)

5. 전시유물 확보방안

○ 원활한 전시작품 확보를 위한 기초자료로서 국내외 박물관 및 전시관 현황, 경매현황, 유사 박물관 및 전시관 소장품 현황 등을 각 장르별로 파악하고 작품구입 및 기증, 위탁으로 확보가능한 작품의 개략적 현황파악을 통한 작품확보계획 수립

6. 기타사항

1) 역사전시관 건립 추진계획 수립

① 역사전시관 건립 추진기구 구성

ㆍ역사전시관 건립을 수행하고 추진할 『남한산성 역사전시관』건립추진단 구성계획, 소요인력, 직제, 기구, 예산확보, 구성시기 등과 관련한 구체적 자료제시와 실질적 수행방안 제시

② 역사전시관 조직구성

ㆍ역사전시관 건립과 운영에 필요한 효율적인 조직구성 방안 제시

③ 역사전시관 활동계획

ㆍ역사전시관 활동(연구, 작품수집, 전시, 보존처리, 홍보, 교육 등)에 대한 국내외 사례제시와 함께 장단점을 분석하여 우리 실정에 맞는 역사전시관 활동모델 제시

④ 역사전시관 건축계획

ㆍ역사전시관의 성격, 형태, 건립부지, 활동계획, 작품소장, 조직 등의 제반여건을 고려한 적정한 규모의 건축을 위하여 국내외 우수 역사관, 전시관 및 박물관 건축사례와 장단점을 비교하여 건축규모와 건축방향, 실현가능한 건축계획 수립

⑤ 건립비용 및 건립일정 수립

ㆍ건립비용은 실제 건립시기를 기준으로 최근 5년간의 물가변동상황을 고려하여 산출

ㆍ사업추진 과정에서 예측되는 각종 변수의 대비책과 건립과 관련된 행정적, 법적, 재정확보방안 등의 검토를 통한 건립일정 수립

2) 역사전시관 설계

① 기본설계

ㆍ설계지침 수립

- 기본 설계 및 주요설비 설계에 대한 지침을 현행 법률에 규정된 제반여건을 고려하여 제시하고, 선진박물관 사례조사를 통한 벤치마킹

ㆍ건축/설계 계획

- 설계현상공모 요강, 대상범위, 자격, 관련법규 검토, 계약형태, 각종 지침서, 각종서식, 작품심사위원 구성, 심사평가 등의 각종 방안을 검토제시

ㆍ공간계획 수립

- 공공, 전시, 교육, 사무, 부대시설 등의 공간활용 계획이 설계에 반영될 수 있도록 제시

ㆍ기술분야 계획수립

- 건물구조, 전기/통신, 기계설비, 시설관리계획을 수립하여 설계에 반영될 수 있도록 제시

② 실시설계

ㆍ설계지침 수립

- 실시설계지침을 제시하고 과업지시서 및 실시설게 계획안 제시

- 실시설계 총괄 체크리스트 및 설비 ․ 도면 체크리스트 제시

③ 건축, 설비공사

ㆍ각종평가 및 법률검토

- 관련법규 검토 및 환경 ․ 교통영향 평가지침서, 기술심의서 제시

ㆍ공사일정 수립

- 실현가능한 공사일정계획수립

ㆍ시공업체 선정 및 공사

- 합리적 시공업체 선정방법 및 공사관련 체크리스트

Ⅲ. 과업수행에 따른 준수사항

1. 수급인은 계약체결후 7일이내에 작업에 착수하여야 하며, 착수할 때 착수계, 연구계획서, 과업수행계획표, 대리인계, 연구자명단 및 이력서, 보안각서등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

2. 과업 진척보고는 발주처의 요청이 있을때 서면으로 보고하고, 과업 단계별 중간보고 및 과업완료 이전에 종합보고를 하여야 하며, 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때 과업추진사항을 보고하여야 한다.

3. 과업수행을 위하여 관련분야 전문연구기간을 활용할 수 있으며, 남한산성문화관광사업단에서 추천한 각 분야의 전문가들의 각종 지식·정보 등을 최대한 자문받아 과업을 수행하여야 한다.

4. 수급인은 각 과업에 대하여 발주처와 사전협의를 거치고 협의된 사항에 대하여는 발주처의 방침을 받아 계획에 반영하여야 한다.

5. 수급인은 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주처의 과업의 수정이나 보완 등의 추가요구가 있을 때 수급인은 이에 따라야 하며, 중요사항의 수정, 보완은 수급인과 발주처가 협의 결정하되, 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

6. 수급인은 과업수행에 필요한 각종 연구자료들을 국내외 전문기술 및 지식을 이용하여 과업을 수행하여야 한다.

7. 과업의 대가는 관계법령이 정하는 대가 기준에 의한다.

8. 과업수행자 중 과업수행에 부적당한 인력이라고 발주처가 인정할 때는 발주처가 즉시 교체를 명할 수 있다.

9. 수급인은 과업수행에 대하여 제반 관계법령이 규정한 각종 행정절차에 대한 제반조치를 취하여야 하며, 이로인한 비용은 별도로 청구하지 못한다.

10. 보고서는 감독관과 협의하여 인쇄하여야 하고, 최종 납품시 제출하여야 한다.

11. 수급인은 각종 과업계획수립에 대하여 각 분야 전문인들로 자문위원을 위촉하여 자문을 받아 계획을 수립하여야 하며, 이들에 대한 자문료는 수급인의 부담으로 한다.

12. 과업수행중 부득이한 사유로 당초 공정대로 과업수행이 진행되지 않을 경우에는 계약만료일 30일전에 관계사유를 명시하여 과업연구원을 제출하여야 하며, 발주처가 그 사유가 타당하다고 인정할 때는 관계법령이 정하는 범위내에서 계약기간을 조정할 수 있다.

13. 수급인은 과업지시서에 명기된 사항이나 발주처의 정책변화등에 따른 과업내용의 변경을 발주처와 협의하여 변경할 수 있다.

14. 수급인은 계약체결후 50일내에 초안보고서, 90일내에 중간보고서 및 중간보고회를 개최하여야 하며, 이를 바탕으로 공청회를 개최한 후 과업완료 20일전까지 최종보고회를 개최한 후 최종보고서 및 연구성과품은 계약만료일내에 납품하여야 한다.

15. 수급인은 다음의 보안사항을 철저히 이행하여야 한다.

가. 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며, 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

나. 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며, 각종 평가자료 및 전산자료를 함께 제출하여야 한다.

다. 과업폐기물은 소각처리하여야 한다.

라. 기타 과업수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 수급인이 진다.

Ⅳ. 성과품 납품

구 분	명 칭	규 격	수 량
중간보고서	1. 1~3차 중간보고서 2. 성과품 수록 CD - 보고서 등 관련자료 일체 포함	A4 CD-ROM	50부 2장
최종보고서	1. 최종보고서 2. 조감도, 시설배치도 3. 전시 컨셉마스터플랜 4. 성과품 수록 CD - 보고서 등 관련자료 일체 포함	A4 A1 A3 CD-ROM	300부 각 3점 각 3점 5장