설   계   서

(남한산성 행궁권역내 지장물 철거공사)

2009. 07.

경 기 문 화 재 단

[남한산성문화관광사업단]

1. 설 계 설 명 서

1. 공사명 : 남한산성 행궁권역내 지장물 철거공사(8가구)

2. 위  치 : 경기도 광주시 중부면 산성리 536-1번지 일원(30,685㎡)

3. 공사의 목적(과업내용)

- 본 과업은 경기도 광주시 중부면 산성리 일원 남한산성 복원․정비사업과 관련, 잔여 건축물 및 부속시설 등 지장물을 철거(상차포함) 하는데 있음.

4. 공사개요

가. 가설공사 : 외부강관파이프비계 설치 및 안전보호시설(540㎡)

나. 철거공사 : 기존 건축물 및 지장물 철거(철근콘크리트 및 조적조, 석면슬레이트 등 해체․철거)(1542.04㎥)

다. 기타공사 : 현장정리 및 폐기물 상차 등(1542.04㎥)

※ 붙임 철거 현황 도면 참조

5. 공사기간

- 본 철거공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 철거완료시까지로 하며, 공사기간은60일로 하고 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간중 기상상황으로 인하여 작업이 지연되었을 때

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

3) 시행청의 지시에 의하여 공사가 중단되었을 때

4) 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

6. 설계변경조건

- 본 공사중 아래와 같은 경우에는 설계변경할 수 있다.

1) 공법상 변경이 필요할 시

2) 시공시 현장조건이 설계내용과 상이할 때

3) 기타 당시의 사정에 의하여 공사량의 증감이 필요하게 될 때

4) 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때

5) 천재지변 등으로 인하여 설계변경사유가 불가피할 시

6) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

7. 특기사항

- 본 공사는 문화재 발굴을 위한 철거공사로서 기초, 옹벽등 지면과 접한 부분의 철거시에는 담당원 또는 발굴기관의 입회하에 공사시행한다.

2. 공 사 시 방 서

1. 적용범위

- 남한산성 행궁권역내 기존건축물 정비공사의 시방규정은 특이한 사항을 제외하고는 건설교통부 제정 건축 및 토목공사 표준시방기준에 의거 적의 시행한다.

2. 공사감독원

- 본 시방서에서 감독원이라 함은 경기문화재단에서 임명한 감독 책임자로서 공사 전반에 대한 현장 감독업무를 수행하는 자를 말한다.

3. 공사진행 및 주의사항

- 설계도서 및 시방서와 내용이 서로 다르거나 현장 상황 및 관련공사와 부합되지 않을 때는 감독원과 협의하고 시방기준에 의거 시공한다.

4. 공정표 및 작업계획서

1) 시공자는 공사 착공전에 공정표 및 작업 계획서를 작성하여 발주청에 제출하여야 한다.

2) 계획서는 주요공정의 안전관리계획 및 자재조달 등이 포함되어야 한다.

5. 사용자재

- 본 공사에 사용되는 모든 장비 및 재료는 한국 산업표준화법 (K.S) 표시품으로서 정품을 사용하여야 하며, 한국산업표준규격 표시품이 없을 경우에는 건설교통부장관이 지정 고시하는 검사기준, 공산품 품질관리법에 의한 검사 기준품 이상으로 사용하며 기타 규격의 품목은 감독관의 승인을 받아 사용한다.

6. 시공검사 및 공사사진

1) 각 공정의 착수시는 미리 감독자가 지정한 공기에 이르렀을 때 확인을 받고 다음 공정을 시행한다.

2) 시공후 검사가 불가능하거나 공사가 어려운 부분에 대하여는 감독자 입회하에 시공하고 준공시 각 공정별 공사 전,후 사진첩 및 관계증빙서류를 각 2부씩 발주처에 제출한다.

7. 공사현장 관리

1) 본 공사를 시공함에 있어 인접한 시설물에 손해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 시설물에 손해가 발생할 경우 시공자가 즉시 원상복구토록 한다.

2) 노무자의 출입 풍기단속 등 노무자 관리에 철저를 기하여 공사를 추진한다.

3) 철거작업시에는 소음․분진 발생을 최소로 하여야 하고, 환경 및 작업자 보호를 위한 관계규정을 준수하여야 한다.

※ 사업장내 특정공사 사전신고 및 석면 함유 건축자재 해체․제거시에는 산업안전보건법에 의한 작업허가를 필하여야 한다.

4) 본 공사장은 문화재(국가지정, 도지정)에 근접하여 있는 바, 철거작업으로 인한 문화재의 피해가 없도록 조치 후 공사를 진행하여야 한다.

8. 안전조치 및 보양

1) 본 공사 기간동안 인접 건축물 등의 파손의 우려가 있는 재료 및 기성품에 대하여는 파손되지 않도록 사전 필요한 조치를 취하여야 한다.

2) 철거작업중 산소 용접기 등으로 절단작업을 할 경우에는 화재예방에 필요한 조치를 취하고, 소화기 2대이상 현장에 비치한다.

※ 현장 여건상 발주처 등에서 행정대집행시 인력 및 장비 등의 안전에 각별히 유념하여야 하며, 가재도구 반출 후 감독자의 지시에 따라 즉시 철거를 진행하고 건축물의 형상을 갖추지 못하도록 철거하여야 한다.

9. 청소 및 현장정리

1) 공사 완료시에는 모든 보호조치는 제거하고, 인접 건축물은 물론 부지내 청소를 깨끗이 한다.

2) 공사중 반입된 자재 및 장비 등은 공사 완료후 정리 정돈을 철저히 한다.