남한산성 행궁권역 정비사업(전통공원 조성 외)

실시설계용역 과업지시서

2010.  3

목     차

총  칙

과업의 명칭

과업의 목적

과업의 범위

과업의 기본방향

과업의 수행기간

과업의 내용

과업의 일반지침

과업수행 일반사항

적용기준 및 기술

용역시행 계획서 제출

업무협의 및 과업진도 보고

법률에 의한 인․허가사항 검토

관계기관 협의 및 인․허가, 심의자료

자문위원회 심의

계약상대자의 책임

보안 및 비밀유지

하도급 범위

설계변경조건

용역대가지급

설계내용의 변경 및 수정

설계하자

계약의 해지

설계도서작성시 고려되어야 할 사항

과업에 대한 성과품 제출

과업수행 시 유의사항

실시설계

설계조건 검토

일반사항

개략 실시설계도 작성

전통 조경식재 및 전통 구조물

전통 보행로 축조 및 포장

전통공원내 토목 및 건축

배수 및 상수도

조경식재 및 시설물

전기․통신․소방

기타 부대공사

설계도서 작성

일반사항

보고서, 설계도서, 시방서 등 용역 성과품 작성

설계도서 주요 표기사항

성과품 목록

성과품의 종류 및 납품수량기준

기  타

총  칙

과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “남한산성 행궁권역 정비사업”이라 한다. 본 과업에서는 편의상 “경기문화재단(남한산성문화관광사업단)”을 “발주기관”이라고 하고, 수급인을“계약상대자”이라고 칭한다.

과업의 목적

◦ 남한산성 행궁권역 정비사업은 남한산성의 중심지인 행궁권역의 행궁진입부, 침괘정 주변, 인화관터, 로터리, 남문주차장을 복원․정비하여 남한산성의 정체성을 살린 역사와 문화공간을 조성하기 위한 목적이다.

과업의 범위

공간적 범위 : 경기도 광주시 중부면 산성리 행궁~광장일대

공원조성 : 30,685㎡ ± α

실시설계

과업의 기본방향

행궁권역 전통공원 조성을 위한 실시설계

전통공원과 인접하여 있는 남문주차장 및 중앙주차장 전통조경 의견제시

토지이용에 관한 각종 인․허가 및 협의사항 이행

기타 본 과업지시서가 정하는 사항 등

본 과업은 국가사적 제57호 남한산성, 제480호 남한행궁과 관련하여 정비사업을 시행하는 것이므로 설계단계에서 관련 문화재위원 (3인이상)의 자문을 받아 설계토록 한다.

전통공원 조성시 우리나라의 전통양식을 최대한 반영하여 과업을 진행하도록 한다.

인화관 발굴조사 완료 후 인화관 복원부지가 확정됨에 따라 실시설계시 인화관 복원부지를 설계 범위에서 제외하도록 하며 전통공원조성 공사시 인화관 복원과 관련하여 공사를 진행할 수 있도록 실시설계에 반영한다.

로터리에 종각이 복원됨에 따라 이 지역을 포함하여 실시설계에 반영한다.

과업의 수행기간

용역기간 : 착수일로부터 5개월(150일간) 이내 (단, 60일은 문화재청 설계승인기간으로 함)

다음과 같은 사유로 인해 계약기간 내 용역 업무를 수행하지 못할 경우에는 만료일 20일 전에 과업수행기간연장신청서를 제출하고 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되어 기한 내 완료가 불가능할 때

발주기관의 지시에 의하여 중단되었을 때

천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력적인 사태의 발생으로 업무추진이 불가능할 때

과업의 내용

실시설계

설계의 제반조건 및 공원주변 관련사업의 세부조건 검토

개략 실시설계도 작성

토목분야

(1) 구조물의 안정성 및 수리계산

(2) 단지계획 등의 설계

(3) 토공설계

(4) 도로 및 주차장 설계

(5) 배수설계

(6) 상하수도설계

(7) 구조물설계

조경분야(전통조경․공원 조성)

(1) 식재계획

(2) 시설물계획(휴게 및 녹지공간조성 등)

전기, 통신, 소방분야

설계도서 작성

종합성과보고서 작성

설계도면 및 시방서 작성

설계예산서 작성

각종 인허가도서 작성

용지도, 지장물 등 도서 작성

조감도 작성

기타 용역성과품 작성 제출 등

과업의 일반지침

과업수행 일반사항

본 과업지시서는 남한산성 행궁권역 정비사업을 위한 실시설계용역에 적용한다.

계약상대자는 본 과업과 관련하여 문화재보호법 제18조의 2규정에 의거하여 문화재수리기술자 중 실측 ․ 설계기술자 및 엔지니어링기술진흥법에 의한 (토질및기초, 토목구조, 도로및공항, 상하수도, 조경, 교통, 도시계획, 수자원개발)로 신고를 필한 업체여야 한다.(기술사법의 규정에 의하여 등록된 기술사사무소 포함)

계약상대자는 이 사업의 목적에 부합되도록 경제적이며, 효율적인 설계기준으로 본 과업을 효과적으로 성실히 수행하여야 한다.

계약상대자 과업수행에 있어 문화재법, 건설기술관리법 등 관련제반법령 및 행정지시사항 등을 면밀히 검토하여 이에 위배되지 않도록 적법하게 수행한다.

설계에 임하기전 현장조사 자료 등을 상세히 검토하고 전통공원 조성 및 운영경험을 반영하여 각 구조물 설계하중, 조경시설자재의 성능비교 등을 조사 후 설계를 수행함으로서 공사 중 설계변경의 최소화 및 성능과 신뢰성이 확보될 수 있도록 최적설계를 시행한다.

본 과업지시서에 기술되어 있는 모든 사항은 상호보완적이며, 계획 및 현지여건 변경 등 중대한 사항의 변경으로 감독원이 과업내용의 변경을 서면으로 승인하였을 경우에는 계약일반조건 및 특수조건에 따른다. 또한, 본 과업내용에 명시되지 아니한 사항이라도 설계과정상 불가피하거나, 당연히 시행하여야 할 사항은 본 과업에 포함된 것으로 본다.

본 과업을 수행하던 중 현장대리인이나 계약상대자의 기술자가 과업수행에 부적당하다고 인정될 때는 감독원이 즉시교체를 요청할 수 있으며, 계약상대자 이를 따라야 한다.

본 과업지시서에 기술한 내용의 해석이 쌍방간에 상이할 경우에는 상호 협의하여 결정하되 협의가 되지 않을 시는 발주기관의 해석에 따라야 한다.

계약상대자 과업수행에 있어 기본계획 및 자문위원회 자문내용, 남한산성종합발전방안 등과 상호 연계성이 유지되도록 충분히 검토 후  실시설계 계획에 반영하여야 한다.

적용기준 및 기술

과업지시서 해당 조항에서 특별히 정하지 않는 것은 정부가 제정한 관련법규 및 제 기준서와 공공단체가 발행한 최신자료를 활용한다.

관련법규 및 규정

(1) 건설공사 관련법령(건기법, 도시계획법, 건축법, 전력기술관리법, 정보통신법, 소방법 등)

(2) 도시공원법, 국토의이용및계획에관한법률

(3) 문화재보호법, 주차장법, 도로법, 하수도법, 수도법

(4) 환경정책기본법, 오수․분뇨및축산폐수처리에관한법률

(5) 한국산업규격(KS)

(6) 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

(7) 하천법 및 소하천정비법

(8) 농지법 및 산지관리법 등

각종 공사 설계기준

(1) 토목공사 일반 설계기준

(2) 구조물 기초설계기준 등

(3) 건축공사 및 건축설비공사 설계기준(건설교통부발행)

(4) 고압가스관련, 환경관련 등 설비설계기준

(5) 하천설계기준(건설교통부 발행)

(6) 조경설계기준(건설교통부 발행)

(7) 전기공사설계기준

(8) 정보통신공사설계기준(정보통신부 발행)

(9) 소방설비공사설계기준

각종 철근콘크리트 주요 구조물의 설계는 강도설계법을 기준으로 하되 허용응력설계법과 안정성, 경제성을 비교검토 하여야 하며, 건교부 제정 콘크리트 표준시방서를 기준으로 하여야 한다.

제반기준 및 기술의 적용에 있어서는 근거와 자료출처를 도면 또는 보고서에 명시하여야 한다.

국내기준이 없거나, 법령 또는 기준의 내용이 서로 다르거나, 여러 방법이 제시된 경우에는 수급인의 의견을 제시하여 감독원과 협의․결정하여야 한다.

건교부 지정「건설신기술」의 적용타당성을 검토하고, 타당성이 인정되는 경우 이를 설계에 반영하여야 한다. 단, 검증이 필요한 경우에는 공사 중에 시험시공 또는 성능시험을 실시하도록 계획을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

용역시행 계획서 제출

계약상대자 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며, 다음사항을 포함하는 상세한 용역시행 계획서를 계약체결 후 7일 이내 착수계를 감독원의 승인을 받아 발주기관에 제출하여야 한다.

사업책임기술자의 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

과업수행계획(수행기구표, 분야별 기술자, 동원인원계획 등)

건설기술 경력사항

세부 예정공정표

단위 과업별 성과물 제출계획서

다음 양식에 의한 참여기술자의 인적사항 및 보안각서

분야별	참 여 기 술 자					서 명
	참여업무내용	참여예상기간	성 명	주민등록번호	자격증번호

과업지시서, 용역비 산출내역서

업무협의 및 과업진도 보고

계약상대자 과업수행 중에 용역수행을 위한 자료수집 및 진행사항에 따라 발주기관과 협의하여 수행한다.

계약상대자 다음의 경우는 물론, 감독원의 요구가 있을 시는 관련 자료를 제출하고 필요시 업무수행기술자로 하여금 내용을 설명토록 하여야 한다.

주요단계별 과업이 종료되었을 때

용역성과에 대한 중간보고 요구 시

주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

기타 발주기관의 승인을 필요로 하는 사항

보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

진도보고 : 매월 말 기준으로 익월 5일까지 공정 보고서 제출

중간보고 : 공정 50%이상일 때 발주기관의 요청에 의해 실시(세부정비계획 수립완료시)

수시보고 : 감독관의 요청이 있거나, 주요 결정사항에 있어 필요한 경우

최종보고 : 용역수행완료 20일 이전에 보고서 작성 제출

월간 진도보고

계약상대자 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 감독원을 경유하여 서면으로 다음과 같이 제출하여야 한다.

(1) 과업추진내용 및 공정현황

(2) 각종 도서수발현황(승인사항 포함)

(3) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

(4) 다음달 과업수행계획

최초 월간보고시에는 현황조사, 개발방안 및 지표를 설정하고, 기초 자료조사, 법적 과업추진계획 등을 보고하여야 한다.

중간보고

계약상대자 발주기관의 요구가 있을 경우에는 관련 자료를 제출하고 감독원의 지시사항(구두, 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

또한, 발주기관에서 Power Point 등 소프트웨어를 이용하여 설명을 요구할 경우 계약상대자 성실히 응해야 한다.

주요 단계별 과업이 종료되었을 때

주요계획 또는 방침의 설정과 변경 시

기타, 수시보고

감독관의 요청이 있거나, 주요 결정사항에 있어 필요한 경우 추진계획을 수립하여 보고하여야 한다.

법률에 의한 인․허가사항 검토

계약상대자 관련법령에 따라 사업수행에 필요한 각종 인․허가에 대하여 면밀히 검토하여야 하고, 감독원이 요구하는 시점에 제출하여야 한다.

관계기관 협의 및 인․허가, 심의자료

설계 개요 및 법령 등 제기준을 검토하여 인가․허가․협의 등 관계법 절차 이행에 차질이 없도록 한다.

자문위원회 심의

과업내용에 대하여 주민설명회를 개최하고, 과업에 지장을 초래하지 않는 범위내에서 의견사항을 반영하여야 한다.

과업수행 중 주요사항 및 우리재단이 필요하다고 인정할 때에는 자문위원회를 개최하고, 필요한 관련자료를 제출해야하며, 제시된 의견사항의 반영 등에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

계약상대자의 책임

계약상대자의 책임범위

계약상대자 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자는 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정․조치하여야 한다.

안전관리의 의무

계약상대자 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생되는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

법률준수의 의무

계약상대자 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률이 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야한다.

보안 및 비밀유지

보안관계법규의 준수

계약상대자는 발주기관에 대해 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

과업성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 필요시 각 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독원과 협의하여 발간하여야 한다.

보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야한다.

하도급의 범위

계약상대자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

하도급을 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

각종조사, 측량 및 이와 유사한 작업

지질 및 토질조사와 이에 부수되는 시험 등의 작업

기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

계약상대자는 하도급으로 처리하고자 할 경우 하도급의 자격 등을 검토 후 발주기관에 제출하여야 한다.

설계 등 용역을 하도급 한 경우에도 계약상대자는 당해 설계 등 용역에 대하여 모든 책임을 진다.

설계변경조건

사업계획 및 설계변경으로 인하여 과업의 범위, 위치가 변경되고, 관계법령에 의한 추가과업이 발주기관과 협의하여 필요하다고 인정된 경우

본 과업 시행 중 우리사업단의 방침으로 중요한 변경 요인이 발생되는 경우

위 각호의 사유로 과업변경요인이 발생될 시 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 협의하여 결정한다.

용역대가의 지급

본 과업지시서와 기타 계약문서에 특별히 기술하지 않는 한 용역대가는 산출내역서상의 계약금액으로 하고, 추정공사금액의 증가로 인한 용역비의 증가는 인정하지 않는다.

설계내용의 변경 및 수정

설계납품 후 공사 준공 시까지 발주기관에서 필요하다고 인정되어 설계내용의 변경 또는 수정을 요구 할 때에는 계약상대자 특별한 이유 없이 이를 거부 할 수 없으며, 지체 없이 이행하여야 하고, 수정변경에 따른 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

설계의 하자

설계상 하자로 인하여 설계용역 중, 공사시공 중, 공사완료 후 건설산업기본법 제28조의 규정에 의한 하자담보기간 내에 인명피해, 예산손실 등을 초래하였을 경우 계약상대자 손해배상 및 민․형사 상의 책임을 진다.

설계내역서, 일위대가 및 단가산출, 설계수량의 착오․누락 등으로 인하여 발주기관에 예산손실 등의 손해를 발생하게 한 경우에는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

계약의 해지

아래사항이 발생한 경우 본 용역계약을 해지 할 수 있다.

발주기관의 합리적인 지시에 불응하여 설계를 진행 할 때

계약상대자의 설계이행이 불가능하다고 인정 될 때

기타 계약조건을 위반 할 때

위‘가’항 내지 ‘다’항에 의하여 계약이 해지된 경우에 계약상대자 계약위반을 이유로 발주기관에 손해배상을 청구 할 수 없다.

설계도서 작성 시 고려되어야 할 사항

시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 충분한 조사 실시

환경친화적 건설공사를 위한 적용기준 제시(공사자재 중 친환경 제품이 있을시 친환경제품을 사용)

사업개발 예정지의 자연환경 조사

환경기법을 통한 기존환경의 보전 및 새로운 자연환경 창출 시도

환경친화적 설계개념을 적용

건설폐기물 발생을 최소화할 수 있는 자재 선정

설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

사업비 산정 및 집행계획

각 시설별 공사비, 관리비 및 기타 사업비를 산정한다.

원활한 공사 진행을 위한 공사기간 및 공종별 사업비 및 각 공종의 연관성 등을 고려한 보상추진 공정계획을 수립 제시하여야 한다.

예정공정표 및 장비, 인원투입 계획

시공(공정)계획은 시공방법, 사용장비, 시공조건 등을 종합적으로 감안하여 가장 경제적인 시공계획을 수립하고 공정계획표는 PERT/CPM 기법에 의해 작성하여야 하며, 공사의 적절한 수행을 위하여 필요한 동원인원, 장비투입, 자재반입계획과 공종별 시공시기, 세부계획 등을 토대로 예정공정표를 작성하여야 한다.

예정공정표는 각종 인허가, 용지보상 계획을 포함한 실제 사업기간을 감안하여 구체적으로 작성하여야 한다.

과업에 대한 성과품 제출

계약상대자는 해당조항에 정한 성과품 및 부속서류를 지정한 기일이내에 제출하여야 한다.

용역과업기간 중 수집된 과업의 성과에 직접 활용한 자료는 부속도서에 포함시켜 제출하여야 한다.

최종성과품 중 종합성과보고서 및 설계도면은 조달청에서 선정 통보한 바에 따라 CD-ROM에 저장 프로그램과 함께 제출하고 제출방법은 사전에 감독과 협의한다.

납품된 설계도서에 수정할 사항이 발생되었을 때는 납품전후를 막론하고 즉시 수정보완 제출한다.

과업수행 시 유의사항

과업수행 시 주민․이해당사자 및 관계기관의 의견을 청취하여 타당하다고 인정되는 경우에는 감독원과 협의하여 이를 반영하여야 하며 기본계획안 및 자문위원회 자문내용, 남한산성종합발전방안 등과의 부합여부와 연계성 등을 검토하고 이를 문서로 작성비치 하여야 한다.

모든 설계는 각각 과업의 범위와 내용에 따라 과업지시서상에 의거 시행하되 여러 대안을 도출하여 구조의 안정성, 시공성, 경제성은 물론 보안 및 방호에 관한 사항 환경의 영향 등을 종합적으로 검토하여 최적화 하여야 하며, 운영 및 유지관리측면에서도 충반한 고려를 하여야 한다.

주요 구조물 배치, 진․출입도로 및 공사용도로 결정시 환경친화적 설계기법을 도입하고 사면녹화 및 공법 제시, 2차 자연훼손 방지 및 생태계 보존대책 등을 수립 설계하고 적정한 사업비를 반영토록 한다.

본 과업으로 인하여 계약상대자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 전체적인 책임을 계약상대자가 손실보상 하여야 한다.

감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며, 계약상대자 이에 응하여야 한다. 이에 따른 소요비용은 계약상대자 부담으로 한다.

자문위원회, 관련부서 및 기관협의 등을 위하여 자료제출 요구가 있을 시는 이에 응하여야 하고 자료제출 등으로 인한 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

실시설계

설계조건 검토

우리사업단에서 2002년에 실시한 기본설계를 재검토하여 관계법령 및 기준 등에 적합하게 건설업자가 시공에 필요한 설계도면 및 시방서 등을 포함하여 설계도서를 작성한다.

실시설계의 기준을 설정하여 감독원의 검토를 받아 실시설계에 반영한다.

계약상대자는 유사한 시설에 대한 전통공원의 사례(궁궐조경, 종각조경, 객사조경 등)를 3곳 이상 조사하고 남한산성의 역사․문화적 특성에 맞는 「전통공원조성계획」등의 조성계획을 검토하여 실시설계에 반영하여야 한다. 최종종합성과보고서 제출시 전통공원 사례에 대한 내용과 설계방안 등을 제시하여야 한다.

실시설계시 행궁지역, 후정지역, 종각지역, 인화관지역, 침괘정지역 등으로 분류하여 설계에 반영하도록 한다.

우리 사업단에서 실시한 종각 기본계획을 검토하여 종각부지에 대한 도로 설계와 전통조경 방안 등을 설계에 반영한다.

이번 설계대상지역인 전통공원 조성 지역과 인접하여 있는 남문주차장과 중앙주차장의 전통조경 방안을 제시하도록 한다.

행궁권역 전통공원 조성사업은 남한산성이라는 역사․문화적 특성을 고려하여 관련 고문헌 및 고지도를 참고하여 설계에 반영한다.

일반사항

본 과업은 행궁권역 전통공원조성 주변의 환경과 조화되도록 설계되어야 한다.

설계 개요 및 법령 등 제기준에 의거 실시설계시 자문위원회 자문내용, 관계기관의 승인․협의․허가조건 등을 검토하여 반영한다.

공사비 및 공사기간 산정, 토취장, 골재원 등의 조사확인 및 자재공급계획, 기본공정표 및 상세공정표를 작성한다.

시방서, 물량내역서, 단가규정, 구조 및 수리계산서 등을 작성한다.

공사시방서는 일반시방서 및 특기시방서를 구분하여 작성하되 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관라계획 등에 관한 사항을 기술한다.

특기시방서는 설계자의 설계의도를 도면에 표기할 수 없는 내용에 대하여 구체적으로 작성한다.

물량산출내역은 표준품셈을 적용하되, 표준품셈에 없는 것은 일위대가표를 작성하고, 일식으로 적용되는 단가도 충분히 납득할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

계획평면도는 종합계획평면도를 작성하고, 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 배수계획평면 및 배수종횡단도 등 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

전통공원 대상지역의 전기 및 통신설비에 관한 사항은 감독원과 사전협의하여 실시설계에 반영한다.

건축물, 수경시설, 전기시설, 통신시설, 수도시설 등 준공 후 특별한 관리가 필요한 시설물은 관계기관과 충분히 협의하여 설계하여야 하며, 동 시설물 등에 대한 유지관리 지침서를 작성 제출하여야 한다.

개략 실시설계도 작성

수급인은 현지조사를 바탕으로 다음 내용이 포함된 개략 실시설계도를 작성하여 발주기관과 조정․협의를 거쳐야 하고, 수정보완사항이 있을 시에는 이에 응해야 한다.

기본 배치 계획도

공간별계획 / 전통조경계획 / 토목 및 건축계획 /  전기통신계획 등

대안분석표

협의과정 : 상기 주요내용이 포함된 배치 안을 3가지 정도 작성하여 협의 결정토록 한다.

1차 : 설계사무소에 제시한 자료를 발주기관에서 심의 결정

2차 : 1차 심의에 결정된(안)을 관련위원회 또는 사용자간의 대안 확정

제출자료 및 도서

모든 자료는 Power Point 등 소프트웨어를 이용한 컴퓨터 활용

기타자료는 필요 부수에 따라 결정(차트판 등)현황조사

현장조사를 통하여 현지의 지형, 지질, 지물, 수문, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 비디오 테이프 등을 이용 하여 과업수행에 유용한 자료를 수집해야 한다.

본지구에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 설계자료로 활용하여야 한다.

현장조사를 통해 얻어진 자료는 성과품 납품시 제출해야 한다.

전통 조경식재 및 전통 구조물

수종은 시장의 유통현황을 감안하고 향토수종 및 남한산성의 전통공간과 어울리는 수종을 선택하여 활용하여야 한다.

대상지역의 식생현황을 조사하고 동 조사결과를 토대로 생태적 조건, 식재위치의  지반조건 등 세부환경, 조경시설 구조물과의 관계, 적정토량의 확보 및 주요부 식재경관, 유지관리에 대한 검토분석을 행한 후 대책수립 및 설계를 하여야한다.

옛 식생경관과 연계하여 정비할 수 있도록 한며, 기존수림대의 유입 및 연결될 수 있도록 한다.

시설물의 설치 위치, 규모, 수량, 종류 등에 대한 사항은 감독원과 협의 결정하도록 한다.

공간별 식재계획 등을 세워 설계에 반영하여야 한다.

전통공원과 경계지역에는 담장 및 식재계획 등을 수립하여 감독원과 상의하여 설계에 반영한다.

조경시설물은 장애자와 노약자 등의 이용에 불편이 없는 시설을 도입하여 이용객의 편의를 도모하여야 한다.

전통 보행로 축조 및 포장

보행로의 종단 및 포장계획, 부대 시설물의 설계를 하여야 한다.

전통공원과 어울리는 포장공법을 감독원과 상의하여 설계에 반영한다.

경계블럭의 규격, 종류 및 포장재료, 구조는 종류별 표준도를 작성 감독원과 협의후 결정한다.

다양한 토지이용 및 장소별 포장문양 대안을 제시하고 감독원과 협의 결정하여 설계에 반영하여야 한다

보행로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 하자가 발생할 우려가 있는 부분은 감독원과 협의하여 연약지반 처리공법을 적용하여야 한다.

전통공원내 토목 및 건축

조성공사의 토공설계자료 및 현장조사결과를 기준으로 전통공원내 토공계획을 수립하며, 토량이동 및 정지계획은 배수계획, 주변지역 도로, 정지계획 등을 감안 합리적으로 수립하여야 한다.

전통공원의 주요지점, 외곽부, 주변도로의 계획고를 기입하고 주요공간에 대하여는 단면도를 작성하여야 하며, 필요시 현황측량을 하여야 한다.

토량계산

토량계산 방법은 양단면평균법을 원칙으로 한다.

양단면 평균법으로 토량계산시  횡단면을 20m 간격으로 작성하고 지반의 기복 및 사면, 구조물 설치에 있어 필요한 경우 중간점의 단면을 두어야 한다.

관련지침에 의한 식재지반 조성 여부 등을 확인하여 수목의 생육에 적합한 지반조성이 이루어지도록 감독원과 협의하여 조치하여야 한다.

토취장이나 사토장이 필요할 시는 감독원과 협의하여 결정한다.

부지내의 기존건축물 철거계획을 수립한다.

종각부지의 도로설계 등은 종각 기본계획을 참고하여 실시설계에 반영한다.

배수 및 상수도

국토해양부 제정 하수도 시설기준, 상수도 설계기준과 지방자치 단체의 조례 등을 검토하여 감독원과 협의하여 결정한다.

하수배제방식은 분류식을 원칙으로 하며, 대상부지의 전체적인 체계와 구역별 상세계획을 수립하여 합리적인 체계를 구성토록 해야 한다.

우수, 오수 및 상수관로 인입계획에 의한 조성공사 관로계획과의 연결 여부를 확인하고 관로계획의 적정성을 검토하여 합리적인 설계를 추진하여야 한다.

상·하수도 형상과 관종은 인입관로와의 연결성 및 합리성과 경제성을 검토하여 감독원과 협의 결정하여야 한다.

하수도 기초공은 지반의 종류에 따라 관의 침하 등을 감안하여 설계 하여야 한다.

상수도관 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 결정하여야 한다.

우·오·상수관이 교차하는 곳은 반드시 관의 크로스 체크(CROSS-CHECK)를 실시하여 시공가능 여부를 확인하여야 한다.

관보호공, 이형관 보호공, 기타 구조물 설계는 감독원과 협의 후 결정하여야 한다.

전기․통신․소방

전원 및 통신계획, 등기구 설치 및 경관조명 등의 계획을 수립하여 감독원 협의 결정하여야 한다.

기타 부대공사

과업범위내의 친수공간(소하천, 저류지, 호수, 실개울 등)에 대해서는 생태·친수 및 이용의 편의성을 증진시킬 수 있도록 설계하여야 하며 필요시 수처리 및 관리에 대한 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

수경시설은 설계 및 규모의 타당성을 검토하고 해당 관련 기관과의 협의를 거쳐 사전 협의사항을 근거로 감독원과 협의 설계하여야 한다.

구조설계에 적용할 계산기준 및 구조재료, 하중 등에 대하여 감독원과 협의하고 구조계산서 등을  제출하여야 한다.

대기환경보전법상 비산먼지 대상사업인 조경공사(면적 5,000㎡이상)에 대하여 세륜·세차시설을 현장규모에 맞게 감독원과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

설계도서 작성

일반사항

계약상대자는 과업 중 별도의 성과품이 작성 될 수 있는 단위 과업에 대한 성과품은 해당 단위 과업의 완료와 동시에 감독원에 제출하여야 한다.

종합성과보고서는 인쇄하기 20일전에 보고서 초안을 제출, 감독원의 사전검토를 받아야 하며, 보고서를 비롯한 용역성과도서 전체 설계도서의 맨 뒷장에 참여기술자별 업무내용 등을 아래양식에 의거 기재하고 서명 날인하여야 한다.

성명	주민등록 번 호	자격명칭 (자격증번호)	참여분야	참여업무	구체적업무	참여기간	전화번호	날 인 (서명)

본 과업수행과 관련된 일체의 내용과 성과품에 대한 권리는 발주기관에 귀속되며, 계약상대자는 임의로 소유, 사용, 복제 또는 외부로 유출시킬 수 없다. 과업수행과정에서 수집되고 직․간접적으로 과업수행에 활용된 자료는 감독원 지시에 따라 용역성과의 부속서류에 포함시키거나 별도로 발주기관에 제출하여야 한다.

계약상대자는 본 과업을 수행하면서 지적 소유권을 침해하여서는 안 되며, 지적소유권 분쟁발생시 이에 대한 비용 및 손해를 계약상대자가 부담하고 모든 책임을 져야 한다.

주요 측량수준점 등 기록보존의 필요성이 있거나 향후 원활한 공사시행을 위하여 필요하다고 인정되는 공사예정지역을 알 수 있도록 도로, 하천 등등 주요전경에 대하여는 사진 또는 VIDEO TAPE를 이용하여 기록을 보관,제출하여야 한다.

성과품은 전산처리를 원칙으로 하며, 저장 프로그램을 조달청에서 선정통보 한 바에 따라 설계도면 및 시방서에 대해서는 CD ROM 저장프로그램이 저장된 CD ROM 으로, 내역서에 대해서는 시설공사 응용프로그램으로 선정통보된 PC용 디스켓(TXT) 또는 EXCEL파일로 제출하고, 제출방법은 사전에 감독원과 협의하여야 한다. 다음사항의 전산처리는 필수적이며, 전산처리한 성과품은 감독원에게 제출하여 사업시행 과정 또는 사업종료 후 발주기관에서 활용할 수 있도록 하여야 한다.

Word Processor를 이용한 종합성과보고서 작성

Auto CAD에 의한 도면작성

제보고서의 광 디스크 수록

제 기술 계산

각종 인허가관련 서류(전산디스켓포함) 등

감독원은 과업수행 과정에서 납품의 구분, 수량 등의 수정을 지시할 수 있고, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

보고서, 설계도서, 시방서 등 용역성과품 작성

종합성과보고서(설계설명서) 작성

종합성과보고서에 세부정비계획과 실시설계승인과정에서 발주기관의 지시 및 협의사항 등 과업 수행과정의 전반적인 내용을 수록 하여야 한다.

계약상대자는 보고서 작성과정에서 수시로 감독원과 협의하며 보고서 작성 후 초안을 제출하여 감독원의 검토를 받아 항목별 수정 및 보완지시를 받은 후 종합성과보고서를 제출한다.

종합성과보고서는 분야별 설계설명서 내용을 참조로 하여 과업의 목적 및 개요, 위치, 개략공사비, 관련법령검토사항, 전통공원 사례비교분석, 주요자재의 성능비교분석 및 선정사유, 주요설계도면, 지질조사보고, 각종시설물 구조계산서, 자문위원회 결과내용 및 조치결과 등을 분야별(토목, 조경,)순으로 작성한다.

설계도면 작성

설계도면 작성은 공공기관이 지정하는 규격으로 한다.

도면상의 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

(1) 단 위 : 단위는 미터법으로 표기하되 ㎜단위로 표시한다.(표기가 곤란한 부분은 예외로 한다.)

(2) 축 적 : 별도의 지시가 없는 한 축척의 모듈은 다음과 같다.

-1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/50, 1/100, 1/200, 1/300, 1/600, 1/1,200

(3) 숫 자 : 숫자는 아라비아 숫자를 사용하여야 한다.

(4) 문 자 : 설계도서(공사비계산서 등 포함)등 제출될 모든 서류에는 한글만을 사용하여야 한다. 다만 표기가 어려울 경우 한자 또는 영문으로 부기 할 수 있다.

(5) 약 자 : 약자는 영문에 한해서 보편적으로 사용되는 범위 내에서 사용하되 반드시 약자 해설집을 별도 작성 목록란 등에 첨부한다.

종단 작성시 필요한 경우 종단면도를 함께 작성한다.

설계도에 각종 재료 표를 표시하여야 하다.

설계도면의 작성은 원고와 원도를 작성하여 준공기한 15일전에 감독원의 사전검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

설계도면 작성을 위한 제도는 KSF1001 도복제도 통칙에 준하여야 한다.

도면은 발주기관의 기술사항과 일치하여야 한다.

모든 설계도면에는 도면 작성자, 검토자, 분야별책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 시공 시에 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항들을 수록하여야 한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

도면하단의 표제난의 형식은 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

모든 도면은 CAD System과 호환성을 갖춘 Format으로 CD-ROM에 담아 제출하여야 한다.

시방서 작성

공사시방서는 문화재청 제정「문화재보호법」, 건설교통부 제정「건설공사표준시방서」,「조경공사표준시방서」「건축공사표준시방서」,「건축설비공사표준시방서」,「전기공사표준시방서」,「정보통신공사표준시방서」,「소방공사표준시방서」, 「공사시방서 작성요령」,「각종공사 설계지침(기준)」등을 준용하여 작성하여야 한다.

공사시방서 작성 시 시공자에게 건설공사의 진행단계별 시공 상세도면 작성 및 감리(감독)자 검토 확인을 의무화하도록 하며, 시공 상세도면 목록을 작성토록 명시하여야 한다.

공사시방서는 설계도면상 표시되지 않은 사항과 도면에 표시할 수 없는 기술적인 사항에 대해서는 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기하여 정밀 시공이 될 수 있도록 하여야 한다. 단, 필요한 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성 할 수 있다.

공사시방서는 본 공사에 특별히 규정되는 일회성 규정으로 발주청이 시공자에게 최적의 품질과 규격이 확보되도록 시공과 관련된 특별히 유의해야 할 사항과 시공 시 준수해야 할 사항을 명시하여야 한다.

설계예산서 작성

설계예산서 작성이 다음 사항을 참고로 작성되어야 한다.

(1) 수량 : 총괄자재집계표, 공종별 수량집계표/자재집계표, 세부공종별 수량집계표 및 산출근거, 기타 등

(2) 설계설명서 : 공사목적,공사개요,위치,기간,규모,물량,관급자재,예정공정표,시설물에 대한 설명, 각종기기의 작동요령 및 사양서  등

(3) 설계예산서 : 설계예산서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등

(4) 단가산출서 : 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등

수량 및 단가산출

수량산출, 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 명시하여야 한다.

적용품셈 및 공사금액 적용기준(공사자재 중 친환경 제품이 있을시 친환경제품을 사용)

(1) 건설교통부제정 표준품셈(실시설계가 착수되는 시점의 발생년도)에 의거 적용을 원칙으로 하며, 기타 사항은 감독원과 협의 후 적용한다.

(2) 공사비중 노무비는 최근년도 직종별 노임단가를 적용하고, 자재단가는 조달청 가격정보지를 적용하되 가격정보지에 없는 것은 물가정보지를 이용한다.

(3) 견적에 의한 적용단가는 2개소이상 비교하여 적당한 단가를 채택하되 관련되는 서류를 첨부한다.

(4) 토취장, 골재원 등 주변지역을 조사하여 최단거리를 설계에 반영한다.

예정가격 작성(=실적공사비 적용)

(1) 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제9조 1항 규정에 의한 실적공사비 적용

(2) 실적공사비에의한 예가작성준칙(회계예규 2200-04-157)

(3) 실적공사비 및 표준품셈관리규정(건교부훈령 2003년 제446호)

각종 인허가 서류 작성

계약상대자는 사업 인․허가에 필요한 각종 관련서류를 제출하여야 하며 관련부서 협의 시 보완사항이 있을 경우 즉시 수정․보완하여야 한다.

설계도서 주요표기사항

공통분야

설계도서명	축 척	주 요 표 기 사 항
종합성과보고서 (설계설명서)	-	• 설계설명서 내용을 참조로 작성 - 과업의 목적 및 개요, 위치, 개략공사비, 관련법령 검토사항 - 설계개요(지역, 지구, 구조, 시설물설치계획 등 필요사항) - 사례조사, 주요자재의 성능비교분석 및 선정사유 - 주요설계도면 - 각종시설물 구조계산서 및 수리계산서 - 자문위원회 심의결과에 대한 지적사항 조치결과 - 분야별 참여기술자 서명된 명단 포함 • 분야별 토목, 조경, 설비, 전기 순으로 작성
조 감 도		• 색채사용

토목분야

설계도서명		축 척	주 요 표 기 사 항
설계설명서		A4	• 공사개요 : 목적, 공사금액, 주요사항 • 설계개요 : - 지역, 지구, 부지면적, 주차면적, 조경면적, 시설별 주용도 등 필요사항 - 기타 필요한 사항 • 사전조사사항 - 주변현황 및 공사 지장물 등 - 관련법령 검토사항 - 선진사례조사 및 주요자재의 성능비교분석 및 선정사유 • 계획 및 방침 - 부지선정, 시설종합배치계획, 시설물간 동선계획, 방재계획, 세부배치계획, 세부구조물 및 수리계획 등 - 도시계획수립지침에 의한 환경성검토서 및 교통성검토서, 재해성검토서 - 시설물 배치계획 등 그 채택에 대한 타당성 설명 • 세부공정계획 • 자재사용계획 • 기타 필요한 사항(경제성분석을 위한 공사비산출 등)
구조 및 수리계산서		A4	• 설계설명서상의 계획 및 방침결정을 위한 세부계산서 및 검토자료(설계기준, 기초허용지지력계산, 구조형식 비교내용, 수리시설물 규모결정방법 등)
세부계산서		A4	• 구조, 토량이동 및 산출, 하수유출량 및 단면, 오수처리방식 및 용량산출 등
시방서		A4 횡	• 주요시방내역 - 일반시방서(일반사항, 공종별 일반사항) - 특별시방서(일반시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행 상 특별히 유의하여야 할 내용을 명시)
실시설계도면	위치도	1/25,000 ~1/50,000	• 주위 지형 지물 표기
	종합계획 평면도	임의	• 축척, 방위, 대지경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지 내 도로의 위치, 폭, 도로경계선에서 조성부지까지의 거리, 각 건축물과 부수시설물 간의 위치관계, 주차장 등 기타 계획 및 시공에 필요한 사항
	계획평면도	1/600	• 시설물계획평면도, 배수계획평면도, 오수계획평면도, 우수계획평면도, 상수도계획평면도, 포장계획평면도, 주차장계획평면도, 구조물계획평면도, 기타 필요도면
	토공도	1/600	• 세부 토공계획도, 표준도 등(도로, 우수, 오수, 구조물 등 공정별로 분리작성)

설계도서명		축 척	주 요 표 기 사 항
실시설계도면	종횡단면도	1/600	• 토공, 포장, 배수, 우수, 상수, 오수 등의 세부 종횡단면도
	오수처리시설	1/600	• 오수처리방식에 의하여 작성(건물 내에 설치 시 건축분야에서 설계, 펌프 및 배관, 전기 등 설비시설 사항은 각각의 분야에서 설계)
	시설물상세도	1/600	• 광장 포장 평면 및 단면상세도, 각종 구조물 상세도(옹벽, 석축, 집수정, 경계석, 측구 등), 맹암거설치 평면 및 단면상세도, 관람석 평면 및 단면상세도(구조도 포함), 광장 시설물상세도, 기타 부대시설물도(옹벽, 석축 등 전개도 작성) 등
	기타관련도면	임의	• 기타 필요한 도면 일체(각 공정상 세부 상세 및 단면, 장애인편의시설 관련도면, 지장물도, 범례, 도면목록 등)
설계예산서		-	• 공사비 산정(공종별 세부 내역서, 물량산출 근거, 기타 필요한 산출근거)

조경분야

설계도서명		축 척	주 요 표 기 사 항
설계설명서		-	• 공사개요 : 목적, 공사금액, 주요사항 • 설계개요 : 부지면적, 조경면적, 시설별 주용도 등 필요사항 • 사전조사사항 : 관련법령 검토사항, 선진사례조사사항, 주요자재의 성능비교분석 및 선정사유 • 계획 및 방침 : 시설배치계획, 세부식재계획, 시설물간 동선계획, 계획결정 등 그 채택에 대한 타당성 설명 • 세부공정계획 및 자재사용계획 • 기타 필요한 사항
수목시설물 총괄표		-	• 시공에 필요한 일체의 사항
시방서		-	• 주요시방내역 - 일반시방서(일반사항, 공종별 일반사항) - 특별시방서(일반시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 내용을 명시)
실시설계도면	계획평면도	임의	• 녹지조성과 관련한 시공에 필요한 일체의 사항
	배식평면도	1/400이상	• 상기 배치도를 좀 더 구체적으로 표시
	배식상세도	1/100이상	• 단면도, 입면도, 식재상세도, 지주목 설치도
	녹지구적도	1/400이상	• 시공에 필요한 일체의 사항
	시설물배치도	1/400이상	• 시공에 필요한 일체의 시항
	조경시설물상세도	1/100이상	• 평면도, 입면도, 단면도, 부분상세도 등의 시공에 필요한 일체의 사항
	전기, 통신, 소방	임의	• 선로는 지하매설로 설계하고 가로등 등 시설물은 별도로 디자인한 개별 설계도서 작성
설계예산서		-	• 공사비 산정(공종별 세부 내역서, 수량산출 근거, 기타 필요한 산출근거)

성과품 목록

성과품의 종류 및 납품수량 기준

◦ 성과품은 아래 설계용역 성과품의 종류 및 납품수량 기준에 의거 모든 성과품을 별도 분리․작성하여 납품하여야 한다.

◦ 제출부수 및 표준성과품 종류는 담당감독원의 업무추진 상활에 따라 변동될 수 있다.

공통 성과품

설계분야	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	부 수
인허가도서	공원계획 변경 고시에 따른 각종 인허가 서류 등 문화재청 설계승인을 위한 서류 등 문화재청 현상변경에 관한 서류 등 각종 인․허가관련 필요한 도서서류 등	규격별 A4 규격으로 접은 청사진 ( 2부 )	요구량 (최소 12부)	엔니지어링주체 작성
조 감 도	조감도(액자) 조감도 사진(칼라사진) 원본제작파일	A1 17.5×11㎝ CD-ROM	1식	〃
보 고 서 및 기타	자문위원회 설명자료(도면포함) 종합성과(실시설계설명포함)보고서 기타 발주기관이 요구하는 자료 등	PPT자료 등 A4책철 규격별	15부 4부 1식	〃

실시설계 성과품

설계분야	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	부 수
토목,조경 설계	자문위원회 설명자료 구조 및 수리계산서(DISKETTE 포함) 공사시방서, 설계예산서(설계서, 수량 및 단가산출서 등) 설계도면(트레싱원도) 청사진(A1), 축소도면(A3) CD-ROM(CAD파일) 기타 토목설계 관련도서 등	PPT자료 A4책철 A4 A1 규격별	1식 5부 각 5부 1부 각 5부 1식 1식	A4 규격으로 접은 청사진 ( 각2부 )