박물관 조경관리용역 과업지시서

1. 과업명 : 경기도자박물관 박물관 조경관리용역

2. 과업기간 : 2010년 6월 - 2010년 12월(계약일로부터 180일간)

3. 과업대상 : 경기도자박물관 부지(179,980㎡)

가. 박물관 조성부지   : 119,709㎡

나. 임시주차장 및 관사:  60,271㎡

4. 과업의 범위

박물관내 배수로, 잔디, 조경수목 등의 관리대상별 종류, 특성, 생육시기,

환경 조건 등 을 고려하여 세심한 주의를 기하여, 최선의 방법과 최고의 기술을

제공하여 성실하고 책임있는 자세로 체계적인 관리를 하여야 한다.

1) 배수로 준설 및 청소 : 배수로내의 토사준설 및 낙엽 등 청소.

2) 잔디관리 : 잡초제거(뽑기), 잔디 및 풀깍기

3) 수목관리 : 관목 및 교목 전정

5. 공종별 규모 및 회수

공 종	규 모	회 수	비 고
1. 배수로 준설 및 청소	1,541.40m	2	6, 12월
2.. 잡초제거(뽑기)	8,907㎡	2	6～10월
3. 관목 전정	32,973주	1	6월
4. 잔디 및 풀깍기	30,549㎡	3	6～9월

※ 공종별 작업은 잔디 및 풀깍기→잡초제거→관목전정→배수로 준설 및

청소 순으로 한다.

6. 조경관리 세부사항

가. 배수로 준설 및 청소

1) 배수로내의 토사를 준설하여, 이 물질을 제거하고, 주변 잔디밭에 잔디          가 죽지 않도록 얇게 배토한다.

2) 배수로 및 잔디밭의 낙엽, 이물질(돌,쓰레기 등)을 수거하여 지정된

장소에 처리한다.

나. 잡초제거(잡초뽑기)

1) 식재지내의 수목하부, 화단에 번성하고 있는 잡초류, 잡목을 제거한다.

2) 인력을 사용하여 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거하여야 하며,            제거된 잡초는 식재지역 밖으로 반출처리 하여야 한다.

3) 잡초를 제거할 때 잔디위의 이물질(돌, 쓰레기, 낙엽 등)도 함께 수거

처리 하여야 한다.

다. 관목전정

1) 동력전정기를 사용하여 전정하고, 전정가위로 정리 및 마무리를 한다.

2) 전정은 수종별, 형상별, 기능별, 주위경관 등 필요에 따라 감독자와

협의한 후 견본전정을 먼저 실시한다.

라. 잔 디 및 풀깍기

1) 잔디깍기 높이는 5㎝ ± 2㎝범위 내에서 고른표면을 유지하여야 한다.

2) 공원내 식재된 관목류(개나리등)와 같이 예초기계로 깍기가 가능한

관목류에 대하여는 가지 전지작업을 하여야 한다.

3) 잔디깍기 작업 시행 전에 잔디면에 산재된 깍기작업에 방해가 되는             각종 이물질 등은 제거 또는 정리후 시행한다.

4) 잔디깍기는 잔디깍기 기계를 사용하여 작업을 할 수 있으나 잔디보호책,           수목주변등 기계사용이 불가능한 부분은 타기종으로 할수 있다.

5) 경사지 작업시에는 등고선의 방향으로 작업을 시행하여야 한다.

7. 기타관리

가. 작업중 발생할수 있는 안전사고를 예방하기 위한 안전교육을 실시

하고 작업복 및 안전장구를 철저히 갖춘 상태에서 작업을 실시하고             작업중 발생한 안전사고는 시공자가 책임진다.

나. 작업후 잔재물은 당일 처리하는 것을 원칙으로 하고, 시공자 책임하에

외부로 반출처리 하고 깨끗이 정리하여야 한다.

다. 작업기간은 공종별 매회 착수일로부터 10일 이내로 하며 작업시작은

감독관과 협의하여 시행한다

8. 관련서류 제출

가. 착수계

계약 후 시공자는 착수 전에 착수계에 현장책임자선임계, 안전관리자

선임계, 안전관리계획서,  공정별 작업계획서, 예정공정표를 감독관에게

제출하여 작업시행 승인을 받아야 한다.

나. 작업보고서

시공자는 매회 작업완료 마다 작업내용 및 작업량을 명시한 공종별 작업

보고서를 작성하고 작업 상황이 명료하게 나타나도록 촬영한 칼라사진을

첨부하여 감독원에게 제출하여야 하며 감독원의 공정별 작업완료 승인을

받아야 한다.

다. 완료계

계약 만료 후 완료계를 발주기관에 제출한다.

9. 기타사항

가. 과업지시서에 없는 내용이라도 과업 수행에 필요하다고 인정되는 부분에 있어서는 계약 쌍방이 협의하여 수행 할 수 있다.

나. 본 과업지시서에 기재되지 않은 사항은 일반조건을 따른다.

다. 과업시행 중 일어나는 모든 사고(안전사고, 기물파손 등)에 대해서는 계약상대자의 책임으로 한다.

붙  임 : 설계도서 1부.  끝.