목    차

1. 설    계    설    명    서

2. 공    사    시    방    서

3. 예    정    공    정    표

4. 설    계     예    산   서

1. 설   계   설   명   서

1. 설 계 설 명 서

가. 과업의 목적

현재 신축 공사중인 전곡선사박물관의 주진입도로인 국도3호선에 가감속차로를 설치하여 원활한 교통계획을 수립하고자 함 에있어폐기물처리 하는데 그 목적이 있다.

나. 과업명 및 공사위치

1) 과 업 명 : 전곡선사박물관 가속차로설치공사 폐기물 처리용역

2) 공사위치 : 연천군 전곡선사박물관 일원

다. 폐기물 처리개요

- 폐 콘크리트 :    1,679TON

- 폐 아 스 콘 :     302TON

- 혼합 폐기물 :     117TON

라. 공사기간

본 과업의 폐기물 처리에 대한 기간은 착공일로부터 처리대상물 처리완료시 까지로 한다.

마. 설계변경 조건

- 본 과업의 폐기물 처리는 다음과 같은 사항이 발생하였을때 변경할 수 있다.

ㆍ 설계당시 조사된 자료에 의거 설계하였는 바 조사 불가능한 부분 및 조사 후 추가 발생되는 등 현지여건이 변경되었을시

변경할 수 있다.

ㆍ 변경시에는 당해공사 시공사, 감리단(감독)의 확인을 받아 변경할 수 있다.

ㆍ 폐기물 처리장소, 운반거리 등의 변경이 있는 경우 감독관청의 승인을 받아 변경할 수 있다.

ㆍ 기타 시행청이 필요하다고 인정할 때 변경할 수 있다.

바. 공사의 설계적용 기준

- 폐기물 처리 단가 : 2011 폐기물 TON당 처리단가

- 자재 시세 : 2011년 3월호 가격정보 및 물가자료 참조

- 노임 및 품셈 : 2011년 상반기 노임 및 표준품셈 참조

2. 공   사   시   방   서

2. 공 사 시 방 서

가. 시방서 비치

- 본 과업은 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약 특수조건 등 계약문서에 의하여 시행하여야 한다.          ㆍ폐기물 관리법 규정

나. 도  면

- 본 계약공사의 설계도면은 수량산출도, 지장물도등으로 이루어져 있다.

다. 시공도면

- 수급인은 그 공사를 효과적으로 처리하기 위하여 착공 하기전에 시공사, 감리단(감독)에게 사업시행여부를 통보하여야 한다.

- 공사 감독자는 공사 착공에 앞서 수급인으로 하여금 공사추진에 대한 시공 상세내용의 제출을 요구할 수 있다.

라. 현장 대리인

- 현장 대리인은 공사 감독자의 사전승낙 없이 현장을 이탈할 수 없다.

마. 진도보고서

- 현장대리인은 현장에 투입한 인원, 장비 및 자재현황과 공사진척 사항을 매일 공사 감독자가 지정하는 양식에 의하여               보고 하여야 한다.

바. 특별 유의 사항

- 수급인은 본 폐기물로 인한 안전사고가 일어나지 않도록 제반 필요한 장비 및 안전장구를 항시비치, 착용하고 근무                하여야 한다.

- 수급인은 폐기물의 처리 지연으로 공정차질 등 시공사 및 발주기관에 지장을 주어서는 안된다.

- 위 내용으로 발생되는 모든 사항은 수급인이 전적으로 책임을 진다.

3. 예   정   공   정   표

3.예 정 공 정 표

구 분	보 할(%)	공 사 기 간						계
		5 일	10 일	15 일	20 일	25 일	30 일
건설폐기물처리	100	30	20	15	15	10	10
소 계	100	30	20	15	15	10	10	100
누 계		30	50	65	80	90	100

4. 설  계   예  산  서