전곡선사박물관 야외캠핑장 조성공사 용역

과업지시서

사업담당	학예팀	조민화	TEL:031-830-5617	FAX:031-830-5624
계약담당	행정지원팀	박영휘	TEL:031-830-5621

전곡선사박물관 야외캠핑장 조성공사 용역

1. 사업명 : 전곡선사박물관 야외캠핑장 조성공사 용역

2. 사업배경 및 필요성

○ 전곡선사박물관 캠프프로그램 운영에 맞추어 특성화된 교육 공간 조성

○ 사용자의 편의와 특성을 반영하여 학습자 중심의 환경 구축

○ 수준 높은 선사문화체험프로그램 운영을 위한 환경 조성

3. 과업기간 및 예산

○ 과업기간 : 계약일로부터 40일 이내

(시설물 설치 보강 및 유지보수 포함)

※ 과업기간을 변경하고자 할 경우에는 전곡선사박물관의 협의 및 승인을 받아야 함

4. 사업내용

가. 기본방향

○ 연출방향

- 야외조경의 전체적인 조화를 깨뜨리지 않으며 효과적 연출을 할 수 있는 방향으로 디자인

- 박물관의 성격 및 이용용도를 고려한 색 표현과 디자인

- 공간의 활용도, 편리성, 견고성, 실용성, 적합성, 심미성이 반영

○ 재료

- 공간 특성 및 사용자를 고려한 친환경적 마감재 사용

- 내구성이 강한 재료로서 영구적으로 보존될 수 있는 견고한 재질

- 외부에 노출되어 있으므로 하절기 또는 동절기의 온도와 강수, 강설의 요인에         의해 형태나 색채가 변화되지 않는 재료 선정

나. 과업내용

○ 범위

- 야외데크 및 캠핑 환경 조성

구 분	세 부 내 용
데크 조성	ㆍ3m×3m 크기 데크 10개 동 설치 ㆍ현재의 발굴체험장을 데크로 시공 14m×14m, 내부 4m×4m피트 4개 제외, 1m 너비 통로 시공 ㆍ발굴체험장 데크와 연결하여 5m×14m 데크 시공
전기시공	ㆍ야간 활동의 안정성을 위한 조명 설치 ㆍ사용자 편의를 위한 데크별 전기 시설 시공
물품창고제작	ㆍ캠핑용품 보관 창고 제작
환경조성	ㆍ취사 및 체험을 위한 황토 오븐 1기 제작 ㆍ선사시대 환경 조성을 위한 목재 및 석재 이용한 놀이시설 설치

○ 과업 수행 방법

• 야외 데크 조성

- 천연데크재(이페, 방킬라이, 말라스 등 실외용), 두께 20mm 이상

• 조명 설치

- 잔디등 12개 : 높이 1m이하, 스텐레스재, LED, 태양광(점등시간 충전시 10시간 이상)

밝기 8룩스 이상, 방수기능

- 정원등 4개 : 높이 1.8m 이상, 스텐레스재, LED, 밝기 25룩스 이상

• 전기시공

- 전기 배전반 12개 설치

• 물품창고 제작

- 3m × 6m × 2.5m 목재 창고 제작

- 내부 목재 선반 2개 설치

- 사냥터 보완 : 볏짚단 60개

• 환경조성

- 황토 오븐 1기 제작 : 석재 이용한 거치대 제작, 오븐 지름 1m이상, 지붕 제작

- 놀이시설 설치 : 통나무 징검다리 (나무 지름 30cm 이상, 8개 이상)

나무 울타리(높이 120cm, 너비 160cm)

놀이시설 바닥 우드칩 조성

- 기타 과업범위에 따른 환경 조성 관련 작업

○ 성과물 납품

- 결과보고서 (5부)

- 성과품 저장 CD (5부)

5. 일반사항

○ 과업수행자는 각 단계마다 전곡선사박물관 학예팀의 지시와 감독을 받으며, 시공 전 자재에 대한 검수를 받아야함.

○ 과업 진행 중 또는 완료 후 당초 지침에 위배 또는 불충분하다고 판단되거나, 전곡선사박물관의 사정에 의해 부분적인 변경 내용이 있을 경우 이의 수정 및 변경을 요구할 수 있으며, 과업수행자는 이를 보완하여 요청 기일 내에 제시하여야 함

○ 작업 완료 후 본 건 제작에 사용된 각종 자료를 전량 반환하여야 함

○ 그 외 별도로 정하지 않은 사항에 대하여는 상호협의를 우선으로 하며 최종적으로           전곡선사박물관의 지시에 따라야 함

○ 과업수행 결과보고서는 과업기간이 완료 된 후 10일 이내 제출하여야 하며,      발주처가 필요하다고 인정하여 요청한 사항은 신속이 보고하여야 함

- 보고서, 유인물 등은 발주처와 사전 협의를 거쳐 제작

6. 과업 수행 결과 제출물

○ 결과보고서 (5부/제본 제출)

- 시설 설비 및 설치물 제작 도면

- 전기 및 조명설치 상세도, 제어시스템 설비 구성도

- 내역서(평면, 입면, 상세도, 규격 및 재료 표기)

○ 결과물 저장 CD (5부)

- 도면 : PDF, DWG

- 내역서 원본 파일

(결과보고서 출력 본에 사용된 원본 파일)