경기도어린이박물관

대형 신체놀이 구조물 설계 및 제작·설치

용역 제안 요청서

2012. 4

경기문화재단

Ⅰ. 제안개요

1. 과업 명칭 :『경기도어린이박물관 대형 신체놀이 구조물 설계 및 제작·설치 용역』

2. 과업 목적

가. 경기도어린이박물관을 대표할 수 있는 랜드마크 전시를 개발하여 어린이박물관의 정체성을 강화하며, 아이캐칭 전시물로 공간적 규모 장악

나. 경기도어린이박물관 건물 구조적인 특징을 활용한 대규모의 전시물로, 어린이들에게는 대근육활동 공간 제공

3. 과업개요

가. 과업내용

- 위치 : 1층 ‘튼튼놀이터’

- 내용 : 대형 신체놀이 구조물(Climbing Structure) 설계 및 제작·설치

나. 과업범위

- 공간적 범위

․지상 1층 : ‘튼튼놀이터’ 내 면적 8m×8m, 높이 12m 내외

(8m×8m×12m 내외를 기본형으로 하되 추가제안 가능함)

- 내용적 범위

․대형 신체놀이 구조물 설계 및 제작·설치

(전시물 제작설치에 요구되는 각종 진단 및 점검 사항 포함)

․전시물 설치에 따른 기존 전시물 이동, 철거 및 주변 시설(벽채, 바닥) 보완

․조명 계획 및 시공

․관련 사인물 디자인 및 제작․설치

․전시물 관리운영계획 수립

․기타 경기도어린이박물관에서 필요하다고 요구하는 사항 등

※ 기설치 전시물 이동 및 주변시설물, 전시실 보양작업 포함

4. 과업기간 :

- 계약일로 부터 6월 30일까지

※ 단, 정책적 변경, 불가항력 등의 사유가 있을 시 시행 처와 협의하여 조정할 수 있음

5. 사업예산 : 400,000,000원 이내(부가가치세 포함)

6. 사업추진일정(예정공정표)

추 진 공 정		2012년
		4월		5월		6월
업체선정 및 계약		공고 및 계약체결
전시 제작 설치	착수보고		착수보고
	구조물 제작		설계, 구조진단, 안전진단, 공장제작
	구조물 설치						전시물설치

※ 현재 어린이박물관 휴관 일정이 없으므로, 전시물 설치 시, 해당 전시실 부분 폐관함. 부분 폐관일은 최대 2주 이하임

(필요 시, 야간작업으로 진행)

7. 입찰방식

가. 계약방법

제안서를 제출받아 종합평가하여 선정된 업체와 협상에 의한 계약

(지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 행정안전부예규405호. 2012.3.22)

나. 입찰추진일정

- 입찰공고 : 2012.04.02 ~ 2012.04.16

- 제안서제출 : 2012.04.16(10:00~16:00) 경기도어린이박물관 2층 행정지원팀

- 제안서심사 : 제안서제출 마감 후 3일 이내

- 협상대상자 선정 및 계약체결 : 제안서심사 후 5일 이내

8. 참가자격

가. 참가자격

※ 아래 각 항의 자격을 모두 갖춘 자

1) 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조(경쟁입찰의 참가자

격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가 자격여건의 증명)의 참가 자격을 갖춘

업체이어야 합니다.

2) 입찰마감일 전일까지 산업디자인진흥법 제9조 규정에 의거 산업디자

인 전문회사 환경디자인분야(업종코드 4442) 또는 종합디자인분야(업

종코드 4444 ,단 3개이상의 분야중 환경디자인분야 포함)로 입찰참가

자격을 등록한 자

3) 입찰마감일 전일까지 건설산업기본법에 의한 조경시설물설치공사업

(업종코드 0049)으로 입찰참가 등록한 자

※ 필요시 공동수급(공동이행방식 또는 분담이행방식 중 택 1)이 가능하며,

공동이행인 경우 출자비중이 가장 큰 자를 대표자로 선임하고 분담이행일

경우는 자격 가,나,다를 모두 갖춘자를 대표자로 선임하여야 합니다. 공동수급

체 구성원은 대표사를 포함 2인이하로 구성하여야 하며, 중복 결성하여 참여

할 수 없습니다.

II. 과업 내용 및 지침

1. 기본방향

가. 어린이박물관 건축물 구조적 특성을 충실히 반영하고(자연채광, 층고), 정체성이 두드러지도록 독창적인 디자인을 추구한다.

나. 어린이의 안전을 최우선적으로 여기고, 어린이놀이시설안전관리법 등 어린이시설 안전기준을 준수하며, 기존 건축물 및 전시물의 구조 진단을 통해, 안전성을 확보하여야 한다.

다. Climbing Structure의 다각적인 접근을 통해 어린이 연령 별(유아 코스, 초등학생 어린이 코스) 체험이 가능하도록 한다.

라. 기 설치되어 있는 2층 연결다리와 연결되도록 출구 통로를 만들어 1층에서 2층으로 연결되도록 한다.

마. 어린이체험물로써 내구성 및 완성도를 높이고, 유지관리에 용이하도록 제작한다.

바. 성인 관리자가 Climbing Structure 내부에 진입할 수 있는 경로를 두어 안전사고에 대비한다.

2. 기본지침

가. 경기도어린이박물관 대형 신체놀이 구조물 설계 및 제작・설치 용역을 수행하기 위하여 제시된 기본방향 및 경기도어린이박물관의 대주제, 미션, 전시주제, MI(튼튼이) 등을 충분히 숙지한 후 설계 및 제작・설치에 임해야 한다.

나. 건축물의 구조 실측을 통해 진단하여 건축물 및 구조물의 구조적 안전성 및 어린이들의 행동(돌발행동 포함)을 고려하여 설계하여야 한다. (단위하중 300kg/m²으로 설계된 장소임, 구조 진단 증빙서류 제출 필수, 전시물 사용 동시인원 어린이 50명의 하중 고려)

다. 어린이놀이시설안전관리법 등 어린이시설에 적용되는 기준법에 의거하여 설계시 반영하고, 설계와 제작 후 전문기관의 안전점검을 총 2회 이상 필수적으로 실시하여 그 결과를 반영, 보완하여야 한다.

라. 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준과 연계 검토한 후 발주처와 협의하여 수행해야 한다.

마. 전시설계 및 전시물 제작, 설치, 구매의 전 과정은 발주처에서 지정한 감독관과 협의하여 진행하여야 하며, 책임감독관의 최종 승인을 얻어야 한다.

바. 전시물의 파손 시, 대체할 수 있는 잉여품 20% 제작을 포함한다. 또한 하자 기간 내 전시물의 문제 발생 시 48시간 이내 보완하는 것을 원칙으로 한다.

사. 본 과업과 관련된 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기 시설, 전시물과의 긴밀한 협조 체제를 유지하여 사업의 일관성을 확보해야 한다.

아. 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주처는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

자. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주처의 해석에 따른다.

3. 참고사례

보스톤어린이박물관(New Balance Climb) - 3층 높이의 오르기 구조물 - 마법의 양탄자 컨셉의 판 연결 구조 - 성인 관리자 Access 공간	포트디스커버리 어린이박물관(Kids Work) - 1층부터 3층에 걸쳐있는 대형 오르기 구조물 - 그물망을 통하여 각 층으로 이동할 수 있음
롱아일랜드어린이박물관(Climb It) - 오르기 구조물로 1층에서 2층으로 연결 - 연령 별 입구, 코스가 다름	피닉스어린이박물관(The Schuff-Perini Climber) - 기괴하지만 재미요소의 장식물을 함께 배치 - 높은 곳에 올라가서 아래를 내려다보는 view

4. 세부지침

가. 공통사항

1) 경기도어린이박물관 운영에 대한 방향과 비전을 제시하고 당위성과 의지를 효율적으로 구현하여야 한다.

2) 본 과업수행에 참여하는 기술진은 관련분야에 학식과 경험이 풍부한 사람으로 구성되어야 한다. 또한 발주처가 과업의 원활한 진행을 위해 기술진의 추가 및 파견을 요청할 경우 이에 따라야 한다.

3) 발주처는 수급인, 기타 고용인이 과업수행에 부적당하다고 판단될 때에는 교체를 요구할 수 있으며, 성공적인 과업 수행을 위하여 수급처는 이에 협조해야 한다.

4) 각 단계별 과업수행 중 발주처가 제공한 자료 이외에 관련기관 연구자료 및 홍보 자료 등을 충분히 조사 수집 이용하여야 하며, 관련내용의 이용에 대해서는 발주자와 협의하여야 한다.

5) 본 과업수행 중 관계기관 협의 또는 인허가 사항 등 불가피한 사유 및 발주처의 사정으로 과업내용의 변경이 필요한 경우 수급인과 협의하여 변경할 수 있으며, 본 지침에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적 달성을 위해 보다 효과적인 것으로 인정되는 중요사항에 대해서는 발주처와 협의하여 결정할 수 있다. 또한, 발주처가 과업내용이 미흡하여 보완이 필요하거나, 추가과업을 지시하는 경우 특별한 사유가 없는 한 발주처의 지시를 따라야 한다. 특히, 어린이안전과 관련된 요구사항은 발주처 및 관련기관의 기준에 적합하도록 수행되어야 한다.

6) 본 과업을 수행함에 있어 대표 수급처가 직접 총괄․시행하고, 원칙적으로 하도급은 불가한 것으로 한다. 단, 특수한 부문에 해당되어 불가피하게 하도급이 필요할 시 발주처의 요청 또는 승인을 거쳐 시행할 수 있다.

7) 용역과정에서 발생되는 모든 산출물 및 성과품(원본 자료 제출)에 대한 저작권은 발주처에 있으며, 용역시행중이나 용역 완료 후라도 하자가 발생하는 경우, 이를 지체 없이 보완하여야 한다.(하자보증기간: 과업 완료 후 2년)

나. 과업 내용별 세부사항

1) 전시설계 및 제작·설치

① 제시된 전시기본계획에 준하여 설계하되 경기도어린이박물관의 특징을 살리고, 전시물 제작․설치의 효율성, 경제성, 디자인의 독창성 등을 고려하여 전시효과를 극대화 할 수 있도록 하여야 한다.

② 모든 전시내용 및 전시물은 주요 대상 연령층과 연령대별 교육적 효과 및 기타 기대 효과를 사전에 예측하고, 전시물 제작 시 아동 발달 분야 전문가의 자문을 받도록 한다.

③ 설계설명서, 설계도서, 내역서, 현장 일체는 관련 제반법령에 적합하게 작성되어야 한다. 또한 현장 불일치 사항의 도서내용은 납품 후라도 재수정하여 납품하여야 하며, 정확한 내용은 수급인이 납품 시 보증해야 한다.

④ 설치되는 전시시설물에 대한 각종 상세도, 설명서, 시방서 등 전시물 제작 및 공간연출에 필요한 도서 및 운영에 대한 매뉴얼을 세부적으로 작성해야 한다. 인수인계 시 운영자가 이해하기 쉽도록 사진, 번호 등을 기재하여 작성하며, 필요 시 수정보완에 응해야 한다.

⑤ 유사한 내용의 전시물이 설치된 국내외 사례를 충분히 조사하고 참조하여, 디자인과 기능에 있어 최고 등급의 전시물이 제작되도록 추진해야 한다.

⑥ 모든 전시시설 및 각종 전시 장치는 관람객의 무한 반복조작에 의한 파손 및 기능저하가 없도록 설계되어야 한다. 주관람객이 어린이라는 점을 유념하고 전시물 내구성 및 안전성에 중점을 둬야 한다. 또한 건축물의 구조진단를 통해 건축물에 무리가 가지 않도록 설계되어야 한다.

⑦ 전시시설 및 전시물은 추후 교체가 가능하게 호환성 있는 소재 등을 사용하도록 설계하여야 한다.

⑧ 자연스런 관람동선을 유도하여 주제의 단절이나 전시목적이 분산되지 않도록 전시시설을 배치하여야 한다.

⑨ 전시시설, 전시기기 등 모든 장비의 반출입이 용이하도록 설계한다.

⑩ 전시시설 부문의 하자발생 등의 사유로 불편 및 민원이 초래되지 않도록 수급자는 전시시설물의 제작․설치 업무를 성실히 수행해야 한다.

2) 시설 및 인테리어

① 현장에서의 작업은 반드시 필요한 경우를 제외하고는 최소화한다. (최대 2주 이내) 또한 박물관 폐관없이 제작/설치해야 하므로, 관람객의 불편함을 최소화하고 주변 전시물에 피해되지 않도록 철저한 보양작업 후 설치한다.

② 기 설치되어 있던 전시물의 철거가 불가피 할 시, 발주처와 사전에 충분히 논의한 후 과업에 임한다. 이에 따른 바닥 공사 등도 과업에 포함되며, 시설 공사 작업 시 기 전시물, 전시공간과의 조화를 추구한다.

③ 공간디자인은 수급자가 제시한 장치등급 중 최고 등급인 Aa 등급으로 제작되어야 하며, 수급인은 타 업체가 수행한 동급디자인을 비교 제시하여야 한다. 전시 모형은 실물과 동일한 규격, 형상, 질감으로 정밀하고 견고하게 제작되어야 하며, 발주처의 승인을 받은 시공도면에 의해 제작되어야 한다. 발주처에서 자재 샘플 요구 시, 빠른 시일 내 샘플을 제시하여 발주처의 의견이 반영될 수 있도록 조치해야 한다.

③ 발주자는 설계된 공간디자인이 타 업체가 수행한 동급디자인에 비해 질과 내용면에서 미흡하다고 판단되면 재설계를 지시할 수 있으며, 이 경우 수급인은 발주자에게 재설계물을 제시하여 선정된(안)으로 전시시설 제작․설치를 시행하여야 한다. 이에 소요되는 경비와 계약에 따른 지체상환금 등은 수급자 부담으로 한다.

④ 별도 시행중인 건축 공사의 시공사 등과 긴밀히 협의하여 동시작업 진행시 상호 간섭 혹은 중복공사가 발생되지 않도록 하고 보행동선을 원활히 확보하여야 한다. 아울러 전체 전시공간의 색채, 구성 등이 전체적으로 조화를 이룰 수 있도록 전시설계를 진행하여야 한다.

⑤ 모든 시설은 어린이가 이용하기에 안전하고 불편이 없도록 동선 및 시설규모, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립․반영하고 이와 관련한 법규를 준수하여야 한다.

⑥ 주요 마감재는 KS 규격품으로 하고, 어린이 시설임을 감안하여 소방, 방재, 안전시설에 대한 설비를 엄격히 계획하고 관련법규를 준수하여 설계․제작 설치되어야 한다. 또한 자재 선정 시 친환경 자재, 무해성분 자재를 우선 선정하도록 한다.

3) 전시 사인물

① 통일된 시각 전달 체계를 확립하고 이에 준하여 모든 사인물을 설치하여 전시장 이용의 편리성과 이해력을 증진시키도록 한다.

② 전시물의 패널은 주제 전시물에 대한 흥미를 고취시키고 어린이의 눈높이에 맞도록 가급적 쉬운 용어를 사용하여 작성해야 하며, 텍스트 내용과 양, 글자체와 크기 등을 세심하게 디자인하고, 모든 사인물의 문안은 관련 분야 전문가의 자문과 발주처의 승인을 받은 후 제작하도록 한다.

③ 전시물의 패널은 국문, 영문 2개 국어를 기본으로 하되, 영문은 전문 번역가에 의해서 행해져야 하며, 원어민 검수가 필요하다. 영문 삽입이 적절치 않을 경우, 발주처와 협의하여 조절할 수 있다.

4) 설비(조명) 및 기계장치

① 중앙컨트롤과 메인 서버 개념을 도입하여, 데이터, 전원 등의 원격제어 및 모니터링이 가능하도록 구현하며, 타 정보시스템과의 상호운용성이 확보될 수 있도록 해야 한다.

② 전시 조명은 전시장 분위기 연출을 위하여 적절한 기구, 조도, 조명률을 고려한 조명 계획을 수립하여야 하며, 기능 유지에 적합하고 컨트롤이 용이하도록 설계해야 한다.

③ 전시물의 음향은 다른 전시물의 관람에 영향을 주지 않도록 설치장소 및 지향각도, 음량 등을 고려하여 설계한다.

5) 관리운영계획 수립

① 운영전반에 관하여 취지 및 목적에 부합되는 조직적, 체계적인 운영 계획을 수립하여야 한다.

② 관람자 위주의 쾌적하고 안전하며 청결한 관람분위기를 조성하고, 친절한 서비스 체계를 구축하여 효율적인 운영이 이루어지도록 계획하여야 한다.

③ 전시물 운영 중, 전시물의 문제 발생 시 신속한 대처를 할 수 있는 구체적인 방안을 마련한다.

④ 안전성 확보를 위해 방재체제, 재해예방 및 긴급대피 대책, 청결성 확보를 위한 청소대책, 관람객 질서 유지대책, 장애자 및 노약자 관람편의 계획, 긴급환자 발생에 대비한 의료체계, 귀빈대응계획 등 기타 필요한 부분에 관한 세부시행계획을 수립하여야 한다.

⑤ 관리운영 전반에 대하여 체계적인 계획을 수립하여야 하며, 관련법령 및 지침에 위배되지 않도록 하고, 관리운영 실무집행에 대한 역할과 업무범위에 관한 사항을 제시하되 ‘관리운영지침서’는 누구나 쉽게 관리, 조작할 수 있도록 일목요연하게 작성하여야 한다.

5. 사업수행조건

가. 발주처는 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

나. 발주처는 품질 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 발주기관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

다. 발주처는 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 해당 전문가에게 자문을 받도록 수급인에게 요구할 수 있으며, 자문에 대한 소요 비용은 수급인이 지불하고, 자문에서 제시된 의견에 대해서는 발주처와 협의한 후 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서로 제출하여야 한다.

라. 발주처의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

마. 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

바. 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 발주처가 요구할 시 수급인은 협의할 내용 및 자료 등에 대하여는 발주처의 사전 승인을 받은 후 관계기관과 직접 업무협의를 하고 결과를 발주처에 보고하여야 한다.

사. 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하고, 법령 등에 의한 인․허가 업무를 성실히 수행하여야 하며 이와 관련 법령 등의 저촉 또는 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

아. 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술자 또는 참여하고 있는 건설기술자가 과업 수행에 불성실하거나 부적당하다고 발주처가 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

자. 수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안 관계 법규에 의한 보안 관리에 최선을 다해야 하며, 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

차. 수급인은 경기도어린이박물관 운영 및 이에 부속되는 일체의 설비를 용역 완료 7일 전까지 설치 완료하여 최종보고회(시운전)를 개최하여 지적사항을 보완하는 등 개관일정에 지장이 없도록 하여야 하며, 설치지연 등으로 발생한 손해 및 제반문제에 대한 모든 책임은 수급인이 진다.

카. 착수 신고서 제출

수급인은 과업을 착수한 즉시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 과업수행계획서

3) 참여자 이력서 및 기술자격증 사본

4) 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

5) 예정공정표

6) 보안각서 및 보안대책

7) 설계실명제 준수 각서

8) 기타 발주자가 요구하는 사항

타. 과업수행 보고

1) 착수보고

- 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역착수 후 [7]일 이내에 착수보고를 해야 한다.

- 착수보고는 사업책임자가 직접 보고하되 설계계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

2) 중간보고 (주간보고, 수시보고, 필요 시 일일보고)

수급인은 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 진도보고를 주 1회 발주처에 서면으로 보고하여야 한다.

- 과업추진내용 및 공정현황

- 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황

- 다음 주 과업수행계획

또한 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 분야별 담당자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

- 각 일정 진행단계별 의사결정이 필요한 사항

- 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

- 주요회의 후 회의록 작성(회의 후 3일 내 제출)

- 기타 발주자가 용역수행 상 필요하여 요구할 시

3) 최종보고

수급인은 용역 완료 [7]일 전까지 발주자에게 용역 수행 사항에 대하여 최종 보고하여야 한다.

- 경기도어린이박물관 특성화전시 제작, 설치 완료사항

- 시운전 및 Test 종합시험 등 사전준비

6. 성과물 납품 목록

가. 종결보고서(A3) : 5부

나. 설계설명서(A3) : 5부

다. 설계도면(A3) : 각 5부

라. 표준시방서 : 5부

마. 특기시방서 : 5부

바. 내역서 : 5부

(원가계산서, 일위대가표, 견적서, 단가적용조사서 등 포함)

사. 관리운영계획서 : 5부

아. 성과품 내용이 담긴 CD : 3점 (전 공정 포함)

- 도면의 경우, CAD 및 PDF 형식으로 제출

- 사인물의 경우, 이미지 파일 및 일러스트 파일 형식으로 제출

자. 기타 발주처가 요구하는 자료

III. 제안절차 및 방법

1.  교부 및 등록

가. 기   간

○ 교 부 : 입찰공고서 참조

○ 등 록 : 입찰공고서 참조

나. 장   소 : 입찰공고서 참조

다. 제안신청 서류

○ 제안신청서 : 1부 (소정양식 별지 제1호)

○ 제안서 : 12부

○ 사업자 등록증 사본 : 1부

○ 건설산업기본법에 의한 조경시설물설치공사업의 등록증 사본 : 1부

○ 인감증명원 및 사용인감계 : 각 1부

○ 회사소개서(실적증명 포함) : 1부

○ 서약서 : 1부 (소정양식 별지 제2호)

라. 교부 및 등록방법

○ 제안요청서(응모신청서) 교부 : 조달청 홈페이지에서 다운로드

○ 등록방법

- 업체에서 지참 접수함

- 등록접수 후 기제출 서류 또는 기타사항에 대하여 결격사유 발생 시, 응모자격 박탈과 아울러 당선이 되어도 무효 처리됨

2. 질의 및 회신

가. 질의기간 : 2012.04.12까지

나. 회신기간 : 공고기간내

다. 질 의 처 : 과업내용 -  학  예  팀 사업담당자(T. 031-270-8628)

계약관련 -  행정지원팀 계약담당자(T. 031-270-8615)

라. 질의방법

○ 본 제안요청서에 의문이 있는 업체는 반드시 서면으로 질의(소정양식 별지 제3호) 하여야 한다.

○ 기간 내 접수된 질의서에 한하여 제안신청업체에게 서면으로 회신한다.

○ 제안사별 1회에 한하여 질의할 수 있다.

○ 질의 답변서는 제안요청 지침의 추가 또는 정정된 것으로 한다.

○ 팩스로 질의할 때에는 접수사실을 담당자에게 구두로 확인하여야 한다.

3. 제안서의 제출

가. 제안서 제출

○ 제출기한 : 입찰공고서 참조

○ 제 출 처 : 입찰공고서 참조

○ 제출방법

- 제안서는 마감시간 전까지 인편으로 1회에 제출하여야 한다.

- 각 제안자는 1개의 제안서만을 제출할 수 있다.

- 제안서 접수 후 작품을 수정, 보완, 변경할 수 없다.

- 제안서 및 도서에는 회사를 인식할 수 있는 어떠한 표시도 할 수

없다.

- 제안신청을 하지 아니한 사업체의 제안서는 접수하지 않는다.

- 제안서와 함께 신청자 고유번호를 표기한 도면 1식, 제안설명서 1부를 제출하고, 나머지 서류는 겉 포장지에 응모자 고유번호 (도판 상단에 기재한 번호와 동일), 회사명, 응모자명을 기재한 서류를 봉인한 다음 따로 제출한다. (접수처에서 제출도서와 수량 확인)

- 고유번호

◦ 고유번호는 “가나다라…하”중 하나와 아라비아 3자리 숫자를 합하여 기재한다. (기타 서류에는 고유번호나 어떤 표시도 기재하지 않는다.)

◦ 고유번호는 좌측상단(도면은 첫 번째 쪽)에 아래 예시와 같이 표기한다.

(예시)

										15
	가		―		3	6	9			30
15	30	8	14	8

◦ 고유번호는 한변이 3cm인 정사각형 4개를 위와 같이 구성하고 그 안에 표기한다.

◦ 제안자가 정한 고유번호는 발주기관에서 부여한 심사번호로 대체되며, 고유번호는 심사를 마칠 때까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

◦ 고유번호가 같을 경우에 발주자는 새로운 번호를 부여할 수 있다.

나. 제출목록

○ 도면(A3. 가로 좌철) : 2식(20매 이내)

○ 제안설명서(A4. 세로 상철) : 12부, CD 1부

○ 1/15 축척 모형, 실제 원재료 40×40cm(실제 제작 판 두께)

○ 사업수행능력 평가자료

○ 평가용 PPT 설명자료

○ 가격입찰서 1부(붙임 서식 별지 8호)

4. 제안서의 평가

가. 제안 설명회

○ 일시 및 장소 : 별도 지정 (제안서 제출자에 한하여 별도 통보)

○ 설명방법 : 평가용 PPT자료를 통한 제안사 대표자 또는 대리인의 직접 발표

○ 발표순서 : 평가 당일 추첨으로 결정

○ 기타사항

- 제안사 관계임원, 프로젝트 총괄책임자를 포함하여 4인 이내 참석 제한

- 제안설명회 PT자료는 제안사 별도 준비

- 타 제안사의 발표를 청취할 수 없으며, 제안서 질의응답은 10분 이내

※ 심사는 발주처의 상황에 따라 PT없이 제안서만 평가할 수 있음, 이 경

우 제안서 제출자에 별도 통보함.

나. 제안서 심사

○ 심 사 일 : 제안서 접수 후 3일 이내

○ 심사위원회 구성 : 각계 관련	분야 전문가 10인 이내 구성

○ 평가기준 및 방법 : 제안요청서 참조

○ 심사위원회 공개 : 심사위원 명단 비공개, 총점만 공개함.

○ 협상적격자 선정 : 최고득점순 (단, 70점 이상 획득한 업체)

○ 기타사항

- 심사위원별 평가결과는 공개하지 않는다.

- 심사위원회의 구성과 심사평가 전반에 관한 사항에 대하여는 어떠한 경우라도 이의를 제기할 수 없다.

다. 제안서 실격

○ 제안신청서에 허위사실을 기재한 경우

○ 기록할 사항 이외의 특정기호 등을 표시한 제안서

○ 규정된 제출서식 이외에 다른 문자나 서류를 첨부한 제안서

○ 심사에 불공정한 행위를 할 때

○ 그 밖에 심사위원회가 실격으로 판정한 제안서

5. 협상적격자 발표

가. 협상적격자 발표 : 심사결과 후 개별통보

나. 협상적격자에 대한 조건

○ 협상적격자의 사정으로 본 과업을 수행하지 못할 경우 발주자는 고득점자에게 순차적으로 협상권한을 부여할 수 있다.

○ 협상적격자는 발주자의 계획 수정 및 변경요구가 있을 경우 이를 수용하여야 한다.

6. 저작권 및 사용권

가. 협상적격자에 대한 저작권 및 사용권, 법적 소유권은 발주처에 귀속한다.

나. 협상에 의한 계약 발주자는 선정된 협상적격자의 제안서 수정, 보완 및 변경 등에 관한 일체의 권한을 가진다.

7. 분쟁조정

가. 본 협상제안 지침과 관련하여 이의 또는 견해를 달리하는 경우 발주처의 해석에 따른다.

8. 계약체결

가. 계약에 관한 사항은 □지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률□과 □지방자치단체 협상에 의한 계약체결기준□에 의한다.

나. 협상적격자는 발주처가 별도 지정한 기한 내에(발표일로부터 10일 이내) 설계 등의 계약을 체결하여야 하며, 계약을 체결하지 않을 경우 협상적격자의 권리를 포기한 것으로 간주한다.

다. 설계참여자는 전문분야별로 직접 참여하여 과업을 수행할 의무를 가진다.

라. 설계 완료 이후 제출된 사업비중 과잉 설계부분과 설계 부실부분은 수정․보완하고, 재정경제부 장관이 고시한 □정부회계원가계산용역기관□에 원가계산을 의뢰한 후 보완사항이 발생할 시 발주처의 요구에 따라야 한다.

9. 특기사항

가. 본 제안요청서에 제시된 사항을 위반할 경우 또는 허위, 부정한 방법으로 제안한 사실이 확인될 경우 제안자 자격을 박탈할 수 있다.

나. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 사업체가 발행하는 서류로 제출하여야 한다.

다. 본 사업은 주최자의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우 제안신청자는 발주처의 지시에 따라야 한다.

라. 제안신청에 소요되는 모든 경비는 제안신청자의 부담으로 한다.

마. 본 제안요청에는 발주처가 제시한 총사업비를 초과하여 설계할 수 없다.

IV. 제안서 제출도서 및 작성지침

1. 제공 자료

가.  제안요청서 : 1부 (다운로드 사용)

나.  “튼튼놀이터” 기전시도면 : 1부 (다운로드 사용)

다.  “튼튼놀이터” 갤러리 건축 도면

웹하드주소 : http://ghard.or.kr (id:최미선, pw:2012)

2. 제출목록의 종류와 수량

가. 신청서 1부

나. 도면(A3. 가로 좌철) : 2식(20매 이내)

다. 제안설명서(A4. 세로 상철) : 12부, CD 1부(추정공사비 산정내역, 설계도면 포함)

라. 1/15 축척 모형, 실제 원재료 40×40cm(실제 제작 판 두께)

마. 사업수행능력 평가자료

바. 평가용 PPT 설명자료

사. 가격입찰서 1부(붙임 서식 별지 8호)

3. 제출도서 작성 기본지침

가. 축적과 방위는 각 도면에 정확히 표현한다. (축척 임의 결정)

나. 주요 내부 실의 명칭은 해당 실에 직접 기재한다.

다. 도서에 사용하는 문자는 한글과 아라비아 숫자를 사용하고, 단위는 미터법을 사용한다.

라. 외래어와 한자를 사용할 경우에는 한글과 병행하고 ( )속에 한자 또는 영문을 표기한다.

마. 설계도서는 장변이 수평이 되도록 한다.

바. 도서, 제안서에 사용되는 서체는 고딕체·명조체 2가지 서체로 작성한다.

4. 제안도서 작성요령

가. 제안 설명서

○ 작성방법

가) 규    격 : A4 (210mm×297mm)

나) 제출부수 : 12부

다) 표지 규격 및 지질

① 표지는 백색 아트지를 사용하며, 내용은 백색 A4복사 용지를 사용한다.

② 표지규격 : 별지 10호 참조

③ 쪽수표기 : 표지 다음부터 중앙하단 “-1-”과 같이 표기한다.

④ 글씨의 크기 : 기본사양(아래한글 기준) “12”포인트로 하되 제목 등 중요단락은 임의 결정한다.

⑤ 내용편철 및 작성

- 내용편철 : 내용은 가로쓰기, 제본은 무선 상철하고, 설계도면은 A4용지에 맞게 임의 축척하여 합철 한다.

- 설계도면 : 백색A3 규격에 임의축적 사용하되 20매 이내로 제한한다. 기본계획도(배치도), 평면도, 공간별 세부연출계획도, 기타 주요시설 계획도

○ 제안서 작성 주요내용

* 제안서 평가항목을 참고하여 작성

V. 제안서 평가방법 및 기준

1. 제안서 평가 및 사업자 선정

가. 제안서는 지방자치단체 협상에 의한 계약체결기준 (지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 행정안전부예규 405호. 2012.03.22)에 의거 기술능력(80%)과 입찰가격(20%)을 종합적으로 평가

나. 제안서 평가결과 기술능력 및 입찰가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

다. 협상순서는 합산점수의 고득점순에 의하여 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

라. 기술평가는 발주처가 정한 소정의 평가기준에 의해 ‘기술제안서 평가위원회’에서 평가한다.

마. 기술제안서 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않는다.

바. 제안서에 기재된 내용 이외의 자료는 평가대상에서 제외한다.

사. 제안업체가 2개 업체 미만일 경우 유찰로 판정한다.

아. 제안서 평가관련 유의사항

○ 평가결과에 대해 제안업체는 이의를 제기할 수 없다.

○ 제안 내용은 꼭 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성되어야 하며, 내용 중 "~할 수도 있다", "~을 고려하고 있다" 등의 애매모호한 표현은 구축할 수 없는 것으로 간주한다.

○ 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 제안을 무효로 한다.

2. 제안서 평가기준 및 배점표

[평가 개요]

❍ 제안요청서상의 제안항목을 중심으로 평가항목을 편성하고, 특히 전시계획이 전시연출구성에 적합토록 구성되었는지를 우선적으로 평가

❍ 항목별 배점은 전체사업에서 차지하는 중요도에 따라 배점을 안배

[평가 방법]

❍ 제출기한 내 접수된 제안서는 발주처가 정한 소정의 평가기준에 의하여 평가함을 원칙으로 한다.

❍ 사업수행능력 평가 시 공동수급일 경우에는 수급비율에 따라 평가. 단, 분담이행업체는 평가에서 제외

□ 평가항목 및 배점

구 분	평가 항목		평가 요소		배점	비 고
객관적 지 표 (20점)	사업수행능력 (20점)		① 사업이행실적	가.최대실적(최근3년 기준) 나.누계실적(최근3년 기준)	6
			② 기술능력 ( 8 )	가. 전문인력	4
				나. 전문기술	4
			③ 경영 상태 ( 신용평가등급 )		5
			④ 신인도		1
			계		20
주관적 기술능력 평가 (60점)	기획능력		- 기획목표 및 사업내용의 이해도 - 전시컨셉 설정 및 스토리라인의 창의성 및 독창성 - 실행전략의 타당성 및 신뢰성		15
	사업 수행 계획	전시공간구성	- 공간계획의 독창성 및 효율성 - 공간연출의 다양성, 흥미성		10
		전시계획	- 연출기법의 독창성 - 구조물의 안전성 - 디자인의 우수성 - 아동 발달에의 적합성 - 재질 및 매체의 적정성 - 운영 및 유지관리의 용이성		20
	기술지원.사후관리 상호 협력관계		- 관리 및 운영계획의 효율성 - 비상시 대응방안의 적정성 - 사후관리방안의 경제성 - 소방,기계,전기 보안설비 등의 상호 적합성		15
			계		60
가격평가 (20점)	입찰가격				20	20
총합계					100	100

□ 사업수행능력 평가지표(객관적 지표 20점)

사업수행능력 평가

※ 공동계약일 경우 평가는 대표사만 평가

1. 사업수행능력 평가지표(객관적 지표) : 20점

구 분	평가항목	배점	비고
① 수행실적	▪최근 3년간 유사사업 제작․설치실적	6
② 기술능력	▪보유 기술인력 평가 및 전문기술 평가	8
③ 경영상태	▪기업신용평가등급	5
④ 신인도	▪행정처분내용 -입찰참가 제한 또는 영업정지	1

2. 사업수행능력 평가기준

가. 사업 수행 실적 : 6점

•최대실적(최근 3년간 기준, 부가세 포함)

구 분	4억원이상	3억원이상	2억원이상	1억원 미만	비 고
점 수	3	2	1.5	1

•누적실적(최근 3년간 기준, 부가세 포함)

평가요소	12억원이상	9억원이상	6억원이상	3억원 미만	비 고
점 수	3	2	1.5	1

※ 입찰일 단일건 2억원 이상 실적만 합산평가

※ 유사실적 인정범위

- 국가‧지방자치단체 또는 공공기관 및 민간에서 발주하여 아래의 장소에 제작 설치된 놀이시설

- 시설 : ○○박물관, ○○과학관, ○○테마파크, ○○놀이공원, ○○놀이시설

등 어린이를 대상으로 하는 시설물

※ 유사실적 인정 여부는 발주처가 결정하며 이에대해 어떠한 이의도 제기할

수 없다.

나. 보유 기술인력 및 전문기술 평가 : 8점

구 분	평가항목	평 가 요 소				배점	비 고
기 술 능 력	전문인력	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	4.0
		1.0	0.8	0.5	0.3
		※평점 = 인원 × 기술자별 점수 ⇒평점의 합이 최종점수(최고 4.0점)
	전문기술	특허등록 보유		3건 이상 : 2.0		4.0
				3건 미만 : 1.0
		실용신안 및 디자인등록 보유		5건 이상 : 2.0
				5건 미만 : 1.0
	※ 관렵협회 증명서에 명시된 기술등급 적용 ※ 기술자에 대한 등급은 지식경제부 공고 “엔지니어링사업대가의 기준”의 “기술자 등급 및 자격기준”에 의하며, 공고일 기준 6개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당 ※ 4대보험 가입증빙서 첨부 ※ 전문기술은 증명사본 첨부(공고일 이전에 등록된 기술만 인정함)

다. 경영상태 평가 : 5점

•「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발행하는 「신용평가등급 확인서」를 기준으로 평가

•평가지표

평가항목	평가요소	배점	평가지표				비고
			회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용 평가등급	평점
경영상태	기업신용 평가등급	5	AAA ~ AA-	A1	AAA ~ AA-	5.0
			A+ ~ A-	A2+ ~ A2-	A+ ~ A-	4.0
			BBB+ ~ BB-	A3+ ~ A2-	BBB+ ~ BB-	3.0
			B+ ~ B-	B-	B+ ~ B-	2.0
			CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	1.0

※ 신용평가등급 확인서 미제출 업체는 최하점수를 적용

※ 기업신용평가 등급은 입찰공고일 이전에 평가한 것으로 유효기간 내일 것

라. 신인도 : 1점

•입찰 공고일 기준 최근 3년간 관계 법령에 따라 입찰참가 제한 또는 영업정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1월마다 0.3점 씩 감점(1월 미만인 경우 1월로 계산)

예) 1.3개월의 경우 2월로 계산

※ 관련협회 증빙자료(부정당업체 사실확인서) 첨부

▣ 기술능력평가서(심사위원평가표)

- 경기도어린이박물관 전시물 제작・설치 - 협상에 의한 계약 제안서 심사표							제안번호
심사항목		세부심사내용	배 점			평점		심 사 방 법
			총점	등급	점수
계			60	4 단계				o심사항목별로 평점하고 o각항목별로 배점을 최고점수로 하고 소수점 이하는 평점하지아니함
기획 능력		- 기획목표 및 사업내용의 이해도 - 전시컨셉 설정 및 스토리라인의 창의성 및 독창성 - 실행전략의 타당성 및 신뢰성(사업수행체계, 세부공정, 소요예산 산출의 타당성 등)	15	A	15
				B	12
				C	9
				D	7
사업수행계획	전시공간구성	- 공간계획의 독창성 및 효율성 - 공간연출의 다양성, 흥미성	10	A	10
				B	7
				C	5
				D	3
	전시계획	- 연출기법의 독창성 - 구조물의 안전성 - 디자인의 우수성 - 아동 발달에의 적합성 - 재질 및 매체의 적정성 - 운영 및 유지관리의 용이성	20	A	20
				B	17
				C	13
				D	10
기술지원, 사후관리, 상호협력관계		- 관리 및 운영계획의 효율성 - 비상시 대응방안의 적정성 - 사후관리방안의 경제성 - 소방,기계,전기 보안설비 등의 상호 적합성	15	A	15
				B	13
				C	10
				D	8

□ 제안서 심사평

2012년   월    일

심사위원 :                  □

VI. 제안관련 일반사항

1. 제안서의 효력

가. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한   효력을 가진다. (단, 계약서에 명시된 내용의 경우에는 계약서의 내용을  우선으로 한다.)

나. 제출된 제안서의 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 사실과 일치하여야 한다.

○ 필요시 제안업체에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

다. 제안서, 제안요청서, 계약서에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견을 달리할 경우 발주처의 해석에 따른다.

2. 제안서 작성 시 유의사항

가. 제안서는 발주처에서 요구하는 목차에 따라 작성하여야 한다.

나. 제안업체는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.

다. 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어 해설을 표기한다.

라. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별지로 제출할 수 있다.

마. 제안서 기재사항을 입증할 수 없거나, 허위로 작성한 사실이 밝혀질 경우 평가 대상에서 제외한다. (제안서는 공문을 첨부하여 지참 제출하여야 하며, 대표자의 인감이 날인되어 있어야 함)

바. 질문사항 등은 문서에 의하여 제출하고 전화 등의 문의는 법적 효력을 갖지 못한다.

사. 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 자료는 일체 반환하지 않으며 발주처의 소유로 한다.

아. 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체가 부담한다.

자. 발주처는 제안서 접수 후 예산 사정에 따라 제안요청서상의 설계·시공 내용 및 규모를 변경할 수 있다.

차. 제안서는 명시된 제출기한 내에 접수 장소에 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가하다.

카. 가격제안서는 대표자 신고인철 검인 후 별도 봉인하여 1부 제출한다.

3. 비밀 및 보안 유지

가. 제안 참여업체는 본 제안요청서 및 제안서를 포함한 모든 문서를 낙찰자 결정시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체관계자 이외의 제3자에게 공개하여서는 안 된다.

나. 본 제안요청서 및 제안서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 된다.

다. 입찰 과정 및 제안서 참가 과정 중에서 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주처의 사전 승인 없이 누설하여서는 안 된다.

라. 제출한 모든 제안서는 평가위원․담당자 및 업무실무자 외에 제3자에게  해당업체의 권익보호 차원에서 비공개를 원칙으로 한다.

마. 본 제안요청서에서 거론되지 아니한 사항에 대해서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령․시행규칙을 적용한다.

※ 위 사항을 위반하여 문제가 발생했을 시 제안참여업체는 모든 책임을 져야 한다.

4. 사업수행 인원

가. 사업총괄 책임자 및 수행인원에 관련된 사항은 반드시 포함되어야 하고, 계약 성립 후 이 사항을 변경하고자 할 때에는 기존 사업수행 인원과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어 사전에 발주처의 허락을 받아야 한다. 이를 위반 시에는 계약 해지 등의 사유가 될 수 있다.

나. 계약 성립 후, 발주처가 판단하여 과업수행에 지장을 초래하는 사업총괄 책임자 및 수행인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 사업자는 이에 응하여야 한다.

VII. 첨부서류

별지 제1호. 제안신청서

별지 제2호. 서약서

별지 제3호. 질의서

별지 제4호. 조직 및 인원현황

별지 제5호. 시공 및 설계 실적서

별지 제6호. 참여인력 이력사항

별지 제7호. 참여인력 총괄명부

별지 제8호. 가격제안서

별지 제9호. 입찰참가 신청서

별지 제10호. 제안설명서 표지 (작성예시)

[별지 제1호 서식]

접수번호	2012 -

제안일자	2012. . .

협상에 의한 계약

본인은 경기문화재단에서 시행하는 경기도어린이박물관 전시물 제작・설치를 위한 제안지침을 준수하며 동 제안에 참가할 것을 신청합니다.

2012.    .    .

업 체 명		대 표 자	(인)
주 소		전화번호
주민등록번호 (사업자등록번호)		FAX

붙임 :	1. 사업자 등록증 사본 : 1부

2. 면허증 사본 : 1부

3. 인감증명원 및 사용인감계 : 1부

4. 회사소개서(실적증명 포함) : 1부

5. 서약서 : 1부

경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

서     약     서

당사는 경기도어린이박물관의 전시물 제작・설치 제안에 참여하여 사업을 수행함에 있어 아래의 내용을 준수 ․ 이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 경기문화재단의 제안지침서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고 경기문화재단의 제안지침을 성실히 준수하겠으며 본 지침을 위해할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 제안서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성 하겠으며, 그 내용에 대하여 법적 ․ 재정적 ․ 행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 경기문화재단에서 제안서 평가를 위한 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2012년    월     일

서약자  업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

경기문화재단 대표이사   귀하

[별지 제3호 서식]

협상에 의한 계약 질의서

발 송 일 시	2012년 월 일
회 사 명		대표자	(인)
담 당 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)
연 락 처	전화 : FAX :
질 의 사 항
제안요청서 (PAGE)	질 의 내 용
※ 유의사항 ○ FAX 전송 후 반드시 전화로 접수여부 확인 ○ 질의 접수기간 중 09:00～18:00 경기문화재단 경기도어린이박물관 행정지원팀으로 접수(계약담당자) - 전화 : (031) 270-8615 - FAX : (031) 283-5363

경기문화재단 대표이사   귀하

[별지 제4호 서식]

조직 및 인원현황

1. 제안업체 조직 및 인원현황

2. 용역(공사) 수행조직 및 인원현황

사 업 책 임 자

부문			부문			부문			부문

주) 1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.

3. 용역(공사) 수행조직 및 인원현황에는 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한     인력을 기재한다.

[별지 제5호 서식]

전시분야 최근 3년간 시공 및 설계 실적서

가. 주요 사업 내용

업 체 명 :

연번	① 용역 (공사)명	용 역 (공사) 기 간	②계약금액 (단위 : 백만원)		발주처			③구체적업무수행 내용	④타사와 공동프로젝트수행여부	비 고
					상호명, 관공서명	주 소	전화 번호
계

① 용역(공사)명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재) : 해당 건수별로 정확하게

② 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 구체적인 업무수행 내용 : 수행작업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획수립, 업무개발, 장비구입 등)로 작성

④ 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

※ 실적증명원(원본대조필)사본 1부. 단, 수행(수주포함)중인 사업에 한하여 계약서 사본1부

※ 단 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리함

나. 공사 및 설계용역 건별 내역

용역(공사) 명
발 주 처
용역(공사)기간	착수일 완료일 (예정일)		계약금액
사업책임 기 술 자	자격명칭 : 성명 :
1. 사업목적
2. 사업의 중요사항 및 수행한 업무내용

[별지 제6호 서식]

참여인력 이력사항

성 명			소 속			직 책			연 령	세
학 력	대학교 전공					해당분야근무경력
						기술등급
	대학원 전공					자 격 증
본사업참여임무					사업참여기간				참여율	%

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년.월 ～ 년.월)	담당업무	발주처	비 고

주) 1. 별지 제2호 서식 2항에 포함된 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한 기술자에 대하여 기재한다.

2. 연령 및 근무경력은 현재를 기준으로 년 월까지 기재한다.

3. 자격증 사본을 첨부한다.

4. 확인결과 허위사실로 밝혀질 때는 0점 처리한다.

	[별지 제7호 서식]
				참여인력 총괄 명부

성 명	연령 (세)	기술등급	최종학력	자격증	담당업무	비 고

참고) 1. "프로젝트 참여 기술자"에 포함된 인력

2. 작성기준 일자 : 제안일 현재

[별지 제8호 서식] - ‘가격제안서’

입 찰 서
입찰내용	공 고 번 호	제 호	입 찰 일 자	․ ․ ․
	건 명
	금 액	금 원정(￦ )
	준 공(납품) 연 월 일
입찰자	상 호 또는 법 인 명 칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣에 의한 공사(물품구매․기술용역)입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매․기술용역)계약일반조건․계약특수조건․설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품․용역수행)기한 내에 공사(물품․용역)를 완성(제조․납품․설치)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 산출내역서 1부 입찰자 □ 귀하

[별지 제8호-1 서식]

가격입찰서 금액 산출근거(설계비)

구분 비목	산 출 내 역			금 액	비 고
	기술자 등급	단가	투입인력 (M/M)
직접 인건비
	고급기술자
	중급기술자
	초급기술자
제경비(직접인건비× %)
기술료((직접인건비+제경비)× %)
계(직접인건비+제경비+기술료+공사비)
부가가치세(합계×10%)
합 계

[별지 제8호-2 서식]

가격입찰서 금액 산출근거(제작 설치비)

구분 비목		금 액	구성비	비 고
재 료 비	직 접 재 료 비
	간 접 재 료 비
	소 계
노 무 비	직 접 노 무 비
	간 접 노 무 비
	소 계
경 비	산 재 보 험 료
	고 용 보 험 료
	안 전 관 리 비
	기 계 경 비
	기 타 경 비
	소 계
순 공 사 원 가
일 반 관 리 비
이 윤
총 원 가
부 가 가 치 세
합 계

[별지 제9호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.											처리기간
											즉 시
신청인	상호 또는 법인 명칭						법인등록번호
	주 소						전 화 번 호
	대 표 자						주민등록번호
입찰개요	입찰공고 (지명)번호			제 호			입 찰 일 자
	입찰건명
입찰보증금	납 부			· 보증금율 : % · 보 증 액 : 금 원정(￦ ) · 보증금납부방법 :
	납부면제 및 지 급 확 약			· 사유 : · 본인은 낙찰 후 계약미체결시 귀사에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 주민등록번호						본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
심사위원 추첨번호		유사기관(1~9)중 3택				관련기관(10~15)중 2택			학 계(16~21)중2택
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 시의 일반(제한,지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 . . . 신 청 인 (인) 귀하
세입세출의현금출납공무원 성 명 : (인) 유가증권취급공무원 성 명 : (인)

[별지 제10호 서식]

고유번호(예)

										15
	가		―		3	6	9			30
15	30	8	14	8

경기도어린이박물관

대형 신체놀이 구조물 설계 및 제작・설치 제안 설명서

▣ 작성요령

※ 고유번호는 제안설명서 1부에만 기재하고 나머지 11부는 기재하지 않는다.

※ 표지를 비롯한 내용에는 위 제목 이외의 어떠한 표시도 기재하지 않는다.