- 백남준아트센터 전시공사 및 구조물 구축 -

과 업 내 용 서

사업담당	학예연구실	이수영	TEL:031)201-8553	FAX: 031)201-8530
계약담당	행정지원팀	설정숙	TEL:031)201-8523

Ⅰ.  사 업 안 내

1. 사업 개요

❍ 사 업 명：백남준아트센터 전시공사 및 구조물 구축

❍ 사업기간：2012.7.6 ~ 2012.7.19 (휴일포함 14일간)

❍ 사업예산：일금오천사백구십육만삼천원정(₩54,963천원) ※부가세 포함

❍ 계약방법 : 소액수의 견적입찰 공사계약, 총액입찰

❍ 주요사업내용

• 아트센터 1, 2층 전시 공간을 개발하기 위한 공간 설계안의 시공

2. 사업목적

○ 백남준의 사유를 일반 대중들에게 확장하고, 백남준의 창조성을 대표할 수 있는 전시 공간 구축

○ 백남준의 작업 세계의 특성을 반영하여 비디오 아트 뿐 아니라 미디어 작품을 관람할 수 있는 공간 구축

○ 지역 사회 주민들의 문화적 소양을 고양시킬 수 있는 지역 사회의 새로운 문화 공간 구축

3. 사업일정

❍ 구축기간 : 14일간

❍ 구축일정 : 2012년 7월 6일 - 2012년 7월 19일

2012년 6월 26일 ~ 7월 3일	* 전시장 시공 용역 업체 선정 및 계약
2012년 7월 6일 ~ 7월 19일	* 공간 시공 및 설치 완료
2012년 7월 20일 ~ (7일 이내)	* 준공계 및 준공도서 제출일로부터 7일 이내 준공검수

Ⅱ.  과업 지시 내용

1. 과 업 명 : 백남준아트센터 전시공사 및 구조물 구축

2. 과업목적 : 백남준아트센터 전시공간의 효과적 구축

3. 과업개요

가. 위    치 : 경기도 용인시 기흥구 백남준로 10 백남준아트센터 1,2층

나. 공사면적 : 400㎡

다. 용    도 : 전시장

라. 예상공사비 : 54,963천원(부가세 10%포함)

마. 용역방법 : 실내건축공사업에 관한 실내건축업 면허를 보유한 업체

4. 과업기간 : 계약일로부터 14일(공휴일 포함)

5. 과업수행 일반지침

가. 일반사항

1) 용역자는 본 과업지시서 및 용역관련 제반법규를 숙지하여 설계 및 시공에 반영토록 하여야 하며 이를 이행치 않아 발생되는 모든 사항에 대하여는 책임을 진다.

2) 과업지시서에 누락된 부분이나 변경할 사항에 대하여는 백남준아트센터와 긴밀히 협의하여 결정한다.

3) 용역자는 각종 협의 및 보고사항 등 필요한 도서를 충분히 작성하여 제출한다.

4) 각종 심의에 필요한 도서는 용역자가 제출하도록 한다.

5) 제출서류

가) 수급인은 업무단계에 따라서 다음 서류를 제출하여야 한다.

◦ 공정표, 산출내역서(계약금액에 대한 내역)

◦ 현장대리인계 및 현장대리인 이력서, 재직증명서 첨부

◦ 공정별인력 및 장비투입계획서

◦ 기술자격증 등 사본 첨부

◦ 발주부서 공사감독관 경유 착공신고서

◦ 발주부서 공사감독관 경유 준공계 및 준공도서(설계도면 및 준공사진) 5부

나) 기타 필요시 제출서류

◦ 본 과업을 수행함에 있어서 발생되는 문제점 및 이에 대한 해결방안

◦ 용역의 진도보고 : 주간공정보고

◦ 기타 용역수행에 필요한 사항 : 업무협의결과 보고서 등

6. 시공 시 주의사항

가. 일반사항

1) 계약상대자는 계약목적을 달성할 수 있도록 필요한 조사, 확인검토, 기타 조사를 하여야 한다.

2) 계약상대자는 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 현장 작업, 시공 방법에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시공하고, 정해진 기간내에 완성하여야 하며, 공사감독관(학예실 담당큐레이터 및 설계디자인 감리자)으로 부터 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 즉각 이에 응하여야 한다.

3) 제반공사는 관계법령에 의해 시공하고, 공사시공에 따라 공사감독관에게 제출, 승인을 득하여야 할 사항은 기일을 엄수하여야 하며, 이때 수반되는 비용은 계약상대자가 부담하여 공사 진행에 차질이  없도록 하여야 한다.

4) 본 공사의 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 분야는 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하여야 한다.

5) 본 설명서의 주의사항에 명기되지 않더라도 설계지침에 시공관련 사항이 명기되어 있으면 시공시 필히 준수하도록 하고 명기하지 않은 사항은 일반 시공지침을 적용한다.

나. 특기사항

1) 계약 상대자는 공사 및 운영 시 발생하는 각종 소음, 진동을 최소화하여야하며, 소음, 진동, 규제기준을 초과하거나 공사와 관련하여 불편사항이 발생하지 않도록 대책을 강구하여야 하며, 적용은 공사 감독관의 승인을 득한 후 시행한다.

2) 공사로 인하여 부득이하게 기존의 시설물을 훼손이 발생될 경우에는 기존시설의 보완을 설계에 반영하고, 계약상대자가 시공한다.

7. 준공검사 및 준공도서 납품내역

가. 준공검사

1) 계약상대자는 공사를 완성한 때에는 공사감독관(학예실 담당큐레이터 및 설계디자인 감리자)에게 통지하여야 하며, 감독관은 통지를 받은 후 지체 없이 계약상대자의 입회하에 검사를 하여야한다.

2) 계약상대자는 1)항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체 없이  이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

나. 준공도서 납품내역

1) 계약상대자는 준공 후 정하는 기간 내에 준공도서를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 준공도서는 설계도서와 준공사진(준공 전,후 사진 및 시공과정 사진)으로 한다.

다. 청구시기 : 발주부서 공사감독관 준공(기성)검사 완료 이후 청구가능

※ 준공(기성)계 제출과 동시에 청구서 제출할 수 없으며, 검수 완료 이전에는 지급 불가함