2013년 남한산성 행궁권역

조경관리용역 과업지시서

2013. 3.

제1장 개요

1. 용 역 명 : 2013년 남한산성 행궁권역 조경관리 용역

2. 용역기간 : 착수일로부터 7개월

3. 용역범위

가. 용역대상 : 남한산성 행궁권역 전통공원내 조경식물 유지관리

1) 교목 : 678주

2) 관목 : 5,500주

3) 초화류 : 191,880본

3) 잔디 : 5,330㎡

나. 용역 내용

- 제초 3회, 풀깎기 3회, 교목전정 1회, 관목전정 2회, 방제작업 5회

- 기타작업 1식(낙엽, 고사목 등 이물질 제거, 잔디 보수 등)

제2장 일반사항

제 1조 적용 범위

1. 본 지시서는 한국지질자원연구원 원내 수목 및 잔디관리(잔디인력제초, 잔디 약제살포, 수목 약제살포, 수목 전정, 교목 수간하 잔디제거, 잔디깎기, 기타작업 등) 작업에 관하여 적용한다

2. 본 시방서가 정하지 않은 사항에 대해서는 국토해양부 조경시방서 기준에 따른다.

3. 본 시방서와 내용이 상이할 때, 명기사항이 없을 때, 또는 작업상의 의문이 생길 때는 감독관과 협의하고, 감독관의 지시에 따른다.

제 2조 사전 협의 사항

1. 계약상대자는 착수전에 제출하여 다음 사항을 서면으로 제출하여야 한다

1) 착수계

2) 현장 대리인계

3) 용역예정 공정표

4) 기타 용역업무에 필요한 제반 서류

2. 계약상대자는 용역 착수전 다음 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

1) 용역, 시행순서 및 작업 방법

2) 인원 및 장비투입 계획

3) 기타 용역에 있어 주요사항

제 3조  용역 착수

1. 계약상대자는 소정의 양식에 의거 다음 사항을 기록한 일일 작업일보를 제출 하여야 한다

1) 용역의 진척사항

2) 작업자의 출역사항

3) 재료의 반입 및 소비

4) 장비의 반출입

5) 기타 감독관의 요구 사항

2. 계약상대자는 모든 용역 작업 전에 작업계획을 제출하고, 작업완료시 감독관의 확인을 받아야 하며 이에 의하지 않고 시행한 작업은 인정하지 아니한다.

3. 계약상대자는 작업 전․중․후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 작업일보 및 사진을 감독원에 제출하여야 한다.

제 4조  조경 관리

1. 계약상대자는 식물의 생리, 생태적 특성에 부합하고 제반 문제 발생의 사전 예방적 관리를 충실히 해야 한다.

2. 시방서에 명기되어 있지 않은 전문관리 부분에 대해서는 한국조경학회의 조경관리학 기술내용에 따른다

제 5조  안전관리

1. 장비에 의한 작업 및 운행시 안전사고가 발생하지 않도록 예방에 최선을 다하여야 한다

2. 작업인원의 작업 중 사고 예방에 만전을 기해야 한다(소형기계 포함)

3. 용역 중 발생한 모든 사고에 대해 책임(민, 형사상)을 계약상대자가 진다

4. 약제 살포시 작업자의 안전을 위해 교대로 작업을 하며, 보호장구를 착용하여야 한다

제 6조  재료, 시설물 및 환경오염 예방 등

1. 계약상대자는 조경관리 작업에 사용되는 재료를 사용 전 감독관의 검수를 받은 합격품에 한해 사용한다.

2. 계약상대자는 용역작업 수행 중 조경시설물 및 기타 건물, 장비, 설비에 피해가 가지 않도록 하여야 하며 파손 및 피해 발생시 원상 복구 하여야 한다

3. 계약상대자는 용역을 수행함에 있어 폐기물 발생을 최대한 억제하여야 하며, 발생된 폐기물은 관련법에 의거 적법하게 처리하여야 한다

4. 수목, 잔디 등의 예취물은 지정된 장소에 운반, 적재하여야 하며 깨끗하게 유지관리하여야 한다

제 3장  분야별 조경 관리

제 1조  잔디 관리

1. 잔디밭 인력 제초

1) 인력 제초는 잔디를 손상치 않도록 주의하여야 하며 제초포크 등을 사용하여 잡초의 뿌리까지 완전히 뽑는다

2) 뽑아낸 잡초는 지정 장소에 모아서 한꺼번에 처리하고 제초 흔적을 깨끗이 청소한다

3) 뿌리를 완전히 제거할 수 없는 클로버, 쑥 등은 제초제를 수시로 살포하여 철저히 제거토록 하며 농도를 정확히 희석, 살포하여 잔디에 피해가 없도록 한다

4) 잔디와 수목에 피해가 없으면서 잡초를 억제할 수 있는 제초제를 잡초발아전 살포할 수 있다

2. 잔디 병충해 방제

1) 연 1회이상 잔디 병충해 방제를 하여야 하며, 병충해가 발생할 경우 즉시 약제를 살포한다

2) 약제를 살포할 경우 농약 취급 단속법 등의 농약관련 법규 및 제조업자 등이 정하고 있는 사용안전기준, 사용방법을 준수한다

3) 약제 살포시 주변 다른 기관에 피해가 가지 않도록 하여야 한다

3. 잔디깎기

1) 잔디깎기는 장비를 사용하여 실시하며, 수목이나 시설 등을 손상치 않도록 주의하여 실시한다.

2) 잔디깎는 높이는 제거부분이 40%이상 제거되지 않도록 적정시기를 선택하여 작업을 실시하여야 하며 초장을 2cm ~ 4cm정도 유지하여야 한다.

3) 깎여진 잔디는 지정장소에 모아서 한꺼번에 처리하며, 작업 후 깨끗이 청소 한다.

4) 깎기 작업전에는 기계를 점검하여 잔디밭에 기름이 떨어지지 않도록 하며, 안전화, 안전모, 보안경, 다리보호장구 등을 반드시 착용하여 안전사고 예방에 만전을 기한다.

4. 잔디 관리 기타

1) 필요한 경우 10㎡이내에서 감독관의 요구에 의해 잔디 식재를 하여야 한다

2) 한발 지속시 잔디보호를 위하야 관수 작업을 하여야 한다

3) 침하지 및 요철지는 잔디를 일정하게 뜨고 성토한 후 깨끗하게 심고 관수를  충분히 해주어 개선하도록 한다.

4) 잔디밭 작업시 차량의 출입을 최소화하고 잔디손상 및 요철이 생기지 않도록 주의한다

제 2조  수목 관리

1. 수목의 전정

1) 수목의 전정은 활착 또는 생식의 균형을 도모하며 수목의 바른 모양새를 유지하는 것을 원칙으로 한다

2) 화목류, 적심, 적아, 상록수, 관목류의 생육 특성 등에 따라, 적절한 시기를 선택하여 전정한다

3) 일반적인 전정 대상은 다음과 같다

- 마른가지

- 생장을 멈춘 가지

- 현저히 병충해에 걸린 가지

- 통풍, 채광, 가선, 통행에 장애가 되는 가지

- 결손에 의해 위험을 초래할 우려가 있는 가지

- 기타 수관, 수형, 생육상 불필요한 가지

4) 교목특수 전정 대상수종은 소나무, 섬잣나무, 조형향나무 등으로 전정대상은 다음과 같다.

가) 수형다듬기

나) 밀식되어 수형이 파괴되는 가지 또는 웃자란 가지

다) 속가지 및 맹아지

라) 조형의 목적에 따라 제거해야 되는 가지

2. 수목병충해 방제

1) 수목의 병, 해충은 예방 또는 발생초기 방제가 중요하므로 사전예찰을 철저히 하여 방제 효과를 높일 수 있도록 해야 한다

2) 건강한 수목으로 육성될 수 있도록 전정, 시비 등을 철저히 하여 병, 해충에 강한 수목이 되게 한다

3) 병충해가 발생한 수목은 초기에 약제를 살포하여 조기에 구제토록 하고 전염성이 강한 병에 이병되었을 경우 지조를 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취하여 소외로 반출하여 소각하며 계약상대자 부담으로 즉시 동일 수목으로 대체한다

4) 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석배율 등은 병충해의 종류와 살포 목적에 따라 다르므로 감독관과 협의 시행한다

5) 원형지 수목에 병충해 발생시 조경수목과 동일하게 약제 살포작업을 시행한다

6) 약제 살포로 인한 타 기관의 피해가 발생하지 않도록 한다.

3. 교목 수간하 잔디 제거

1) 수간하 잔디 제거는 수목주위를 수관 폭에 따라 잔디를 제거한다

2) 잔디제거 후 흙을 반입하여 원지반과 같은 높이로 고르게 펴준다.

4. 기타 작업

1) 배수로에 제초물, 예초물, 흙 등이 떨어져 배수에 지장이 없도록 하여야 한다

2) 원형지하단 제초(풀깍기) 작업시 수목의 간벌작업(속아내기, 고사지제거, 가지치기 등)을 동시에 시행하며 절단수목 표면에 반드시 약제바르기 작업을 시행한다

3) 고사목 발생시 즉시 제거하여야 하며 산책로는 산책에 지장이 없도록 정비하여야 한다

4) 착수시 잔디약제살포 및 교목 수간하 잔디 제거를 위하여 낙엽 등 이물질을 제거해야 한다

5) 기타 세부내용은 한국지질자원연구원의 해석에 따른다.