- 경기청년문화창작소 리모델링공사 -

폐기물처리용역 과업지시서

경기문화재단

- 경기청년문화창작소 리모델링공사 -

폐기물처리용역 과업지시서

1. 과 업 개 요

가. 과 업 명 : 경기청년문화창작소 리모델링공사 폐기물처리 용역

나. 위    치 : 경기도 수원시 권선구 서호로 98(서둔동 103-2) 농원예학관

다. 목    적

본 용역은 경기청년문화창작소 리모델링공사에 따른 공사현장 내 건설 공사 중 발생되는 건설폐기물을 관련 법규에 의거 적정하게 처리함을 목적으로 한다.

라. 용역기간 : 착수일로부터 70일 (단, 리모델링공사 완료시까지)

마. 용역내용 : 건설현장 내에서 발생되는 폐기물처리 용역

구 분	단 위	수 량	비고
폐콘크리트	ton	39.546
건축폐재류	ton	853.786
혼합폐기물	ton	26.93

2. 일 반 사 항

가. 본 과업지시서는 경기청년문화창작소 리모델링공사 폐기물 처리용역에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령에 의거 발주처 및 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 수급자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착수일 전에 착수계, 과업내용별 수행계획표, 현장대리인계, 용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하고, 과업별 시행 방법 등 세부계획을 보고하여야 한다.

다. 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 전문지식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

라. 과업별 이행 방법 등 세부계획에는 운반자, 중간 처리자, 최종 처리자, 최종 반출지를 명시하여야 하며, 이를 변경 할 때에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

마. 수급자는 관련법규에 따른 각종 인ㆍ허가를 수급자 부담으로 득하여야 하며, 폐기물 처리시 발생하는 각종민원에 대하여는 수급자의 책임으로 해결하여야 한다.

바. 수급자는 본 과업수행에 있어서 관계기관 요구가 있을시 관계기관의 의견을 면밀히 검토하고 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 받아 감독관과 협의하여 반영하여야 한다.

아. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 중요사항은 이에 따라야 하며, 관계기관의 사정에 의하여 변경이 있을 때에는 감독관의 방침에 따라야 한다.

자. 본 과업 수행 중 수급자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급자의 부담으로 처리하여야 한다.

차. 본 과업 수행 중 현장대리인이 과업수행에 부적당하다고 인정 할 때는 즉시 교체를 명할 수 있다.

카. 폐기물 운반시 지정차량으로 운반하여야 하며, 작업시간은 08:00~ 18:00까지로 제한하여 야간작업으로 인한 인근 주민들의 민원이 발생치 않도록 하여야 하고, 폐기물운반 차량통행으로 인한 비산먼지가 발생치 않도록 현장 관리하여야 하며, 이에 필요한 비용은 수급자 부담으로 한다.

타. 폐기물 처리의 적정 이행여부를 확인하기 위하여 감독관이 필요시 요구하는 자료는 즉시 제출하여야 한다.

파. 시공사에서 사업장폐기물 배출자신고시 수급자는 이에 협조하여야 한다.

하. 폐기물처리 완료 후에 관계서류 전부를 감독관 및 발주처에 제출하여야 한다.

1) 폐기물 계량표

2) 운반서류 (송장) 일체

3) 신고서류 사본

4) 작업사진 일체

3. 특 기 사 항

가. 건설폐기물 분리수거를 철저히 하여야 하고 폐기물 수량은 감독관에게 보고하고 정산 처리하여야 하며, 감독관 요구 시 감독관이 지정하는 공증기관에서 샘플링 계근 확인 할 수 있도록 협조하여야 한다.

나. 폐기물처리는 상차․운반, 최종처리 및 이에 따른 모든 부대비용(계근비용 등)을 포함한다.

다. 폐기물처리는 폐기물관리법에 의거 적정하게 처리하여야 하며, 처리과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 민․형사상 책임은 수급자의 책임으로 한다.

라. 폐기물 수량은 경기청년문화창작소 리모델링공사 설계서를 근거로 산출하였으며 처리수량에 대한 정산 방법 등은 감독관과 협의하여 감독관이 승인한 방법으로 한다.

마. 건설현장 시공업체의 사유로 발생되는 건설폐기물은 건설시공업체의 부담으로 처리하며 본 공사의 계약용역업체는 폐기물 확인 후 반출하여야한다.

바. 본 과업지시서 및 설계도서의 내용과 다른 폐기물 발생 시 즉시 서면으로 감독관에 보고하고, 감독관 지시에 따라 처리하여야 한다.

사. 현장에서 반출된 폐기물은 중간처리장 및 최종처리장에 반입 여부를 확인 할 수 있도록 반출일별 인계･인수서를 관련규정에 의거 작성하여 인계･인수자가 각각 보관하고, 이를 증명할 수 있는 자료(반출일시, 계근 증명서, 차량별 계근 사진 등)를 첨부하여 반출일 다음날 공사일지와 함께 감독관에게 제출하여야 한다.

아. 사업장내 폐기물 무단 투기를 방지하기 위하여 수급자는 주기적으로 현장 순회 점검 등 현장관리를 철저히 하여야 한다.

자. 경기청년문화창작소 리모델링공사 시공업체와 폐기물처리 용역업체와의 시공한계는 아래와 같으며, 효율적인 공사관리를 위하여 상호 협조하여야 한다.

경기청년문화창작소 리모델링공사 시공업체	폐기물처리 용역업체
폐기물수집 ․ 보관	폐기물 상차, 운반, 처리

자. 감독관의 허가 없이 반출할 수 없으며, 감독관이 반출중단 요구 시는 즉시 따라야 한다.

차. 위험개소에는 감독관과 협의하여 교통안전요원배치 등 안전에 필요한	안전조치를 수급자 부담으로 하여야 한다.

4. 준  공

가. 수급자는 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 시에는 관련서류 및 발주자가 지시하는 아래 서류 등을 제출하여야 한다.

1) 폐기물 처리확인서 (올바로시스템 확인서류 등) 3부.

2) 사업장폐기물관리대장 (계량전표 또는 계근표 포함) 3부

3) 폐기물인계서 (공사 현장대리인 날인 포함) 3부

4) 폐기물처리 준공 사진첩 (착수전 / 수집, 운반, 처리 / 완료후) 3부

5) 기타 발주자의 요구자료 1식

나. 준공 시 제출서류 작성대가는 수급자 부담으로 처리한다.

다. 수급자는 폐기물처리 완료 후 관계법령에 따라 관할관청에 행정처리(폐기물배출 및 처리실적 보고서 및 목록 대장 등)를 하여야 하며, 처리 후 3일 이내 발주자에게 보고하여야 한다.

라. 최종 준공 시는 준공검사 결과 및 관계법령에 의한 행정처리 등이 완료되어 발주자가 인정한 경우 준공금을 지불하며, 수급자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

5. 기  타

가. 본 사업 시행중 처리물량 등의 설계변경으로 계약변경이 있을시 발주처와 사업변경 계약을 하여야 한다.

나. 사업시행 중 현장여건 등으로 인한 설계변경사항 발생시에는 기술용역계약 일반조건의 규정에 따라 설계변경 한다.

다. 용역시행 중 발주처와 수급자간의 시방서 및 단가 등 해석이 상이할 경우 발주처의 해석에 따라야 한다.

라. 수급자가 폐기물 관리법에 의한 폐기물 처리업 허가를 상실하였을 경우 사업수행결과에 의거 정산하고 계약을 해지할 수 있다.

마. 기타 설계변경사항에 대하여는 관계법령과 용역시방서에 따른다.

바. 폐기물처리 중 수급자의 부주의 등으로 인하여 발생되는 분쟁, 민원, 기타사항에 대한 민. 형사상의 문제는 수급자의 책임이며, 이로 인한 비용도 수급자가 부담한다.

사. 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 감독관과 협의 시행하여야 한다.

아. 도급자는 어떠한 경우라도 발생, 수집된 폐기물에 대해 불법 매립하여서는 안 된다.

자. 용역수행 완료 후 주변정리를 깨끗이 하여 환경 문제가 발생되지 않도록 조치하여야 한다.