설계용역 과업지시서

용역명 : 융·복합 문화공유 플랫폼 리모델링 공사

기본 및 실시 설계용역

2017. 3.

경기문화재단

< 차   례 >

1. 과 업 명   ....................................................................................................... 2

2. 과업 목적   ..................................................................................................... 2

3. 과업 개요   .................................................................................................... 2

4. 과업 기간   .................................................................................................... 2

5. 과업 내용   .................................................................................................... 3

6. 과업 범위   .................................................................................................... 3

7. 설계 방향   .................................................................................................... 9

8. 설계범위 및 설계조건   ................................................................................... 10

9. 설계도서 작성   .............................................................................................. 10

10. 중간 납품   .................................................................................................. 12

11. 납품 및 검수   .............................................................................................. 12

12. 계약 해제   ................................................................................................. 12

13. 설계 보완   ................................................................................................. 13

14. 납품 기한   ................................................................................................. 13

15. 기타 사항   ................................................................................................. 13

설 계 용 역 과 업 지 시 서

1. 과 업 명 : 융·복합 문화공유 플랫폼(대형강의실) 리모델링 공사 기본 및 실시 설계용역

2. 과업 목적

본 설계는 경기도 수원시 권선구 서둔동에 위치한 (구)서울대학교 농업생명대학 부지 내 대형강의실 1개동에 대한 리모델링(개․보수 디자인 등) 공사 설계로서 기존 시설을 현대적, 문화예술적 기능에 맞는 시설로 향상, 개량함으로써 청년문화 활성화 및 지역 문화예술의 발전과 변화를 촉진하는 우수한 문화시설로 활성화 할 수 있는 최선의 시설물이 되도록 함에 있다.

3. 과업 개요

가. 위치 : 경기도 수원시 권선구 서둔로 166 경기상상캠퍼스 내 대형강의실

나. 규모

(1) 대형강의실 – 지상 2층 (1,310㎡/396py)

※ 공사비 : 금이십이억원정(\2,200,000,000원)

※ 건물규모는 설계과정에서 경기문화재단과 계약상대자(수급인)가 상호 협의하여 조정될 수 있다.

다. 설계예상액 : 금일억팔백오십구만이천원정(\98,720,000원/부가가치세 별도)

(1) 제시된 설계예상액은 기본설계와 실시설계를 포함하는 금액이다.

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 계약일로부터 80일이내로 한다.

나. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우       에는 발주처의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

(1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

(2) 발주처의 계획변경 등에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증          감이 있을 때

(3) 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 되었을 때

(4) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

5. 과업 내용

가. 본 과업은 『대형강의실 1개동 리모델링』에 대한 기본 및 세부 실시설계 등을 수행하며 다음 사항을 과업내용에 포함한다.

(1) 주변 환경과 적합하고 유지관리가 용이한 다양한 리모델링 공법을 검토(적용공법           결정은 경제성, 안전성 및 현장여건에 따른 시공성 등을 종합평가)

(2) 리모델링 디자인 설정

(3) 리모델링 설계에 대한 전반적인 기술 검토

(4) 리모델링에 대한 도면작성(시공상세도 포함)

(5) 기본, 실시설계 및 공사비 내역 산출, 시방서, 원가계산서, 수량산출서 작성

(6) 기존 현황에 대한 측량을 바탕으로 리모델링 및 환경개선에 따른 설비 및 토목공사 설계

(7) 전기․통신․소방공사 등 상세한 설계

(8) 다목적 공간(멀티플랫폼) 제 3종 문화 및 집회시설 용도변경 추진 및 완료

(9) 계약심사, 건축협의 등 과업과 관련된 행정업무 수행

6. 과업 범위

수급인은 경기문화재단에서 제시하는 과업지시서의 내용에 따라 담당자와 협의하여 설계자료를 충분히 수집하여 각종 자료를 토대로 제반 소요기능에 알맞게 다음의 사항을 작성한다.(단, 설계도서 작성 전에 아래 설계용역 과업 기본사항 및 설계 유의사항을 숙지하고 해당 부분을 발췌 참고하여야 한다.)

가. 과업 시행계획서 제출

(1) 착수보고서 - 사업책임기술자선임계, 예정공정표 등

(2) 세부시행계획서(분야별 세부 공정계획 및 업무흐름도 포함)

(3) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

(4) 참여기술자의 보안각서

(5) 기타 용역수행에 필요한 사항

나. 일반사항

(1) 본 과업지침서와 관계법령에 따라 수급인은 신의, 성실의 자세로 과업을 수행하고          전 용역과정에서 담당자와 협의하여야 하며, 용역 완료 후에도 설계도서상 오류 또          는 관계 법규상 문제가 있을 경우 모든 책임을 지고 즉시 변경 또는 변상조치를 하          여야 한다.

(2) 본 용역 시행에 필요한 관련 기관과의 협의 및 승인은 수급인 책임으로 득하여야           하며, 타 공종에 필요한 협조사항에 있어 건축사는 협조하여야 한다.

(3) 본 용역은 기본설계 완료 후 실시설계를 한다.

※ 기본설계 실시 전에 타 기관의 우수 사례 등에 대하여 조사 연구하여 제안서를 충분히 보완한 다음 경기문화재단과 협의를 거친 후 실시설계를 추진한다.

(4) 본 용역을 수행함에 있어서 건축법 및 기타 제반법규가 본 과업지시서에 합당하            여야 한다.

(5) 현장 조사에서 해당 과업대상의 핵심가치를 파악하고 이에 대한 보존 및 활용계획	을 기본계획에서 세우고 외부 전문가의 의견을 수렴하여 실시설계에 반영해야 한다.

(6) 폐기물을 포함한 철거계획을 수립하고 자세한 철거도면을 계획도면에 포함시켜야 한다.

(7) 설계에 대한 구조 안전확인 및 구조계산서를 제출하여야 한다.

(가) 대형강의실의 기존 구조안전진단 결과를 면밀히 검토하여 구조를 계산하고 안전여부를 확인하여 건축법 용도상 제 3종 문화 및 집회시설로서 용도변경이 가능하도록 구조계산 후 보강이 필요한 경우 보강 방안을 제시하여야 한다.

(나) 설계가 완료되면 과업기간 이후에도 수원시에 건축협의를 진행하여 용도를 문화 및 집회시설로 변경완료를 하여야 한다.

(다) 구조계산서는 건축구조기술사의 확인을 받아 제출하여야 한다.

(라) 설계 계획상 구조변경으로 구조안전진단이 필요한 경우, 경기문화재단과 협의하여 진행한다. 추가적인 구조안전진단 비용은 경기문화재단이 부담한다.

(8) 각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬	등이 적합하고, 내부마감재료는 불연재료, 준불연재료, 난연재료를 관계규정에 의거	선택하여야 한다.

(9) 사용자재는 K.S품 사용을 권장하며, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품	을 선정토록 한다.

(10) 수급인은 설계용역과정에 있어서 본 과업지시서에 의하여 용역을 수행하되, 기타 미비 또는 의문사항이 있을 때는 경기문화재단의 해석에 따라야 한다.

(11) 설계시 도로발생 소음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

(12) 수급인은 설계의 단계별 사업이 완료되면 제반계산서와 산출서를 작성, 원본을 포           함하여 경기문화재단에서 요구하는 수량을 제출하여야 한다.

(13) 수급인은 납품시 각종 계산서 및 산출서에 대한 책임을 져야하며 비경제적이고 불           합리한 설계로 판단될 시는 즉시 수급인 부담으로 수정 또는 보충 설계하여야 한다.

(14) 본 과업을 수행함에 있어 일어나는 모든 사고는 수급인 책임 하에서 필요한 조치           를 취하며, 설계도서에 대한 보안유지를 철저히 하여야 한다.

(15) 본 과업을 수행하는 동안 계획설계자 및 전기, 통신, 기계, 소방설계자와 충분한	협의를 거쳐 경기문화재단이 요구하는 목적물의 설계가 될 수 있도록 하여야 한다.

(16) 건물 에너지이용 효율화를 위해 공공기관 에너지절약 관련사항을 검토해야 한다.	(공공기관 에너지절약 추진지침, 국무총리지시2004-1호)

(17) 본 용역의 설계는 건축사법 제23조의 규정에 의한 건축사 사무소등록을 필한 자           가 설계할 수 있다.

(18) 각 분야별(건축,토목,전기,설비,소방,통신 등) 중요 협의사항은 기록하여 문서로 만           들어 제출하여야 하며, 미 협의에 따른 물량 누락은 각 분야별 설계자에게 책임이           있다.

(19) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후, 유지관리 과부담 등의 이유로	시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 효율적으로 설계한다.

(20) 장애인이 이용함에 있어 불편함이 없도록 장애인 편의시설을 고려한다.

(21) 설계도서는 반드시 납품일 10일 전에 제출하여 분야별 담당자에게 검토를 득	한 후 납품할 수 있으며, 설계용역 완료시에는 최종 참여기술자의 성명, 담당업무,	참여 기간 등을 기록하고 이를 확인한 후 개인별로 날인하여 제출하여야 한다.(미	제출시 변경사항이 없는 것으로 간주)

(22) 계약심사, 건축협의(용도변경 포함) 등 행정사항 업무를 추진하여야 하며 보완사항	등을 반영해야 한다.

(23) 용역계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 사용권과 2차적 저작물 또는	편집저작물의 작성권은 경기문화재단이 소유하며, 경기문화재단은 정책상 연구 결	과물의 내용을 일부 보완 또는 수정사용할 수 있다.

다. 설계과업 진행계획

(1) 사전조사 및 기본설계 완료 - 착수일로부터 30일 이내 *인허가기간이 소요될	시 인	허가기간 별도

(2) 기본설계 추진회의 – 매주 1회(발주처와 외부전문가 추진회의를 통해 계획수립)

(3) 계획(안) 제출

(4) 실시설계 - 기본설계 확정(안)에 따라 실시설계 착수

(5) 실시설계 중간협의 – 수시(발주처의 요청 또는 진행상황에 따라 협의를 통해 진행)

(6) 실시설계 최종협의 - 실시설계 착수일로부터 14일 이내

라. 사전조사서 작성

설계의 지침과 방향을 제시하기 위하여 다음과 같은 사전조사를 실시하여 담당자와 협의     하여야 한다.

(1) 주변의 지형지물

(2) 기존 건물들 간의 보행동선의 조사

(3) 융복합 문화공유 플랫폼(대형강의실) 운영 방식과 계획방향, 대지이용계획, 배치계획

(4) 부지 내 각 공간의 관련성 - 실의 연관관계 결정

(5) 창작 및 문화활동을 위한 복합문화예술 지원시설의 규모산정

(6) 부지 내 각 건물의 동선 - 동선에 따른 실의 위치 설정

(7) 부지 내 지장물의 이설, 변경

마. 설계 관련 기타계획 수립 및 검토

(1) 업사이클링 플라자(상록회관) 연계 옥외 조성 방안 검토

(가) 대형강의실 옆 건물동 업사이클링 플라자(2017년 리모델링)와 연계한 옥외 환경조성 방안을 검토하여야 한다.

(나) 대형강의실 및 상록회관의 통합 외부 환경 조성에 대한 제안을 하여 합리적이고 효율적인 외부 환경 조성을 제시하여야 한다.

(2) 조경계획 제안

(가) 대형강의실과 상록회관을 위주로 주변의 경관을 고려하여 조경 방안을 제시하여야 한다.

(나) 조경계획은 단지 내 기존 수목을 조사하여 조화로운 계획이 되도록 제안하여야 한다.

바. 각 공종별 설계구분

(1) 기본설계 : 사전조사와 계획설계를 바탕으로 기본설계, 입면계획을 작성하여 설계협	의 및 설명회를 하여야 하며, 설계협의회 과정에서 참석자들이 제안한 우수한 안건	을 반영하여 기본설계를 완성 후 실시 설계도서를 작성하여야 한다. (설계 협의회	및 승인 등에 필요한 기간은 전체 용역기간에 포함)

(가) 계획안 설명서

(나) 입면계획안 : 색채/외장재마감 계획이 포함되어야 한다.

(다) 배치도 :1/600

(라) 평면도 : 1/100~1/200 1/200

(바) 입면도 : 1/100~1/150 1/200

(사) 단면도(종․횡단면) : 1/100~1/150 1/200

평면,단면 상세도: 1/100,1/50

(아) 주차계획 평면도 : 기존현황 파악(발주처와 협의)

(자) 설계설명서 : 전 공종에 대한 기본설계안을 서술식 또는 표시 등으로 기술하              고 그 내용을 다음과 같이 한다.

- 현황 : 개요, 면적, 부지현황, 등

- 소요시설의 면적, 유효 실내 면적표

- 실내 마감표 및 부대시설표

- 공법 및 설계기준

- 설비계획 : 리모델링 및 환경개선에 따른 설비계획

- 기본설계까지의 각 안의 분석과정 및 기타 마감재료 등

(차) 경제성 검토서(입면계획, 재료, 사용기기 등의 선정시 경제성 검토하여 작성)

(카) 조감도 : 기본계획(안) 작성시 1개 작성

(2) 실시설계 : 협의된 기본설계도를 기초로 하여 가장 경제적이고 합리적으로 실시설          계를 하여야 한다.

(가) 건축설계

1) 본 용역의 설계는 공공건축물 관련 건축법령에 저촉되지 않도록 관련 법령에	의거하여 설계하도록 한다.

2) 건축사는 현장답사를 필히 이행하도록 한다.

3) 시공이 불가능하거나 건물의 안전도 저하 또는 과다설계로 예산낭비를 가져                올 우려가 있을 시는 무급으로 최단 시일 내에 설계변경을 경기문화재단에                 제출하여 공사의 공정에 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 설계에 필요한 각종 조사 및 시험은 건축사 비용으로 실시하고 보고서를 작                성하여야 한다.

(나) 전기·통신·소방설계

1) 본 용역의 설계는 공공건축물 해당법규에 저촉되지 않도록 관련법령에 의거                하여 설계하도록 한다.

2) 전기시설물에 대해서는 경기청년문화창작소(농원예학관)의 고압수전점에서 전력을 공급받도록하며 모든 시설물은 경기청년문화창작소와 네트워크로 연결되어 통합관리를 할 수 있도록 구성한다.

3) 통신설비에 대해서 경기청년문화창작소(농원예학관), 경기청년상상공작소(농화학관, 농업공작실)등과 연계하여 통합관리시스템으로 네트워크를 구성한다.

4) 소방설계는 소방법에 의거 유사시 소방시스템이 정상적으로 가동될 수 있도록 구성토록 한다.

5) 설계사는 현장답사를 필히 이행하도록 한다.

6) 시공이 불가능하거나 건물의 안전도 저하 또는 과다설계로 예산낭비를 가져                올 우려가 있을 시는 무급으로 최단 시일 내에 설계변경을 경기문화재단에                 제출하여 공사의 공정에 지장이 없도록 하여야 한다.

7) 설계에 필요한 각종 조사 및 시험은 건축사 비용으로 실시하고 보고서를 작                성하여야 한다.

(다) 토목 및 조경설계

1) 대형강의실 건축물 전,후면 부지에 대한 조경설계를 제안토록 한다.

2) 기존구조물 보수방법은 가장 효율적이며, 경제적인 방안을 검토하여 제시하                여야 한다.

3) 건물주변 조경에 대한 기본 설계안을 제시하여 사전에 협의 후 설계하여야                 한다.

4) 식재수목은 사전에 경기문화재단과 협의 후 결정하여야 한다.

5) 기존 우․오수 및 각종 맨홀의 위치를 파악하여 간섭이 발생하지 않도록 배수                관로 계획을 세워야 한다.

6) 기존 정화조의 용량을 검토하되 향후 건물전체 용도변경을 고려하여 설계에	반영해야 한다.

7) 하수방식은 주변의 기존 하수관망도와 도시계획에 맞추어 결정하여야 한다.

8) 주차장 설계로 인한 기존수목의 재배치 계획을 세워야 한다.

9) 배수로는 유효단면적을 잘 판단하여 단면을 결정하여야 한다.

10) 배수시설은 종․횡 단면도를 작성토록하고 단면구배는 1/30을 초과하지 않도	록 하여야 한다.(단, 불가피한 사정일 때는 예외로 한다.)

11) 포장 개체시 주위 여건을 감안하여 가장 조화되는 방법을 연구하여 설계하                 여야 한다.

(라) 설비 계획도서

1) 일반사항

가) 본 용역을 수행함에 있어 아래의 관계법규와 설계기준 및 본 용역과업지                    시서에 합당하여야 한다.

- 건축법, 급수조례 및 시행규칙, 폐기물관리법, 에너지이용 합리화법                        및 건축설비공사 표준시방서(기계)

- 건축물의 에너지절약 설계기준

나) 본 설계도서의 작성에 있어 위생설비는 화장실, 세면장, 샤워장 등의 일                    반배수 계통과 특수 배수 계통처리를 충분히 검토한다.

다) 냉․난방설비는 에너지이용 합리화법을 검토하여 설계한다.

2) 사전조사사항

가) 급배수계통의 조사

급수원 조사 → 상수도 분기 예상지점의 관경, 수압, 시상수도 조례 등

나) 연료(도시가스) 공급원 조사

다) 대지조건에 관한 조사(인근시설물, 대지형태, 위치)

라) 기존건물에 대한 설비부하를 조사하여야 한다.

3) 설비계획에 관한 사항

가) 부하계산에 의한 용량 결정

① 기기별 여유계수를 적절히 고려하여 경제적인 용량이 되도록 한다.

② 각 기기는 최대의 효율을 발휘할 수 있도록 설계한다.

4) 시방서 작성에 관한 사항

가) 시방서는 일반시방서와 특기시방서로 구분한다.

나) 특기시방서는 일반시방서에 명시되어 있지 않은 다음 사항을 포함 작성                    한다.

① 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관)에 관한                   사항

② 각종 자재의 설치방법(가공, 조립, 부착)에 관한 사항

③ 위생, 냉․난방, 환기, 배기, 각종 장비에 관한 특기사항

5) 실시설계도서 : 기본설계가 확정되면 이에 따라 시공에 필요한 다음의 설계                도서를 작성, 제출토록 한다.

가) 총괄표 및 실시설계도면

① 도면목차

② 전체배치도 및 실시설계 건축도면 일체

나) 위생 및 기타 설계도

① 위생, 난방, 가스설비계통도

② 각 화장실 및 기타 위생 난방 설비 설계도

③ 각실 환기 및 배수설비 평면도 및 상세도

다) 계산서

① 구조계산서

② 설비용량(급배수, 냉․난방, 급배기 등) 계산서

③ 각종 장비용량 계산서

라) 시방서

① 건축설비공사 표준시방서(기계)

② 특기시방서

마) 내역서 : 각 층별, 작업내용 등을 고려하여 구분하고 경기문화재단에서                       요구하는 프로그램을 이용하여 작성한다.

7. 설계 방향

가. 주변의 기존건물 및 환경과 조화를 이루면서 사용자의 편의와 동선을 고려한 가장 효       율적이고 경제적인 설계를 하여야 한다.

나. 공공건축물의 설계도서 작성기준 및 건축물의 에너지절약 설계기준에 합당하여야 하        며, 친환경적 건축물이 될 수 있도록 설계를 하여야 한다.

다. 전체 시설계획

(1) 기존의 교육연구시설을 문화집회시설 및 기타시설 등을 포함하는 복합문화예술 지          원시설로 전환하는 효율적인 리모델링 계획의 수립에 있어 기존 건축물의 물리적           상황을 적절히 고려하여 세부기능을 설계하여야 한다.

(2) 다양한 층위가 연결되는 플랫폼 공간의 아이덴티티를 부여하고 각기 다른 형상의 기존 건축물에 동질성을 부여하는 방법론적 접근방식을 고려한 설계를 하여야 한다.

(3) 리모델링 마스터플랜의 컨셉을 설정하고, 디자인컨셉에 따른 세부매뉴얼을 작성한          후, 경제성을 고려한 구체적 단계별 계획을 수립하여 이를 향후 기본설계, 실시설          계, 리모델링 공사의 기본지침으로 삼는다.

라. 외부공간 디자인

(1) 기능을 고려한 외관 디자인 : 대부분의 기존 건물이 갖고 있는 산업용 건축물의 이          미지를 개선하고, 차양 및 난간벽체 등 불필요한 외부시설물들의 효율적인 교체 및          철거를 통하여 복합문화예술 공간으로 거듭날 수 있는 이미지 확보방안을 고려하여야 한다.

(2) 복합문화예술 공간으로서의 시각적 아이덴티티 확립 : 외부마감재의 부조화로 인한          열악한 건축 환경을 개선하고 기존의 문화시설과는 차별화된 플랫폼공간의 아이            덴티티를 시각적으로 확립하기 위한 방안을 구축하여야 한다.

(3) 디자인 컨텍스트의 동질성 확보 : 디자인 요소의 매뉴얼화를 통하여 동질성을 확립          하고, 공통의 디자인 요소를 도출하여 설계 및 시공에 적용하여야 한다.

8. 설계범위 및 설계조건

가. 대형강의실 → 융복합 문화공유 플랫폼(플랫폼1986)

[활용계획] 1층 : 멀티플랫폼, 운영공간, 로비라운지

2층 : 스튜디오, 미디어실, 코워킹 스페이스, 레지던시 등

옥상 : 테라스 공간, 루프탑카페

※ 공간 활용계획은 발주처와 외부 전문가, 설계업체의 추진회의를 통해 구체적으로 설계반영

나. 설계과업 중 지침에 명시되지 않은 사항이라도 경기문화재단에 의거, 변경사항이 발생       할 경우에는 상호 협의에 의하여 처리할 수 있다.

다. 본 지침에 명시되지 않은 사항은 관련 학술적 근거에 의한다.

9. 설계도서 작성

가. 설계도서 작성은 계약으로서 요구한 사항에 한하여 건축사는 본 설계용역 과업지시서       에 따라 설계도서를 작성하여야 한다.

나. 공종계획 및 보고 : 수급인은 설계착수 전에 상세한 설계작성 시행계획표를 제출하여       경기문화재단의 승인을 얻은 후 계획표에 따라서 작업을 진행하여야 한다. 단, 경기        문화재단 사업시행계획 예정일정표에 일치하는 공정으로 작성하고 시행계획은 주간 단       위로 하고 상호 협의의 날을 정하여 지시 및 승인을 받도록 한다.

다. 설계 작업 입회 및 검토 수정 : 설계 작업기간의 단축을 고려하여 설계작업 진행도중       경기문화재단 담당자는 수시로 문제점에 대하여 협의하고, 작성된 설계내용에 대하         여 검토와 수정을 가할 수 있다.

라. 각종 조사작업

(1) 문헌 및 서류조사

해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용 계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사․입수하여야 한다.

(2) 현장조사

가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반   시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

#조사항목 : 상수도, 도시가스, 지역난방 인입 배관위치 및 구경 수압(공문 처리), 시배수로(우․ 오수)위치, 크기(관경)

(3) 측량조사

(가) 설계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

(나) 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지      내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

(다) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여	발주자와 협의 후 결정한다.

(라) 수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이

가능하게 설치한다.

(마) 조표는 임시용으로서 목항, 석항, 도로경계석, 노출암반 등을 측점표지로

사용하며, 위치는 기계 설치에 지장이 없는 양호한 지반에 설치한다.

(4) 공동구 조사 및 활용방안 검토

(가) 부지 내 기존에 설치된 공동구를 조사하여 설계도면에 반영하여야 한다.

(나) 조사된 공동구에 농화학관, 상록회관, 농공학관 등에 사용될 전기, 통신, 소방, 상수도 등 기반시설 설치가 가능한지 여부를 검토하여 공사비 절감방안을 제시하여야 한다.

(다) 기존 공동구를 관리할 수 있는 최적의 방안을 제시하여야 한다.

마. 설계된 특수재료에 대해 경기문화재단이 필요하다고 인정되는 사항은 시험검사를 공인       된 시험기관에 의하여 시행하고 결과보고서를 제출하여야 한다.

바. 수급인은 설계도서 납품 전에 본 건 일체에 대하여 제3자에게 공개 또는 발표하여서는 안된다.

사. 수급인은 제출도서 일체에 대하여 책임을 지며 시공도중 설계도서가 부합되지 않을 경       우 현지조사 및 시험을 경기문화재단의 요구에 따라 시행하여야 하며 이때의 비용은        수급인이 부담하여야 한다. 또한 검수 후에도 설계상의 결함사항 및 수정사항은 경기       문화재단의 요구에 즉시 응하여야 한다.

10. 중간 납품

사업시행계획에 따라 경기문화재단이 필요하다고 인정하여 요구하였을 때는 이에 응하여야 한다.

11. 납품 및 검수

가. 본 설계용역에 대한 납품은 조달청에 시설공사 계약을 의뢰할 수 있도록 경기문화재단이  제시하는 자료에 의거 납품하여야 하며, 최종 설계도서는 경기문화재단의 검수자가 충분히 검수할 수 있도록 계약납품일 10일 이전에 제출하여 검사를 받은 후 완료일까지 제출하여야 한다.

나. 설계서 원도, 각종 디스켓 및 산출근거 (공사비 계산 및 기타 자료) : 원본은 최종납품       과 함께 각 5부를 제출하여야 한다.

(1) 설계보고서

(2) 실내투시도

(3) 조감도

(4) 설계예산서(설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서)

(5) 설계도면

(6) 공사시방서

(7) 유지관리지침서

(8) CD타이틀

(9) 인허가 서류 및 도서

(10) 보수·보강 서류 및 관련 내역서

(11) 공사입찰용 설계도서

(12) 기타 발주청이 요청하는 자료

다. 용역 업무에 종사하는 인원의 개인별 업무 분담계획서를 착수계 제출시 제출하고, 용       역 완료시 참여기술자의 명단과 실제 참여한 업무내용을 구체적으로 명기하여 완료계       제출시 제출하여야 한다.

12. 계약 해제

설계용역 계약 체결 후 작업진행 도중, 다음의 경우에는 경기문화재단이 일방적으로 계     약을 해지할 수 있으며 수급인은 이의를 제기할 수 없다.

가. 계약서상의 용역설계도서 작성지침 및 계약 후 제시하는 제반자료의 지시사항을 고의       또는 임의로 불이행하였을 경우

나. 수급인 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 설계작성 시행계획표와 작업의 진행        이 일치하지 않아 지정 기일 내에 도저히 납품 가능성이 없다고 예상될 경우

다. 수급인이 고의 또는 부주의로 설계내용을 공개하여 경기문화재단의 작업 추진 상 물의       를 야기시켰을 경우

13. 설계 보완

가. 제출된 설계도서는 경기문화재단이 관계기관과의 협의 및 공사집행 과정에서 보완 사       항이 있을 시는 상호 협의를 거쳐 즉시 수정 및 보완을 하여야 한다.

나. 수급인은 건축물이 준공될 때까지 관계서류 및 관계도서를 수정 ․ 보완하여야 한다.

다. 기타 관계기관의 협의 신청 관계서류는 완료될 때까지 수정 ․ 보완 제출하여야 한다.

라. 건축물관리대장은 건축물대장의 기재 및 관리 등의 관한 규칙에 의거 작성하여 용역        납품시 디스켓 포함하여 제출하여야 하며, 공사 중 설계변경으로 인하여 건축물대장        변경 기재사항이 발생 시 수정․보완하여 제출하여야 한다.

14. 납품 기한

본 설계의 납품기한은 특별한 사유가 없는 한 착수일로부터 80일(인허가 기간 제외)이     내에 납품하여야 한다.

15. 기타 사항

가. 본 설계는 경기도의 예산편성방침으로 정한 시설비 단위단가에 의한 추정공사비를 초       과한 설계금액이 되지 않도록 한다.

나. 경기문화재단의 필요에 의하여 각 공종별(예 : 시설, 공업 등)설계용역 협의회 개최요       청 및 경기문화재단 관계자 협의회가 있을 시는 즉시 각 공종별 설계자 또는 담당자가       참석토록 하여야 하며, 필요시 설명자료를 작성하여야 하며, 협의회 내용을 검토하여       충분히 반영토록 한다.

다. 용역수행 중 과업지시 및 경기문화재단의 방침이 변경되었을 때는 즉시 변경된 방침에       따라 과업을 수행하여야 하며 타 공종에 변경된 내용을 반드시 통보하여야 한다.

라. 용역수행 완료 후 시공과정에서 난해한 설계부분과 누락된 부분이 있을 시는 반드시        설계도서를 보완하여야 한다.

마. 본 과업지시에 제시된 이외의 사항이라도 본 과업수행을 위하여 필요한 것이라고 인정       될 시는 보완하여야 한다.

바. 경기문화재단은 중대한 상황의 변동 등으로 과업의 내용을 일부 또는 전부의 이행을        일시 중단시키거나, 과업의 범위를 변경할 수 있으며, 이 경우 그 변경부분에  상당한       보수를 증감할 수 있다.

사. 용역수행자는 심의 및 인허가 관련된 도서를 작성해야 한다.

아. 용역대가의 조정 및 변경

설계 과업 중 미비한 설계변경시 설계금액에 대하여 변경 없이 진행하고, 기타사항은      상호 협의하여 진행한다.

자. 본 과업수행에 있어 과업지시서의  문맥해석 등에 대하여 의견이 상이할 때에는 경기       문화재단의 해석에 따르는 것으로 한다.