공 사 시 방 서

( 공사명 : 경기아카이브전 임학임산학관 건축물 옥상 방수공사 )

2018. 4.

경기문화재단

□  공 사 설 명 서

○ 공 사 명 : 경기아카이브전 임학임산학관 건축물 옥상 방수공사

○ 위    치 : 경기도 수원시 권선구 서둔로 166 경기상상캠퍼스내

임학임산학관 옥상

○ 공사내용

구 분	공 사 내 용	비 고
방수공사	⦁기존 바탕콘크리트 철거
	⦁점착형 합성고무계 복합시트(t=3mm)
	⦁폴리에틸렌 방수보호재
	⦁방수 보호층 시공

○ 공사기간 : 착공일로부터 60일간

제1장 공사 일반시방

1. 공사일반

가. 적용범위

1) 적 용

이 공사시방서는 경기문화재단 경기상상캠퍼스 (이하 “경기문화재단”이라 한다)가         발주하는『경기아카이브전 임학임산학관 건축물 옥상 방수공사』에 적용한다.

2) 적용순서

가) 설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

(1) 공사시방서

(2) 설계도면

(3) 물량내역서

(4) 일반 및 특별시방에 규정되지 않은 사항은 관련법규 및 국토교통부제정 표준시             방서등에 준용한다.

3) 법규 우선준수

계약상대자는 이 시방서에 “～법규에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다”         라고 별도로 명시되어 있지 않는 한, 이 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국         관련법규의 규정과 상호모순될 경우(건설공사중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정         에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야         한다.

4) 감독자 경유

계약상대자 및 현장대리인이 경기문화재단에 통지 또는 제출하는 서류는 공사 감독         자를 경유하여야 한다.

나. 용어의 정의

1) 설계서

이 시방서에서 “설계서”라 함은 "공사계약일반조건 제2조제4호”의 “설계서”로         써 시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다.

2) 계약문서

이 시방서에서 “계약문서”라 함은 "공사계약일반조건 제3조”의 “계약문서”로써         계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역         서로 구성되며, 상호보완 효력을 가진다.

3) 감독자

이 시방서에서 "건설공사 감독자(이하 이 시방서에서 “감독자”라 한다)"라 함은 "         공사 계약일반조건 제2조 제3호"의 “공사감독관”를 말한다.

4) 계약상대자

이 시방서에서 "계약상대자"이라 함은 "공사계약일반조건 제2조 제2호"의 “계약 상         대자”를 말한다.

5) 공사 현장대리인

이 시방서에서 "공사 현장대리인(이하 이 시방서에서 “현장대리인”이라 한다)"이         라 함은 "공사계약일반조건 제14조"의 "공사 현장대리인"을 말하며, 공사에 관한 전         반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말         한다.

6) 현장요원

이 시방서에서 "현장요원"이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서         계약상대자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

7) 용어의 해석

이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 해석한다.

가) 계약문서 (이 시방서를 포함한다)

나) 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

다) 기타 건설관련법규

라) 공사 종류별 용어사전

마) 국어사전

다. 공사감독자의 업무

1) 감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대         리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상         대자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위내에         서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

2) 감독자가 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다          만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할          수 있다.

라. 계약상대자의 책무

1) 설계서 검토

가) 계약상대자는 공사 착수전에 설계서를 면밀히 검토하여, 설계서의 오류, 누락 등            으로 인해 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하            여야 한다.

나) 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있            을때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

2) 공사수행

가) 계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 감독자의 정당            한 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계            약문서에 정해진 것에 대하여는  감독자의 승인, 검사 또는 확인등을 받아야 하            며, 경기문화재단에 승인을 받은 문서는 계약문서와 동등한 효력 을 가진다.

나) 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는             부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

다) 계약상대자는 건설공사와 관련하여 정부 또는 공항공사가 시행하는 감사, 검사             수감  및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 공항공사의 과실이 없는            한 이를  이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

라) 계약상대자는 공사 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질 향상, 안전사고 및             환경공해 예방, 보건·위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재의 정리·정            돈·점검·정비·청소 등을 충분히 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

마) 계약상대자는 “공사계약일반조건 제47조제1항”에 따라 공사를 일시정지한 경우            에는 공사중단으로 인하여 공사목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사중단부분,            공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

3) 책임 한계

가) 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용            한자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한             행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나) 공사목적물을 공사에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형            등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대            자가 교체,원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다) 계약상대자가 감독관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기            는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

4) 현장대리인 등의 현장상주

가) 계약상대자는 관련법에 의한 자격 소지자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상            주 하도록 하여야 하며, 현장대리인은 감독자의 지시에 따라 공사를 충실히 수행            하여야  하고, 감독자의 승인 없이는 현장을 이탈할 수 없다.

나) 계약상대자가 지정·배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자(필요시), 품질관리            자 등(필요시)은 현장에 상주하여야 한다.

다) 감독자는 현장대리인, 현장요원 및 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리            측 면에서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

5) 작업시간

가) 시공자는 공사 시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간작업을 시            행할 때에는 미리 감독자에게 보고하여야 한다.

나) 감독자가 공사시행의 형편에 따라 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작            업의 필요성을 인정하고 작업지시를 할 경우 특별한 사유가 없는한 시공자는 그            지시에 따라야 한다.

6) 화재예방 및 안전사고 방지등

가) 건설공사 재해방지는 산업안전보건법등 관계 법령에 따라 철저히 이행하여야 하            며, 공사시행중 현장대리인은 화재,도난,안전사고등의 재해방지를 위한 계획을 수            립하여 시행하여야 하며, 특히 작업자 및 기타 출입자에 대한 감시를 철저히 하            여 음주, 풍기문란등의 행위가 없도록 하여야 한다.

나) 안전관리자 또는 안전담당자를 관계법령에 적합하게 별도로 지정하여 현장을 수            시로 순찰케하여 각종 안전사고가 없도록 하여야 하며, 관련법령에 따른 교육을            실시하고 기록을 유지하여야 한다.

다) 안전관리비의 집행에 따른 집행계획 및 집행실적을 항시 비치하고 관계 법령에

따라 적합한 용도에 사용하여야 한다.

라) 시공자는 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 산업안전보건법등 관련규            정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

마) 공사 시공중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독자에게

보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

7) 손해 배상

공사 시행중 재해가 발생한 경우 또는 제3자에게 미치는 장애 및 손해에 대하여는          신속히 원상 복구 및 배상조치를 취하여야 하며, 이에 대한 모든 비용은 도급자가          부담하여야 한다.

8) 보 양

기존시설, 완공부분, 신품재료등이 손상 또는 오염이 되지 않도록 적절한 방법으로         보양하여야 하며, 공사중 손상부분은 준공기간내에 원상복구 하여야 한다.

9) 안 내

필요한 경우 감독자와 협의하여 지정하는 위치에 공사안내문을 미려하게 설치하여야         한다.

10) 재 료

가) 사용재료

본 공사에 사용하는 모든재료는 신품으로 KS제품을 사용하여야 하며, “자원의절            약과 재활용촉진에관한법률”에 의거 재활용품 및 “친환경상품 구매촉진에 관련            법률(이하 친환경상품법)에 따른 친환경상품을 적극활용할 수 있도록 하며, KS제            품 및 재활용품이 없을시에는 시중 최고 상등품 또는 동등품질 이상의 재료를 사            용하여야 한다.

나) 재료의 반입과 보관

재료는 반드시 규정된 조건에 적합한지 감독자의 승인을 사전에 득한 후 반입하            여야 하며, 합격된 재료는 지정된 장소에 안전하게 보관하고 불합격된 재료는 즉            시 현장 밖으로 반출하여야 한다.

다) 재료의 반입과 관련하여 필요한 경우 감독자는 국가공인기관에 의뢰하여 시험을            실시할 수 있으며, 이 경우 비용은 도급자의 부담으로 한다.

11) 설계도서 작성 및 관리

가) 본 공사를 위하여 필요한 세부 시공상세도는 감독자가 제시하는 설계도를 기준으            로 작성하여 제출, 감독자의 사전승인을 득한 후 공사에 임하여야 하며, 이로 인            하여  공정에 지장이 없도록 하여야 한다.

나) 본 공사 완료 후에는 설계도서를 감독자에게 반납하고 공사 중에는 외부로 유출            되지 않도록 철저히 관리한다.

12) 공사보고

가) 공정 보고

현장대리인은 공사의 진척, 예정사항 재료의 반입 및 기타 필요한 사항등이 포함

된 일일공사일지, 주간, 월간 공정보고서 등을 감독자에게 제출하여야 한다.

나) 공사 사진

2.3 공사사진” 참조

2. 제출물

계약상대자는 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 준거     하여 작성하여야 하며, 상시 비치를 요하는 서류는 공사 중에는  감독자가 필요시 수시     로 열람 할 수 있도록 비치하고, 제출을 요하는 서류는 지정된 제출시기에 지정된 부수     를 감독관에 제출하여야 한다.

가. 착공서류

1) 착공신고서

가) 제출서류

(1) 착공신고서

① 현장기술자 지정신고서

② 현장대리인, 현장요원, 안전관리자를 통합하여 작성한다.

나) 제출시기 및 부수

공사 착공시 각 3부 제출

2) 공사계획서류

가) 제출서류

(1) 공사예정공정표

(2) 안전관리계획서

(3) 공사시공계획서

(4)제품관리계획서

(5)시공상세도면

(6) 현장기술자 조직표

계약상대자 본사의 해당 현장 담당원 조직표 및 현장기술자 조직표를 함께 제출               한다.

나) 제출시기 및 부수

공사착공시와 계획변경시 각 3부

나. 공사 예정표

1) 공정표

가) 공사예정공정표는 C.P.M 또는 BAR CHART 방식등으로 작성되어야 한다.

나) 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

(1) 주요공정단계별 착수시점, 완료시점

(2) 주간 공정률 및 누계진도

2) 제출시기 및 부수

공사착공시와 계획변경시 각 3부.

다. 공사 사진

1) 비치 및 제출

공사진행에 따라 공정별, 부위별로 감독자가 지시하는 공정, 공사시공중 매몰되어 나        타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 및 전경을        분명히 나타내는 천연색 사진 또는 유사한 촬영방법으로 기록, 사진첩 및 CD등으로        정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며, 준공시, 필요에 의해 감독자가 요구하는 경        우 공항공사에 제출하여야 한다.

2) 촬영방법

공사 시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시        공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

라. 공사작업일지

1) 제출서류

공사작업일지

2) 제출시기 및 부수

매일 09:00시 전까지 1부 제출

3) 주간, 월간 공정보고서 제출

마. 준공검사원

1) 제출서류

준공검사원

2) 제출시기 및 부수

준공검사 요청시 각 2부 제출.

3) 준공검사원 제출시 감독자의 확인을 받아야 하는 사항

가) 안전관리비 사용내역

나) 공정현황

다) 시공확인 결과에 관한 기록

라) 현장점검 지적사항 조치완료 여부

바. 변경승인 요청

1) 설계변경승인 요청

가) 제출서류

(1) 변경요청 공문

(2) 변경 사유서

(3) 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

(4) 변경 설계도면

(5) 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

나) 제출시기 및 부수

설계변경 승인요청시에 각 2부 제출

2) 공사기한 연기원

가) 제출서류

(1) 공사기한 연기원

(2) 연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

(3) 공사중단사실확인서 및 증빙자료(공사중단으로 인한 공사기한 연기원 제출시)

(4) 공사의 준공일정계획에 대한 의견서

(5) 기타 관련증빙자료

나) 제출시기 및 부수

공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

사. 자재관리서류

1) 자재 선정검토 요청서

공사용 자재 선정을 위하여 자재선정 검토 요청시 1부 제출한다. 이 요청서에는 해         당제품에 대한 자료를 첨부하여야 한다.

2) 자재 검수부

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 반입시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는         지 여부를 확인한 후, 그 결과를 품목별로 종합기록하여 비치한다.

아. 안전관리서류

1) 안전관리계획서

계획서 제출시기 및 부수는 착공서류 및 공사계획서류를 참고한다.

2) 일일 안전점검표

계약상대자가 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검         사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한         다.

3) 안전일지

계약상대자가 자체관리하며, 관리기록을 상시 비치하여야 한다.

4) 안전관리비 사용내역 및 집행영수증

계약상대자는 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 월 1회, 기성         검사원 및 준공검사원 제출시 1부를 제출하여야 한다.

자. 도면관리

1) 도면의 대출

가) 공사에 필요한 도면은 감독관의 승인을 받아 대출 받아야 한다.

나) 대출받은 도면은 대출목적 이외의 사용을 금하고 대출기간 만료 이전이라도 대출            목적이 충족되면 즉시 반납하여야 한다.

다) 대출받은 도면은 임의로 복제․복사를 하여서는 아니되며, 필요추가시 대출을 요청            하고 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

2) 도면관리

가) 대출받은 도면은 관리번호를 부여하여 철저하게 관리해야 한다.

나) 대출받은 도면을 하도급자에게 불출할 경우에는 기록유지를 철저히 하고 불출목            적이 충족되면 즉시 반납을 받아야 한다. 하도급자에게 불출된 도면의 관리도 계            약상대자 책임하에 관리하여야 한다.

3) 도면반납

대출받은 도면은 공사완료 후 즉시 반납 해야한다.

제2장 방수공사 특기시방

1. 가설공사

가. 가설 창고

구 분	재 료	규 격	수 량
가설 창고	컨테이너	3m×6m×2.6m	1동

1) 공사 착수전에 설치하여야 하며, 위치는 감독자와 협의 후 지정된 장소에 설치하여         야 한다.

2) 세부시공 계획서

공사착수 전에 가설 울타리, 재료 반입로, 기계기구의 설치위치, 임시동력 수변전

설비, 가설 급배수계획 등 공통 가설공사 전반에 걸친 상세한 상황을 도면(배치도)에    기입하여 감독자의 승인을 받는다.

3) 공사안내 표지판

감독자가 지정한 위치에 공사명칭, 발주자, 설계 감리자 및 시공자 등의 명칭을 감독자가 지시하는 지정색으로 표기한다.

나. 보양 및 현장정리

1) 공사중 기존 건축물 또는 기타 시설물을 훼손하거나 오염의 우려가 있는 부분에는       적절한 보양을 하며, 훼손시 시공자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

2) 공사장내는 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 공사장내의 각종 재료를 수시로 정리정돈해야 하며 항상 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 청소해야 한다.

3) 가설 용수, 가설전력은 감독관의 임시전력사용 승인을 받고 사용하여야 한다

4) 작업현장에는 소화기를 항상 비치하여야 한다.

2. 방수공사

가. 일반사항

1) 방수공법

구 분	규 격	시 공 부 위	비 고
비노출공법 바탕처리 점착형 합성고무계 복합시트 시공 보호층 시공(콘크리트)	T=3mm	경기상상캠퍼스내 임학임산학관 옥상 전체 부위 총면적 (1,138m2)	시트규격 : 1m×10m/롤 (제조사별)

2) 적용범위

본 시방서는 주로 건축물 노출옥상 및 구조물의 내․외부면에 적용되는 공법으로 바         탕면 전처리 프라이머작업 바탕조정 작업 후 무용재 재료를 이용하여 방수, 코팅을         적용 한다

3) 품질기준

공사의 주 방수재인 점착형 합성고무계 복합시트 자재만 사용 하는 것을 원칙 으로         하고 부차적인 재료는 감독자가 지정하는 자재를 사용한다.

가) 한국산업규격 (KS)

(1) KS M 5000  도표 및 관련 원료의 시험방법

4) 제시물

가) 국가 공인기관에서 시험한 자료를 제출한다.

나) 제품자료

주자재 및 부자재에 대하여 제조업자의 제품 자료로서 자재의 종류별로 아래 자            료를 제출하여야 한다.

(1) 제조업자 공사시방서(시방서에는 재료의 구성, 취급 및 저장지침,

바탕면 준비 작업, 시공방법, 추천하는 마감 후의 도막 두께 등을 포함한다.)

(2) 자재의 특성 및 물성

(3) 자재를 사용할 때 유해물질 과다노출에 대한 보호 등 안전에 관한 사항

(4) 본 절의 “현장 품질시험”에 의거, 시행할 시험품목의 화학적 특성의 허용 기              준치 및 허용오차범의가 명시된 화학 분석표

다) 시공계획서

(1) 자재의 종류 및 수량별 반입계획

(2) 공부위별 공법

(3) 시공 횟수별 도막두께 등에 관한 사항이 포함된 방수공사 품질 공사관리 계획

5)  품질보증

가) 견본시공

(1) 견본시공 면적은 5m²이상으로 한다.

(2) 위치는 감독자가 지시하는 부위에 실시한다.

나) 재료의 상용성

각 자재는 초벌용 도료와 동일한 제조회사의 자재를 사용함을 원칙으로 하여               상호 사용성이 있는 제품을 공급한다.

다) 시공전 협의

공사를 착수하기에 앞서 해당 공정 선시공 요구 등 공종간 상호 간섭사항                  에 대하여“시공관리”에 따라 수급자, 관련된 타공정 수급자, 하수급자가

모두 참석하는 공사착수회의를 개최하여 공사진행에 차질이 없도록 한다.

라) 유지 및 보수 마감면 보수

(1) 타 공사에 의하여 손상된 부위를 수선하여 공사 완공 인계시에 표면이 새로               마감된 부분과 품질 및 색상에서 차이가 없도록 한다.

6) 운반, 보관 및 취급

가) 일반사항

(1) 방수재는 생산자명(또는 회사명), 상품명, 용도, 실중량,제조일자(또는로트번호),              주소 및 전화번호, 취급시 주의사항 등이 표시된 포장상태로 현장에 반입하여             청결하고 통풍이 잘되는 장소에 훼손되지 않도록 보관하며 습기 및 화기에

주의한다.

(2)장시간 보관을 하여야 하는 경우에는 시공 장소에 인접한 곳에 시트를 세워서            보관하며, 시트끼리 3단 이상 적재는 피하며, 보양재를 덮어 보관하여 둔다. 바           닥의 통풍을 고려하여 목재깔판을 사용, 습기가 포장재료에 닿지 않도록 주의하           여 보관한다.

(3) 자재의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 주의하고, 손상된 제품은 즉시 반출               한다.

(4)자재의 반입 시기는 소요공사 기간 외에 품질시험에 소요되는 기간을 고려하여             결정 한다.

7) 환경요구사항

가) 일반사항

(1) 젖어 있거나 습기가 차 있는 바탕면과 먼지, 흙, 녹, 기름, 구리스 등 기타                 유해한 물질이 묻어 있는 바탕면에는 시공을 해서는 안된다.

나. 제 품

1) 사용자재

가) 점착형 합성고무계 복합시트

구 분	규 격	비 고
점착형 합성고무계 복합시트 (공법 및 제품은 감독관 승인 후 시공)	점착 복합시트: 3.0T 이상 (점착층 1.0mm 이상)	시트규격 : 1m×10m/롤 (제조사별)

2) 자재 품질기준

가) 프라이머

부착력을 만드는 프라이머로서 현장에 따라 방청기능이 있는 에폭시계를 선택              시공한다.

나) 바탕조정재

빠른 경화 물성상 페인곳이나 평활성을 유지해야 되는 곳은 셀프 기능을                   가진 우레탄수지를 이용하여 균일하게 시공한다.

다) 방수

주성분인 폴리에틸렌(PE) 방수층 보호재 시험방법에 따라 품질 규격을 만족                하여야 한다.

라) 시트공법

합성고무계를 주성분으로 한 전용제품으로서 발주 자 대리인 이 승인한                    견본품으로 한다.

마) 색 상 : 감독자가 승인한 색상

3) 자재품질관리

가) 자재 현장 반입시 감독자의 입회하에 제조업자명, 상품명, 제조년월일 유효사용             기간,품질기준 등에 대하여 공사 감독자 입회하에 검수를 받고 합격한 제품에              한하여 현장에 반입한다.

나) 자재는 색상과 표면질감, 품질이 견본품과 동일하여야 한다.

다) 당해 현장 내에 사용되는 자재는 그 종류별로 단일 제조업자의 제품을 사용한다.

라) 공장에서 배합이 완료된 제품을 사용하며, 현장 희석은 특기가 없는 경우 제조             업자가 인정하는 범위 내에서 시행한다.

마) 공사완료후의 마감상태는 요구 기준에 적합해야하며 색상은 승인을 받아 결정              한다.

다. 시 공

적용 부위에는 도면 시방서 기준에 의한 자재를 사용한다.

1) 시공조건 확인

가) 바탕면 정리

(1) 시공 전 기존면의 요철, 굴곡이 없는 매끄러운 평활상태를 유지한다.

(2) 시공부위는 레이턴스 및 시멘트 등의 부스러기, 먼지, 유분, 물고임 등방수재

의 밀착을 저해하는 불순물이 없도록 깨끗이 청소해야 하며, 이때 청소기 등을              이용하여 미세한 분말도 제거하여 방수재의 접착성능을 확보한다.

2) 작업준비

가) 일반사항

(1) 시공현장에 반입된 제품은 제품의 Lot, 도장재별로 구분하여 시공할 현장에                적정량을 배분한 뒤 그 수량을 확인한다.

(2) 시공면적, 납기 및 시공조건에 따라 사전에 시공인원을 배정한다.

(3) 시공 전 설계도면을 기준으로 감독자에게 부위별 시공 범위 등을 재확인하고              승인을 받는다.

(4) 시공부위에 자재를 미리 운반하여 기온, 습도 등에 자재가 적응할 수 있도록               한다.

3) 시공기준

가) 프라이머 도포

(1) 프라이머 도포전 바탕면의 이물질 및 돌출부위를 제거하고 함수율 8%미만일 때             프라이머 도포 작업을 진행한다.

(2) 바탕처리가 끝난 후 프라이머를 스프레이, 로울러 또는 붓으로 200㎛                      1~2회 균일하게 도장한다.

(3) 희석치 않고 사용하며 부분적으로 후도막이 되지 않도록 도장하여야 한다.

(4) 도포 후 또는 시트 시공 전 비를 맞혔거나 장기간 방치된 경우에는 재도포를              해야한다.

나) 바탕조정재 도포

(1) 프라이머 도장 후 3시간 48시간 이내에 하되 도막위의 모든 오염물을 제거하고             평활성이 필요한 부부 및 CON'C공극을 고무헤라 및 붓이나 로라로 충진해                 준다.

(2) 바탕조정재는 현장에 따라 제조사가 추천하는 제품을 사용한다.

다) 스프레이작업

(1) 바탕조정재 시공후 1~3일 이내에 표면의 오염물을 제거하고 도장하며 도장                면적 및 도막두께에 대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 준비한다.

(2) 스프레이 전용장비의 Shooting거리는 약 60cm 정도로 하고 토울 20~150kgf/cm             가 되도록 하며 혼합비율은 주제와 경화제가 부피비로 1:1이 되독록 한다.

(3) 주제와 경화제가 각각 이송펌프를 통하여 본체 미터링펌프로 흘러 들어가도록             한다.

(4) 주제와 경화제 온도는 20℃ 이상을 유지하고 온도가 낮은 경우는 미리 가온               한다. 가온은 재료의 점도를 낮춰 포장용기에서 스프레이장치까지의 재료 공급             을 용이하게 하는 효과를 준다.

(5) 주제와 경화제는 가온부에서 약 60~70℃정도의 온도로 가열 시킨 후, 내압 온도             호스에서 액온을 유지 시켜가며 폴리우레아전용 건으로 보내어 건의 혼합실내              에서 고압 충돌 혼합 장식으로 도장 한다.

(6) 시공은 도막두께를 고르게 하기 위하여 +자형으로 뿌려야 한다.

(7) 시공 도막의 핀홀을 없애기 위하여는 1차로 약 0.7~0.8mm 정도를 스프                    레이 한 후 핀홀을 조사하여 핀홀이 있을 경우에는 제조사가 추천하는 퍼티 및             보수재로 메우고 난 후 스프레이하여 시방에 따라 소정의 두께로 스프레이 하고             오차범위는 ±0.3mm로 한다.

(8) 복합시트 방수후 방수검사를 시행토록한다 옥상 전면부에 물을 20cm담수를 하

여 감독관의 방수검사 실시후 합격 판정후 보호콘크리트를 시공한다.

라. 현장 품질관리

1) 방수/바닥공사는 바탕처리, 하도, 상도의 각 단계별로 작업상태 및 도막두께에 대하         여 감독자의 확인을 받은 후 다음 단계의 공정을 시작해야 한다

4. 드레인 설치

가. 재 료

품 명	규 격	시공부위	비 고
드 레 인	스텐 옥상 걸음망 T=125mm	폴리우레아 방수지역

나. 시공

1) 기존의 낡은 드레인을 철거한 다음 신품으로 교체 설치하여야 한다. 설치된

드레인은 움직이지 않도록 단단히 고정 시킨다.

5. 백화 및 박테리아 제거

가. 백화제거

1) 적벽돌 및 경사 파라펫 적색 기와 표면 위 백화를 완벽하게 제거하여야 한다.

2) 제거 작업시 오염된 표면을 깔끔히 닦고, 백색가루를 제거한 후에, 드라이 하여

완전하게 수분을 제거한 다음 재발하지 않도록 발수제를 도포한다.

나. 박테리아 제거

1) 경사 파라펫 적색 기와 표면 위의 박테리아 곰팡이를 완벽하게 제거하여야 하며,

제거시 화학약제 및 물을 혼합하여 고압으로 세척한 다음, 발수제를 도포하여야

한다.

2) 발수제는 수분을 완전하게 양생한 다음 포도하여야 한다.

3) 기타 청소 및 뒷정리를 철저히 하여야 하며, 시공시 교육에 지장이 없도록 충격 및

진동을 금한다.